맑은물사업소

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 주요 업무계획

○근남정수장 준공(맑은물사업소 이전) 및 정수장 명칭변경	5

○검침업무의 고객만족도 업(UP)	6

○맑고 깨끗한 물 공급을 위한 수질검사 강화	7

○우리집 수돗물 안심확인제 시행	8

○직원 전문성 함양 및 직무역량 강화	9

○지방상수도 현대화사업	10

○울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업	12

○근남지방상수도(매화면) 확장사업	13

○온정면 등 급수구역 확장사업	14

○지방상수도 노후관로 갱생사업	15

○지방상수도 급수구역 확장에 따른 마을상수도 편입	16

○소규모수도시설 위탁 운영관리	18

○소규모수도시설 노후관로 개선사업	19

○평해 하수관로 정비사업(2단계)	20

○오산 농어촌마을하수도 설치사업	21

○북면 공공하수처리시설 증설사업	22

○하당 농어촌마을하수도 설치사업	23

○사동 농어촌마을하수도 설치사업	24

○울진 하수관로 정비사업(2단계)	25

○북면 하수관로 정비사업(2단계)	26

○진복․망양․봉산 농어촌마을하수도 설치사업	27

○울진군 하수도정비 기본계획(변경) 수립	28

Ⅰ. 일반현황

▢ 직원 정․현원

구 분	총 계	공 무 원				실무원 (검침원)	기간제
		소계	소장	팀장	일반직
정원	50	31	1	5	25	16	3
현원	46	27	1	5	21	16	3
증감	-4	-4	0	0	-4	0	0

▢ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	소 관 업 무	비고
계	27
소 장	1	상하수도 사업 종합관리
경영관리팀장 (행정6급)	4	사업소 종합기획 조정, 청사관리 공기업 회계 및 일반회계 운영 집행 상하수도 사용료 부과·징수
지방상수도 운영팀장 (공업6급)	7	울진지방상수도 확장사업 추진 취수원 주변지역 지원사업 추진 상수원보호구역 관리 지방상수도 취정수장 및 배수지 관리
지방상수도 시설팀장 (시설6급)	6	지방상수도 기본계획수립 및 시행 블록시스템 구축 및 유수율제고사업 추진 상수도시설 운영 및 관망관리 급수신청 및 사용허가, 저수조 관리 등
마을상수도팀장 (공업6급)	4	마을상수도 및 소규모급수시설 기본계획수립․시행 마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 소규모수도시설 통합관리시스템 운영관리 마을상수도 및 소규모수도시설 비상급수 지원
하수도팀장 (환경6급)	5	울진군 하수도 기본계획수립․시행 공공․소규모(마을)하수처리장 시설사업 추진 하수도․하수관거 사업추진 및 유지관리 배수펌프장 유지관리 공공하수처리장(6개소),소규모(마을11개소)운영관리

▢ 각종 통계현황

❍ 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 (원자력특별회계포함)				공기업특별회계
2019년 (당초)	2018년			2019년 (당초)	2018년
	소계	당초	이월		소계	당초	이월
24,788	44,535	42,442	2,093	23,781	46,025	22,340	23,685

❍ 상수도 현황

구 분	계	지방상수도	소규모 수도시설	전용상수도	기 타 (우물,샘)
개소수	154	3	144	7	-
인구(명)	51,636	36,502	12,187	2,430	517
비율(%)	100	70.7	23.6	4.7	1.0

※ 지방상수도 보급률 : 70.7%,   유수율 : 68%

❍ 하수도 현황

구 분	계	공공하수도	마을하수도	하수도미설치
개소수	17	6	11
인구(명)	51,636	35,286	3,061	13,289
비율(%)	100	68.4	5.9	25.7

※ 하수시설 보급률 : 74%

▢ 각종 시설물 관리현황

❍ 상수도시설 현황

시 설 명		소 재 지	시설용량 (㎥/일)	취 수 원	비고
계		171개소	44,927
지 방 상수도	소 계	4개소	35,500
	울진정수장	울진읍 새마실1길 55-31	6,000	울진남대천	1977
	평해정수장	평해읍 월송정로 39-17	11,000	평해남대천	2010
	온정정수장	온정면 백암온천로 1289-50	3,500	온정소태천	2016
	근남정수장	근남면 노음리 709-1	15,000	왕피천, 광천	2018 준공
소규모 수도시설	소 계	144개소	7,816
	마을상수도	28개소	3,590	지하수, 계곡수 호소수, 복류수
	소규모급수시설	116개소	4,226	지하수, 계곡수 복류수

❍ 하수처리시설 현황

◦ 공공하수처리시설

시 설 명	소 재 지	시설용량 (톤/일)	처리방법	비 고
계	6개소	25,000
울진하수처리시설	울진읍 말루길 214	9,000	Bio-SAC BNR	2003
온정하수처리시설	온정면 소태하암길 59	6,500	회전원판접촉법	1994
죽변하수처리시설	죽변면 봉화길 104	3,000	SAM Process	2012
후포하수처리시설	후포면 삼덕로 99	4,000	SAM Process	2012
북면하수처리시설	북 면 남산길 214	1,200	BSTS-Ⅱ	2014
평해하수처리시설	평해읍 월송정로 225-7	1,300	KSBNR	2016

※ 슬러지처리시설(고화처리) : 5톤/일(울진하수처리시설 내)

◦ 마을하수처리시설

시 설 명		소 재 지	시설용량 (톤/일)	처리방법	비 고
계		11개소	840
울진읍	무월동	울진읍 호월리	50	고효율오수처리
	호월3리	울진읍 호월리	30	분리 접촉포기법
평해읍	삼달1리	평해읍 삼달리	45	유동상담체를 이용한 고도처리방법
북면	주인1리	북 면 주인리	45	BCS - II공법
금강송면	삼근리	금강송면 삼근리	60	SMMIAR
근남면	구산1리	근남면 구산리	50	BSTS - II공법
매화면	매화1리	매화면 매화리	120	FNR PROCESS
	매화2리	매화면 매화리	50	SMMIAR
기성면	구산리	기성면 구산리	200	BSTS - II공법
	척산리	기성면 척산리	130	KS MBR공법
온정면	내선미	온정면 선구리	60	SMMIAR

❍ 배수펌프장 현황

시 설 명	소 재 지	시설용량	처리방법	비 고
계	2개소
울진배수펌프장	울진읍 읍내리	400HP×3대 250HP×1대	강제배수
후포배수펌프장	후포면 삼율리	50HP×3대	강제배수

※ 평해배수펌프장 : 평해읍 평해리, 시설용량 175HP×1대 125HP×1대

처리방법(강제배수), 한국농어촌공사 관리

Ⅱ. 주요 업무계획

경 영 관 리 팀

1		근남정수장 준공{맑은물사업소 이전} 및 정수장 명칭변경		<신규>

❍ 울진상수도의 통합정수장(근남) 준공으로 맑은물사업소를 이전 하여 보다 안정적이고 깨끗한 맑은물을 공급함으로써 대민 서비스

질을 향상 시키고

❍ 맑고 깨끗한 울진「물」고유브랜드인「보배수」의 이미지를 제고함으로서 울진「물」의 깨끗함을 홍보하고자 함.

▢ 맑은물사업소 이전

❍ 위    치 : 울진군 근남면 노음리 700번지 일원

❍ 건축개요

∙ 지하1층, 지상2층 철근콘크리트조 건축면적 1,884.18㎡

❍ 이전 예정일 : 2019. 1. 14.(월)

❍ 향후일정

∙ 2019. 2. ~ 3. : 준공식

※ 현 사업소 활용계획 : 울진공공하수처리시설 사무실 이용

▢ 정수장 명칭 변경

❍ 시대의 흐름에 따른 현대화된 명칭으로 변경

❍ 울진 수돗물의 등록상표인「보배수」를 포함한 명칭 변경

❍ 시설별 명칭변경계획

∙ 현『(울진,평해,온정) 정수장』을

⇨ 『보배수 (울진,평해,온정,근남) 정수센터』로 변경

❍ 명칭변경시점 : 근남정수장 준공일을 기준

2		검침업무의 고객만족도 업(UP)		<신규>

❍ 상수도 검침시 수용가의 불안과 거부감을 해소하기 위하여 명찰 패용, 사용량 안내 등으로 민원요인 사전예방 등 고객만족도 업(UP)

❍ 소통하고 공감하는 상하수도 행정 구현으로 군민 신뢰도 제고

▢ 개    요

❍ 검침원 전용 조끼 착용 및 명찰 제작 패용

∙ 시행시기 : 2019. 1. ~ 12.

∙ 대    상 : 16명(검침원 16)

❍ 누수방지 사용량 급증 및 검침일 안내 스티커 제작․부착

∙ 시행시기 : 2019. 1. ~ 12.

∙ 대    상 : 관내 20,000가구 급수전

❍ 상수도시설 선진지 견학

∙ 시행시기 : 2019. 5월중(2박3일)

∙ 대    상 : 18명(검침원 16, 직원 2)

∙ 소요예산 : 4,800천원

▢ 추진내용

❍ 검침원 전용 조끼 착용 및 명찰 패용 검침 실시

❍ 사용량 급증 사전안내 및 검침 날짜 알림서비스

❍ 검침원 안전 및 친절교육 실시(월1회)

❍ 군정 주요시책 홍보 등 행정서비스 제공

❍ 사회취약계층 생활민원 기동처리대상자 발굴 – 연계처리

▢ 기대효과

❍ 소통과 상생의 검침업무로 행정신뢰도 제고와 사기진작에 기여

❍ 검침원 상시 교육으로 민원발생 사전 차단 및 민원서비스 역량제고

❍ 군정의 주요시책 및 안심하고 마실 수 있는 수돗물 홍보

❍ 사회취약계층의 생활민원 연계로 대민서비스 향상

3		맑고 깨끗한 물 공급을 위한 수질검사 강화		<신규>

❍ 수돗물에 대한 모니터링을 강화하여 맑고 깨끗한 수돗물 공급

❍ 상수도 수질오염 불신해소 및 주민만족도 향상

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.(연중)

❍ 검사대상 : 지방상수도 및 마을상수도

❍ 사 업 비 : 100백만원

❍ 내    용

∙ 수돗물의 원수 및 정수(일일, 주간, 월간, 분기별)

∙ 마을상수도 및 소규모 급수시설(분기별)

∙ 수돗물 안심확인제 운영 : 가정에 직접방문 무료 수질검사

- 검사항목 : 필수 6개(잔류염소, 철, 구리, 탁도, 아연, pH),

선택 1개(망간, 색도, 경도 등)

▢ 추진계획

❍ 일일, 주간, 월간 등 법정기한 내 수질검사 추진

∙ 자체검사(일일, 주간) 및 검사의뢰(월간, 분기) 병행

❍ 검사결과는 홈페이지, 수돗물품질보고서, 사업소게시판에 공개

▢ 기대효과

❍ 가정의 수도꼭지까지 철저한 수질검사로 수돗물 이미지 개선

❍ 수질검사 결과 공개로 신뢰도 제고

4		우리집 수돗물 안심확인제 시행		<신규>

❍ 수돗물을 원수에서부터 정수를 거쳐 각 가정에 보급되기까지 과학적인 정수체계와 철저한 수질관리가 이루어지고 있으나

❍ 막연한 불안감을 가지고 있어 수돗물 안심 확인제를 시행하여 수돗물에 대한 신뢰도 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 시행시기 : 2018. 5. 1. ~ 계속시행

❍ 신청자격 : 수돗물을 사용하는 군민이면 누구나 가능

❍ 검사내용 : 1차 검사 기준 초과하면 2차에서는 재검사 후 2차 항목 검사

∙ 1차(필수 6개, 선택 1개 항목)

- 필수항목 : 잔류염소, 철, 구리, 탁도, 아연, pH

- 선택항목 : 망간, 색도, 경도

∙ 2차(12개 항목) : 일반세균, 총대장균, 대장균, 염소이온

암모니아성질소 + 1차 항목(7개)

❍ 검사기관

∙ 1차(필수 6개, 선택 1개 항목) : 울진군맑은물사업소 자체검사

∙ 2차(12개 항목) : 먹는물수질검사기관 위탁(1차 부적합시)

▢ 추진실적

❍ 2018년   : 8전(울진읍 5, 죽변면 2, 후포면 1)

❍ 검사결과 : 기준 적정이내

▢ 2019년 추진계획

❍ 우리집 수돗물 안심확인제 시행취지 홍보강화

❍ 다수의 급수가구 신청으로 수도행정 대민 신뢰도 제고

5		직원 전문성 함양 및 직무역량 강화		<신규>

❍ 상하수도 업무 전문교육 강화로 내부역량 및 직무 전문성 향상

❍ 지속적인 교육 실시로 업무의 효율성과 민원응대 역량 강화를

통해 질 높은 대민서비스 제공

▢ 사업개요

❍ 교육과정 : 직무 전문교육과정(1인 1회 이상)

❍ 대    상 : 전 직원

❍ 교육유형 : 집합교육, 사이버교육, 국외교육

❍ 교육방법

∙ 한국상하수도협회, K-water 등 외부기관 위탁 전문교육 실시

(2년 이내 35시간 이상 교육 이수)

❍ 내    용

∙ 법정의무교육(상․하수 분야), 전문교육(공통, 직무분야), 소양교육 등

집합교육과 사이버교육 병행

∙ 직무분야 전문성 강화 및 새로운 선진 수도행정 도입

∙ 고객관리 소통기술, 친절 실무사례 교육 등 CS관련 능력 제고

▢ 기대효과

❍ 상하수도사업 역량 강화 및 공기업 운영의 효율성 제고

❍ 전 직원의 전문성 향상을 통해 민원처리 및 서비스의 질 개선

지방상수도시설팀

6		지방상수도 현대화사업		<계속>

❍ 상수도 공급 및 관리 체계를 합리적으로 개선하고 노후 상수관로를 정비하여 유수율 및 음용율 제고

❍ 노후 상수관망 현대화로 안정적인 수돗물 공급 및 누수량 절감에 따른 경영수지 개선으로 수도사업 선순환 구조 구축

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 관망정비(울진, 평해, 죽변, 후포), 블록구축(급수구역 전역)

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.(5년간)

❍ 사업내용

∙ 블록구축 : 대블록 4개소, 중블록 8개소, 소블록 23,

∙ 노후관망정비 : L=54.4km, 누수탐사 및 복구 1식, 점검구 46개소

∙ 유지관리시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 357억원(국비 213, 도비 44, 군비 100)

❍ 시 행 자 : 한국환경공단

▢ 공사현황

❍ 지방상수도 현대화사업 블록구축공사

∙ 위    치 : 울진군 급수구역 전역

∙ 사업기간 : 2018. 6. 29. ~ 2019. 6.28.(12개월)

∙ 사업내용 : 블록구축(대블록 4개소, 중블록 8개소, 소블록23개소)

∙ 사 업 비 : 4,853백만원(도급 3,073, 관급 1,258, 폐기물 199, 기타 323)

❍ 평해(신) 블록 및 직산거일 노후관로 교체공사

∙ 위    치 : 울진군 평해읍 직산·거일리 일원

∙ 사업기간 : 2018. 6. 29. ~ 2019. 6.28.(12개월)

∙ 사업내용 : 블록구축 및 노후 상수관 정비(L=12.0㎞)

∙ 사 업 비 : 3,112백만원(도급 1,995, 관급 742, 폐기물 288, 기타 87)

▢ 추진실적

❍ 2016.  9. : 위·수탁 체결(한국환경공단)

❍ 2016. 12. ~ 2017.  8. : 기본설계용역 완료

❍ 2017. 11. ~ 2018.  7. : 실시설계용역(1차-블록구축) 시행

❍ 2018.  3. : 사전기술검토(환경부)

❍ 2018.  6. ~ 2019.  6. : 평해(신) 블록구축 및 직산·거일 노후관로 교체공사 시행

❍ 2018.  6. ~ 2019.  6. : 지방상수도 블록구축공사 시행

❍ 2018.  7. ~ 2019.  3. : 실시설계용역(2차-관망정비) 시행

❍ 2018. 10. ~ 2020. 12. : 유지관리시스템 구축공사 시행

▢ 추진계획

❍ 2019. 1. ~ 2021. 12. : 실시설계용역(3차-관망관리 및 설계) 시행

❍ 2019. 5. ~ 2020. 12. : 지방상수도 노후관망 정비공사 시행

❍ 2021. 1. ~ 12. : 지방상수도 현대화사업 성과 보증 및 준공

▢ 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
총사업비	35,765	5,784	5,784	11,567	6,314	6,316
국 비	21,353	4,049	4,049	6,940	3,157	3,158
도 비	4,382	521	579	1,388	947	947
군 비	10,030	1,214	1,156	3,239	2,210	2,211

7		울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업		<마무리>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 근남면

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2019.

❍ 사 업 량 : 송·배수관로 L=45km, 배수지 1개소, 가압장 1식

❍ 사 업 비 : 12,976백만원(국비 9,082, 도비 1,168, 군비 2,726)

❍ 추진현황

∙ 2018년까지

- 사업량

· (정림~하당) → 송·배수관로(D100~150) L=5.7㎞, 배수지1개소

· (행곡2~3) → 배수관로 L=3.1㎞, (죽변리) → 급배수관로 L=25.6㎞

· (하당~상당) 송배수관로(D100~150) L=10㎞, 가압장2개소

- 사업비 : 10,887백만원(국비7,620, 도비 981, 군비 2,286)

∙ 2019년 계획

- 사업량 : (사계~소곡) 배수관로(D100~150) L=7.2㎞, 가압장1개소

- 사업비 : 2,089백만원(국비1,462, 도비 187, 군비 440)

▢ 추진계획

❍ 2019.  2. : 실시설계 완료

❍ 2019.  3. : 공사 착공

❍ 2019. 10. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

8		근남지방상수도(매화면) 확장사업		<계속>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 매화면 매화1리, 신흥2리 ~ 덕신2리,

기성면 방율·삼산리 일원

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2020.(3년간)

❍ 사 업 량 : 배·급수관로 L=25.0㎞(D150~80), 가압장

∙ 배·급수관로 L=6.0㎞(D100~80), 가압장 1개소

❍ 사 업 비 : 3,474백만원(국비 1,932, 도비 248, 군비 1,294)

∙ 2018년 까지 : 1,000백만원(국비 200, 도비 26, 군비 774)

∙ 2019년 계획 : 1,572백만원(국비 1,100, 도비 142, 군비 330)

- 신흥리(상이울)~덕신2리(한밭) L=1.9㎞

- 기성면 방율(호전)~방율 L=1.9㎞, 정명1리(웃곰실)~삼산1리(L=3.1㎞)

∙ 2020년 이후 : 902백만원(국비 632, 도비 80, 군비 190)

▢ 추진상황

❍ 2017. 12. : 실시설계 완료

❍ 2019.  3. : 공사 착공

❍ 2019. 10. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

9		온정면 등 급수구역 확장사업		<신규>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 온정면 일원

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년간)

❍ 사 업 량 :

읍 면	사업구간	사업량	사업비(백만원)	비고
계	7개소	L=37.0㎞	9,500
울진읍	고성리∼신림리	L=5.4㎞	1,382	2020까지
북 면	나곡4∼검성리	L=6.2㎞	1,590	〃
	부구3∼부구3(가는골)	L=3.2㎞	826	〃
	상당∼두천리	L=4.7㎞	1,220	〃
온정면	온정리∼조금리	L=5.3㎞	1,356	〃
	소태리∼선구리	L=8.7㎞	2,230	2025까지
	선구리∼외선미리	L=3.5㎞	896	〃

❍ 사 업 비 : 9,500백만원(국비 6,650, 도비 855, 군비 1,995)

∙ 2019년 계획 : 1,572백만원(국비 1,100, 도비 142, 군비 330)

- 울진읍 고성리 ~ 신림리 L=6.0㎞

∙ 2020년 이후 : 7,928백만원(국비 5,550, 도비 713, 군비 1,665)

▢ 추진계획

❍ 2019.  3. : 실시설계 완료

❍ 2019.  4. : 공사 착공

❍ 2019. 10. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

10		지방상수도 노후관로 갱생사업		<신규>

❍ 노후관로 갱생사업으로 주민들에게 맑은 물을 안정적으로 공급

❍ 노후시설물 정비에 따른 군민 보건위생 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 평해읍 평해·월송리, 온정면 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 7.

❍ 사 업 량 : 부식억제 장치 설치 4개소

❍ 사 업 비 : 300백만원(도비 90, 군비 210)

▢ 추진계획

❍ 2019. 3. : 실시설계 완료

❍ 2019. 4. : 공사 착공

❍ 2019. 7. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 노후관로 갱생으로 주민들에게 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급

11		지방상수도 급수구역 확장에 따른 마을상수도 편입		<신규>

❍ 근남정수장 준공 및 지방상수도 급수구역 확장으로 기존 마을상수도와 연결하여 안정적인 생활용수 공급 및 지역균형 발전 도모

❍ 노후된 마을 내 상수관로를 교체하여 맑고 깨끗한 지방상수도 공급

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 근남면, 기성면, 매화면 등

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 기존 마을상수도 연결 및 마을 내 노후관 교체

∙ 기존 마을상수도 연결 : 호월 2리 등 20개리(1,292세대 / 2,249명)

∙ 마을 내 노후상수관로 교체 : 산포2리(69세대 / 120명)

❍ 사 업 비 : 300백만원(군비)

▢ 추진계획

❍ 2018. 10. ~ 12. : 지방상수도 기존 마을상수도 연결공사 실시설계용역

❍ 2019.  1. ~ 12. : 지방상수도 기존 마을상수도 연결공사 시행(19개 리)

❍ 2019.  1. ~ 12. : 마을 내 노후관로 교체공사 시행(6개 리)

∙ 지방상수도 : 근남면 산포2, 매화면 신흥2리

∙ 마을상수도 : 북면 부구1, 나곡1·2리, 기성면 방율

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

❍ 2017년 (기존 급수구역)

읍·면	급 수 구 역	세대수	인구수	비 고
계	7개 읍·면 90개 리	17,035	35,755
울진읍	읍내1∼5리, 읍남1∼4리, 연지1∼3리, 온양1∼2리 명도1∼2리, 고성1∼3리, 호월1리(20)	5,618	13,967
평해읍	16개 리동 전역(16)	1,790	3,128	물방 아골
북 면	신화1리, 고목1∼2리(3)	412	649
기성면	사동2∼3리, 망양1∼2리, 구산1∼2리, 봉산1∼2리(8) 척산1∼3리, 기성리, 정명1리(5)	1,194	1,977
온정면	소태1∼3리, 온정2리, 덕산2리, 금천1∼2리, 광품1∼2리, 덕산1리,(10)	530	1,006
죽변면	죽변1∼5리, 후정1∼3리, 화성1·3·4리, 봉평1∼2리 (13)	3,560	7,038
후포면	15개리동 전역(15)	3,931	7,990

❍ 급수구역 확장에 따른 급수공사 계획(2018~2020)

읍·면	공사계획					비 고
	2018년	기존관 연결		마을내 노후관로 교체
		2019년	2020년이후	2019년	2020년이후
계	19개 리 (1,492/2,712)	20개 리 (1,292/2,249)	21개 리 (1,800/3,347)	7개 리 (1,729/3,856)	9개 리 (428/738)
울진읍	정림1·2리	신림,호월2	정림3
북 면	부구2,3 덕구1,하당(4)	주인1,사계2 소곡1,2	나곡4,6 사계1	부구1, 나곡1·2	주인2,신화2,덕구2, 나곡3,고목3상당	마을상수도 (나곡1·2)
근남면			노음1,2,3, 행곡 1,2,4, 수곡1,2, 수산, 구산1,2,4 진복1,2, 산포1,3,4	산포2	행곡3	‘19년 자체 (산포2)
기성면	정명2(어현) 황보1·2 다천1·2(5)	정명1(곰실,사저),정명2(섭실),사동1,삼산1		방율		‘19년 지특 (방율)
매화면	매화1 오산1	매화2,금매2, 오산2,3,덕신1 기양2,3,신흥1,갈면, 길곡(9)	금매1,덕신2	신흥2	기양1	‘19년 지특 (신흥2)
온정면	덕인1·2·3 금천3(4)		조금1,덕산3	온정1	조금2
죽변면	후정4, 화성2

마을상수도팀

12		소규모수도시설 위탁 운영관리		<계속>

❍ 소규모 수도 및 소독시설 등을 전문업체에 위탁하여 효율적으로 유지관리 함으로써 안정적인 수돗물 공급

❍ 관리자의 고령화와 전문성 부족으로 수돗물 운영관리의 문제점 해소

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 9개 읍면(후포면 제외)

❍ 사업기간 : 2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 28.

❍ 사 업 량 : 144개소(마을상수도 28, 소규모급수시설 116)

❍ 사 업 비 : 200백만원(군비 200)

▢ 추진계획

❍ 2019.  1. : 용역 실시설계

❍ 2019.  2. : 발주 및 사업자 선정

❍ 2019.  3. : 용역 착수

▢ 기대효과

❍ 민간 전문업체의 효율적인 유지관리로 생활환경개선 및 삶의 질 향상

❍ 체계적인 유지관리로 수인성 전염병 사전예방과 안정적인 수돗물 공급

13		소규모수도시설 노후관로 개선사업		<계속>

❍ 울진지방상수도 급수구역 확장에 따라 노후시설을 개량하여 지방상수도 조기 공급

❍ 소규모수도시설을 개선하여 군민들에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급

▢ 사업개요

❍ 위    치 :	울진읍, 북면, 금강송면, 근남면, 기성면, 온정면 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

❍ 사 업 량 : 12개소(노후관로, 취수시설)

❍ 사 업 비 : 3,180백만원

▢ 추진계획

구분	사 업 명	읍면	사 업 량	사업비 (백만원)	비고
계	12 개소			3,180
1	구산3리(원심골) 소규모수도시설 설치사업	근남	실시설계 (관로 L=1.0km)	30	신규설치
2	삼근1리(수평) 취수보 설치공사	금강송	취수보 H=1.5m×L=70m	850
3	부구1리(흥부) 소규모수도시설 개선사업	북	급․배수관로 L=5.0km	230
4	나곡1리(나곡) 소규모수도시설 개선사업	북	급․배수관로 L=4.0km	310
5	나곡2리(양지마) 소규모수도시설 개선사업	북	급․배수관로 L=2.2km	150
6	부구3리(상흥부) 소규모수도시설 개선사업(가는골)	북	급․배수관로L=3.3km 가압장 2개소	350
7	온정1리(양남아) 소규모수도시설 개선사업	온정	급․배수관로L=3.9km	520
8	광회2리(남회룡) 소규모수도시설 개선사업	금강송	급․배수관로 L=2.0km	260
9	광회1리(내광비) 소규모수도시설 개선사업	금강송	급․배수관로 L=1.5km	200
10	대흥리(계전동) 소규모수도시설 개선사업	울진	실시설계 (관로 L=0.5km)	100
11	소규모수도시설 배수지 철거공사	기성 금강송	물탱크 철거 5개소	30
12	소규모수도시설 지하수 개발사업	금강송	지하수개발 3개소	150	전내,남회룡

▢ 기대효과

❍ 소규모 수도시설 개량으로 군민들에게 맑고 깨끗한 수돗물을

안정적으로 공급

14		평해 하수관로 정비사업(2단계)		<계속>

❍ 평해읍 직산․거일리 일원에서 발생 유입되는 생활하수를 차집 후 적정 처리하여 방류수역인 동해안의 수질보전 기여

❍ 쾌적한 도시 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 평해읍 직산․거일리 일원

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2020.(5년간)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=14.197km, 배수설비 495개소, 펌프장 9개소

❍ 사 업 비 : 12,788백만원(국비 8,882, 군비 3,906)

∙ 2018년 까지 : 10,046백만원(국비 7,032, 군비 3,014)

∙ 2019년      : 1,321백만원(국비 925, 군비 396)

∙ 2020년 계획 : 1,421백만원(국비 925, 군비 496)

▢ 추진실적

❍ 2016.  2. 19. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2016.  6. 22. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.  3. 13. : 재원조달 및 사용에 관한 협의 완료(환경부)

❍ 2017.  7. 11. : 공사 착공(대건종합건설(주), 경산시)

❍ 2018. 12.     : 공사 시공중(진도 : 75%)

▢ 향후계획

❍ 2020.  3. : 공사 준공 및 사용개시(예정)

▢ 문제점 및 대책

❍ 지방상수도 현대화사업과 중첩구간 포장불량 장기화 우려

∙ 구간 : L=3.0㎞,  기간 : 2019. 6. 30까지

15		오산 농어촌마을하수도 설치사업		<계속>

❍ 매화면 오산․덕신리는 해안마을로 울진해양스포츠센터 등 각종 공공시설물들이 설치․운영되어 생활하수 처리가 시급한 실정

❍ 소규모 하수처리시설 설치하여 방류수역인 동해안의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 매화면 오산1․2․3리, 덕신1리 일원

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2019.(5년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=350㎥/일, 하수관로 L=11.246km, 배수설비 416개소

❍ 사 업 비 : 12,480백만원(국비 8,317, 도비 427, 군비 3,736)

∙ 2018년 까지 : 12,480백만원(국비 8,317, 도비 427, 군비 3,736)

▢ 추진실적

❍ 2014. 12. 17. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2015.  3. 19. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2015.  6. 16. : 공법선정 심의 완료

❍ 2016.  6.  7. : 재원조달 및 사용에 관한 협의 완료(환경부)

❍ 2016. 12. 27. : 총사업비 변경승인(환경부)

❍ 2017.  5.  8. : 공사 착공[(주)대명건설, 경주시]

❍ 2018. 12.     : 공사 시공중(진도 73%)

▢ 향후계획

❍ 2019.  7. : 공사 준공 및 사용개시(예정)

▢ 문제점 및 대책

❍ 덕신1리 구간 철도11공구 국도7호선 확장(비관리청 도로공사)

지연으로 인한 관로매설 시공지연

※ 국도 굴착심의시 철도측 도로확장과 연계협의 후 진행 조건

❍ 철도시설공단과 지속협의 [협의중-부분시공우선검토]

16		북면 공공하수처리시설 증설사업		<계속>

❍ 신울진 원전건설 사업으로 건설/운영인력 유입에 따른 대규모 주택단지 조성 등 하수유입량 증가 및 처리구역 확대요구 지속

❍ 생활하수의 안정적 처리를 위하여 처리시설 증설하여 인근수역 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 북면 부구리(북면 공공하수처리시설) 지내

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2020. (5년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 증설 600㎥/일(1,200 → 1,800㎥)

❍ 사 업 비 : 5,002백만원(국비 3,452, 도비 178, 군비 1,372)

∙ 2018년 까지 : 5,002백만원(국비 3,452, 도비 178, 군비 1,372)

▢ 추진실적

❍ 2016.  2. 19. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2016.  6. 22. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.  5. 18. : 공법선정 심의 완료

❍ 2017.  8.  9. : 경상북도 하수도 자문

❍ 2018.  8.  2. : 재원조달 및 사용에 관한 협의 완료(환경부)

❍ 2018.  9. 14. : 총사업비 변경 승인

❍ 2018. 10. 26. : 설치인가

❍ 2018. 12. 26. : 공사착공[동진건설(주), 칠곡군]

▢ 향후계획

❍ 2020.  6. : 공사준공 및 사용개시

▢ 문제점 및 대책

❍ 재원협의 장기화로 인한 사업지연(17. 11. ~ 18. 8.)

❍ 후속절차 조기시행으로 공사 조속 추진

17		하당 농어촌마을하수도 설치사업		<계속>

❍ 상당,하당리는 구수곡자연휴양림과 인근에 덕구온천 등 관광수요가 많고 생활하수가 원당천을 통해 상수원인 남대천으로 유입되어,

❍ 생활하수 처리가 시급한 지역으로 소규모하수처리시설 설치를 통한 방류수역인 남대천의 수질보전과 지역주민 보건위생 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 북면 상당리, 하당리 일원

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2020. (5년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=150㎥/일, 하수관로 L=10.7km, 배수설비 189개소

❍ 사 업 비 : 7,970백만원(국비 5,579, 도비 287, 군비 2,104)

∙ 2018년 까지 : 6,075백만원(국비 4,312, 도비 136, 군비 1,627)

∙ 2019년      : 361백만원(국비 253, 도비 13, 군비 95)

∙ 2020년 계획 : 1,534백만원(국비 1,014, 도비 138, 군비 382)

▢ 추진실적

❍ 2016.  2. 19. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2016.  6. 22. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.  8. 29. : 공법선정 심의 완료

❍ 2017. 12.  6. : 경상북도 하수도 자문

❍ 2018.  3. 14. ~ : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부) 진행중

▢ 향후계획

❍ 2019.  2. : 설치인가 및 시설공사 발주

❍ 2019.  3. : 공사착공

❍ 2020.  5. : 공사준공 및 사용개시

▢ 문제점 및 대책

❍ 재원협의 장기화로 인한 사업지연(18. 3. ~ 18. 12.)

❍ 후속절차 조기시행으로 공사 조속 추진

18		사동 농어촌마을하수도 설치사업		<계속>

❍ 사동리는 해안마을로 주거지역 및 사동초교, 군부대 등이 밀집하여 있는 지역으로 생활하수 처리가 시급한 실정

❍ 소규모하수처리시설 설치로 방류수역인 동해안의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 기성면 사동리 일원

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2020.(5년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=150㎥/일, 하수관로 L=4.6km, 배수설비 224개소

❍ 사 업 비 : 6,828백만원(국비 4,748, 도비 246, 군비 1,834)

∙ 2018년 까지 : 3,263백만원(국비 2,284, 도비 118, 군비 861)

∙ 2019년      : 721백만원(국비 505, 도비 26, 군비 190)

∙ 2020년 계획 : 2,844백만원(국비 1,959, 도비 102, 군비 783)

▢ 추진실적

❍ 2016.  2. 19. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2016.  6. 22. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.  8. 29. : 공법선정 심의 완료

❍ 2017. 12.  6. : 경상북도 하수도 자문

❍ 2018.  5. 24. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2018.  9. 27. : 총사업비 변경 승인

❍ 2018. 12. 17. : 설치인가(경북도)

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : 공사착공

❍ 2020. 12. : 공사준공 및 사용개시

▢ 문제점 및 대책

❍ 재원협의 장기화로 인한 사업지연(18. 5. ~ 18. 9.)

❍ 후속절차 조기시행으로 공사 조속 추진

19		울진 하수관로 정비사업(2단계)		<계속>

❍ 울진읍 읍내리(북부), 읍남리(토일,오싯골), 고성리, 근남면 수곡리(누금,막금) 행곡3리 일원의 하수관로 정비로

❍ 인근 방류수역(왕피천, 광천, 울진남대천)의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 읍내리, 읍남리, 근남면 수곡리

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.(5년간)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=36.995km, 배수설비 262개소, 펌프장 1개소

❍ 사 업 비 : 32,238백만원(국비 22,567, 군비 9,671)

∙ 2018년 까지 : 8,093백만원(국비 5,000, 군비 3,093)

∙ 2019년      : 3,153백만원(국비 2,207, 군비 946)

∙ 2020년 이후 : 20,992백만원(국비 15,360, 군비 5,632)

▢ 추진실적

❍ 2016. 12. 21. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2017.  3.  5. : 2018년도 하수도국고보조 신규사업 신청(9월 선정)

❍ 2017.  6. 26. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2018.  8. ~ 9. : 기본 및 실시설계 VE검토 수행

❍ 2018. 12. 04. : 기본 및 실시설계 자문

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2019.  6. : 설치인가 및 공사발주‧착공

❍ 2021.  12. : 공사준공 및 사용개시

▢ 문제점 및 대책

❍ 하수도정비 기본계획 대비 관로연장 실시설계시 연장 감소

[ 기본계획 : 36.995km, 실시설계 : 15.23km, 감(△) 21.765km ]

※ 기본계획에 도시개발 계획지역 관로연장 반영되었으나, 현재 미개발

❍ 현재 측량조사 결과에 따른 실시설계에 따라 추진

20		북면 하수관로 정비사업(2단계)		<계속>

❍ 북면 나곡리, 덕구리, 주인리 기본계획상 2단계 지역을 북면 공공하수처리시설 증설과 연계, 하수관로를 정비하여

❍ 인근 방류수역(부구천, 동해)의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 북면 나곡리, 덕구리, 주인리 일원

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.(5년간)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=17.463km, 배수설비 277개소, 펌프장 4개소

❍ 사 업 비 : 16,300백만원(국비 11,410, 군비 4,890)

∙ 2018년 까지 : 681백만원(군비 681)

∙ 2019년      : 714백만원(국비 500, 군비 214)

∙ 2020년 이후 : 14,905백만원(국비 10,910, 군비 3,995)

▢ 추진실적

❍ 2016. 12. 21. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2017.  6. 26. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2018.  3.  5. : 2019년도 하수도분야 국고보조 신규사업 재신청

❍ 2018.  9.    : 2019년도 국고보조 예산가내시(714백만원)

❍ 2018. 12.    : 설계의 경제성 검토(VE) 중

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : 기본 및 실시설계 자문

❍ 2019.  2. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2019.  8. : 설치인가 및 공사발주‧착공

❍ 2021. 12. : 공사준공 및 사용개시

21		진복∙망양∙봉산 농어촌마을하수도 설치사업		<신규>

❍ 근남면 진복1,2리, 산포3리와 기성면 망양1,2리 및 봉산1,2리 지역에

농어촌 마을하수도를 설치하여 방류해역의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 사업지구별 현황

사 업 명	위 치		사업량	사 업 비(백만원)				비 고 (군비)
	읍면	리동		계	국비	도비	군비
진복농어촌마을 하수도설치사업	근남	진복1,2 산포 3	처리장 Q=100㎥/일 하수관로 L=7.405㎞ 배수설비 235개소	9,600	6,720	346	2,534	2017년 408백만원
망양농어촌마을 하수도설치사업	기성	망양1,2	처리장 Q=100㎥/일 하수관로 L=3.142㎞ 배수설비 142개소	5,200	3,640	187	1,373	2018년 400백만원
봉산농어촌마을 하수도설치사업	기성	봉산1,2	처리장 Q=60㎥/일 하수관로 L=4.688㎞ 배수설비 193개소	6,500	4,550	234	1,716	2018년 600백만원

▢ 추진실적

❍ 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

∙ 진복 농어촌마을하수도 – 2016. 12. 21.

∙ 망양 · 봉산 농어촌마을하수도 – 2018. 2. 19.

❍ 2018.  3. : 2019년도 하수도분야 국고보조 신규사업 신청

❍ 기본 및 실시설계 착수

∙ 진복 농어촌마을하수도 – 2017. 6. 26.

∙ 망양 · 봉산 농어촌마을하수도 – 2018. 5. 23.

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도분야 국고보조 신규사업 신청

▢ 향후계획

❍ 환경부 국고보조사업 확정시 재원협의 및 설치인가 추진

22		울진군 하수도정비 기본계획(변경) 수립		<계속>

❍ 하수도정비에 관한 최상위 행정계획인 하수도정비 기본계획의 주요사항을 하수도법 및 하수도정비 기본계획 수립지침에 의거 우리 군 지역에 합리적인 기본계획을 변경 수립하여

❍ 하수도시설의 효율적인 운영과 시설계획을 수립‧시행하고 공공수역 수질보전 및 생활환경 개선과 강우시 우수배제를 통하여 내수침수 예방

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 일원

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 4.(15개월간)

❍ 사 업 량 : 하수도정비 기본계획(변경) 수립 1식

∙ 하수처리장 : 17개소,  하수관로연장 : 359㎞, 배수설비 8,682개소

❍ 사 업 비 : 1,300백만원(군비 1,300)

∙ 2018년 : 700백만원(군비 700)

∙ 2019년 : 600백만원(군비 600)

▢ 추진실적

❍ 2018.  7. 31. : 용역사 계약완료[(주)도화엔지니어링 외 3개사]

❍ 2018.  8.  6. : 용역 착수

❍ 2018.  8. 20. : 수립용역 착수보고회

▢ 추진계획

❍ 2019.  5. : 기본계획 초안 작성완료

❍ 2019.  6. : 환경부 기본계획 승인절차 이행

❍ 2019.  8. : 기본계획 수립용역 완료(환경부 승인완료시)

▢ 기대효과

❍ 각종 개발사업으로 인하여 우리 군의 변화되는 여건을 반영한 하수도       정비기본계획을 변경 수립하여 기존 하수도시설을 재검토하여 시설의       효율적인 운영방안 및 시설계획을 수립