관 광 문 화 과

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 주요 현안사항

○ 단체관광객 유치 인센티브 확대 운영	13

○ 관광리더 울진 방방곡곡 투어지원	14

○ 지역특화 관광마케팅 추진	15

○ 울진군 죽변면도서관 신축	17

○ 울진군 도서관 운영	19

○ 울진군 작은도서관 운영	20

○ 2019년 울진군 북스타트 사업 추진	21

○ 찾아가는 독서복지 서비스 사업	22

○ 이현세 만화도서관 리모델링 사업	23

○ 울진 유림문화회관 건립	24

○ 흥부문화센터 건립	26

○ 울진군지 개정 편찬	28

○ 울진 박물관 건립	29

○ 주인예술촌 힐링공원조성	30

○ 죽변등대 일원 해안순환레일 설치사업	32

○ 왕피천 케이블카(곤돌라) 설치사업	35

○ 왕피천 생태공원 조성사업	38

○ 불영계곡 캠핑장 조성사업	39

○ 염전해변 관광자원화 조성사업	40

○ 후포 등기산 스카이워크 설치사업	42

○ 관광지 각종 안내간판 및 기타 관광시설 정비	43

○ 수토문화나라 조성사업	44

○ 월송포진성 편입토지 매입	45

○ 평해향교 유림회관 신축	46

○ 불영사 사적비 건립	47

○ 평해황씨 대종회 추원제 개축	48

○ 수토문화나라 주변정비 사업	49

○ 망양정 주변정비 사업	50

○ 울진 수산리 굴참나무 주변정비 사업	51

○ 울진 불영사 대웅보전 주변정비 사업	52

○ 울진 불영사 영산회상도 주변정비 사업	53

○ 울진 불영사 응진전 방충사업	54

○ 망양정 해맞이공원 편입부지 매입	55

○ 울진 성류굴 주변정비 사업	56

○ 울진문화센터 유지보수 관리	57

○ 울진문화예술회관 운영	58

○ 읍면 민원실 사이니지(디지털 홍보간판) 설치	59

▢ 직원 정․현원

Ⅰ. 일반현황

구분	합계	과장	팀장	일반직	임기제	비 고
정원	22	1	6	15	-
현원	23	1	6	16	-
증감	1	-	-	1	-

▢ 팀별 직원 및 소관업무

팀 명	인원	업 무 내 용	비고
계	23
과 장	1	◦관광문화과 업무 총괄
관광마케팅	4	◦과내 소관업무의 기획․조정 ◦관광마케팅 업무 총괄 ◦관광사업 종합기획 ◦관광축제 기획 조정
문화예술	4	◦지역전통문화예술 계승ㆍ발전 ◦문화․예술단체 지도․육성 ◦흥부문화센터 및 유림문화회관 건립 ◦공공·작은도서관 관리 및 독서문화진흥 ◦게임장 및 노래연습장 인허가 업무
관광개발	3	◦관광개발업무 총괄 ◦관광지 관리 및 조성계획수립 ◦관광개발사업 추진 및 운영관리
문 화 재	4	◦문화재보존 관리 계획수립 및 보수정비 ◦3대문화권 관광개발사업 추진 ◦문화재 지정 및 향토유적 관리
성류굴운영	3	◦관광자원관리 및 관광지 개발․조성 ◦입장료 및 사용료 징수
문화시설운영	4	◦문화예술회관 관리 및 운영 ◦울진문화센터 관리 및 운영 ◦작은영화관 운영 및 관리 ◦기획공연 및 방방곡곡문화공감사업

▢ 관광사업체 현황

❍ 관광숙박업(호텔4, 콘도2)

구 분	업 체 명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관 광 호 텔 업	㈜호텔덕구 온천	강윤석	울진군 북면 덕구온천로 924	782-0677
	SE&B 백암관광호텔	정희영	울진군 온정면 온천로 84	788-8877	대수선 중
	울진그랜드 호텔	신정호	울진군 울진읍 현내항길 97	781-9901
	삼원관광호텔	이태홍	울진군 근남면 노음1길 2	781-9100	대수선 중
휴 양 콘도미니엄	한화호텔& 리조트(주)	심경섭	울진군 온정면 온천로 129-13	787-7001
	㈜호텔덕구 온천콘도	강윤석	울진군 북면 덕구온천로 921	783-0811

❍ 관광편의시설업(관광펜션업4, 한옥체험업3)

업 종	업체명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관광펜션업	울진솔펜션	임양호	울진군 근남면 불영계곡로 3175	781-4004
〃	새파랑관광펜션	한봉수	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073
〃	207마일오션풀스테이	권연희	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073
〃	마일랑관광펜션	권명혁	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073
한옥체험업	삼소헌	임진기	울진군 온정면 백암온천로 1737	788-6766
〃	금송한옥	이장익	울진군 온정면 금천1길 134	787-7479
〃	가원한옥	김연국	울진군 울진읍 고성3길 83-4	783-2824

❍ 관광이용시설업(야영장업 6, 자동차 야영업 4)

업 종	업체명	대표자	소재지	비고
야영장업	통고산자연휴양림	산림청	울진군 금강송면 불영계곡로 880
〃	구수곡자연휴양림	울진군수	울진군 북면 십이령로 2721
〃	왕피천하늘담야영장	김태형	울진군 근남면 왕피천로 555-110
〃	금강송체험야영장	이재현	울진군 금강송면 소광리 173-2
〃	산내들 관광농원	남광수	울진군 금강송면 소광리 429-1
〃	불영계곡 캠핑장	서명선	울진군 울진읍 대흥리 76
자동차야영업	왕피천관광농원	주상규	울진군 근남면 왕피천로 534-1
〃	페리오 오토캠핑장	안양국	울진군 울진읍 울진북로 906
〃	구산오토캠핑장	방종호	울진군 기성면 구산리 산72-1
〃	퀘렌시아오토캠핑장	박윤조	울진군 온정면 삼덕로 799

❍ 여행업(국내8, 국외5, 일반1)

구 분	업 체 명	대 표 자	소 재 지	비 고
국 내 여행업	(주)삼아관광	장용훈	울진군 울진읍 울진중앙로 106
	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼율로 193-5
	(주)국제관광	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109
	금강송여행사	김호영	울진군 후포면 울진대게로 5
	㈜다옴여행사	이상권	울진군 후포면 울진대게로 16
	협동조합 울림이	김원길	울진군 죽변면 죽변북로 42, 101호
	국제영진투어	이영진	울진군 울진읍 울진북로 636
국 외 여행업	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109
	(주)삼아관광	장용훈	울진군 울진읍 울진중앙로 106
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼율로 193-5
	(주)하나항공여행사	전용혁	울진군 울진읍 읍내3길 12
	㈜다옴여행사	이상권	울진군 후포면 울진대게로 16
일반여행업	정도산업(주)	김창식	울진군 죽변면 동해대로 5047

▢ 울진군 축제발전위원회 현황

❍ 설치근거 : 울진군 축제발전위원회 설치 및 운영조례

❍ 사무국 현황

직 위	성 명	보 수
위 원 장	민 명 강	무보수
사무팀장	이 병 철	유 급

❍ 축제위원회 위원 명단

소 속	성 명	소 속	성 명
前 기획감사실장	민명강 (위원장)	경북 관광포럼위원 (경운대 항공관광학교수)	황대욱
경북미래문화재단(이사)	권두현 (부위원장)	자원봉사센터(소장)	김일출
울진군의회	장유덕	울진군여성단체협의회 (회장)	전송자
울진군의회	김정희	(사)한국연예협회 울진군지회(회장)	김희자
울진문화원(원장)	김성준	울진군청(관광문화과장)	박금용
청소념쉼터(팀장)	주금화	울진군청(산림녹지과장)	방형섭
경상북도관광공사 (마케팅 기획차장)	박학석	울진군청(해양수산과장)	오성규

▢ 관광객 현황

연번	관 광 지	2016년도	2017년도	2018년도(11월현재)	근거자료
1	거일1리 어촌체험 휴양마을	미등록	26,302	22,177	입장객수
2	나곡1리 어촌체험 휴양마을	미등록	17,909	29,341
3	쌍전리 녹색농촌체험 휴양마을	미등록	17,714	16,180
4	구수곡자연휴양림	67,073	81,222	63,065
5	금강소나무숲길	31,312	43,169	38,151
6	기성리어촌체험마을	40,298	25,572	15,096
7	나곡바다낚시공원	1,490	5,241	5,984
8	덕구온천	494,038	606,784	702,860
9	민물고기전시관	133,359	123,903	78,730
10	백암온천마을	8,554	9,301	6,521
11	불영사	108,982	132,538	104,729
12	성류굴	286,313	377,196	426,906
13	성류파크온천	64,809	79,393	36,992
14	엑스포공원	200,185	259,179	158,244
15	왕피리거리고마을	1,470	1,653	792
16	울진과학체험관	23,609	37,378	30,327
17	울진요트학교	2,615	2,898	2,398
18	울진해양레포츠센터	11,321	14,828	10,669
19	캠프홀스	-	-	1,052
20	통고산자연휴양림	51,412	63,819	48,179
21	한화콘도온천	193,617	296,276	319,784
22	향암미술관	2,560	5,764	2,686
23	원자력전시관	83,072	74,157	42,573	cctv 및 방문일지
24	등기산출렁다리	-	-	154,864	무인계수기
25	망양정	206,457	62,503	41,724
26	봉평리신라비전시관	12,508	17,657	19,802
27	신선계곡	43,172	45,290	64,179
28	울진대게홍보전시관	32,277	40,550	40,072
29	월송정	21,905	77,852	61,988
30	폭풍속으로 드라마세트장	99,633	67,823	53,017
	합 계	2,222,041	2,613,871	2,599,082

▢ 지정문화재 현황

구 분		점	지 정 내 역
계		39
국가 지정 문화재 (13)	국 보	2	장양수 홍패, 울진 봉평리 신라비
	보 물	4	울진 구산리 삼층석탑, 울진 불영사 응진전, 울진 불영사 대웅보전, 불영사 영산회상도
	명 승	1	울진 불영사계곡 일원
	천연기념물	6	울진 수산리 굴참나무, 울진 성류굴, 울진 후정리 향나무, 울진 화성리 향나무, 울진 쌍전리 산돌배나무, 울진 행곡리 처진소나무
도지정 문화재 (13)	유형문화재	10	불영사 삼층석탑, 평해 북천교비, 울진장씨 고산성파 소장 고문서, 장백손 교지, 울진 불영사 불연, 울진 불영사 불패, 울진 불영사 신중탱화, 울진 대풍헌 현판 일괄, 울진 광흥사 소장 명양경, 울진 광흥사 대웅전 판벽화 및 기타부재
	기 념 물	3	울진 주인리의 황금소나무, 울진 죽변등대, 울진 대풍헌
	민속문화재	1	울진 평해황씨 해월종택
문화재자료		10	울진향교․평해향교 대성전, 불영사 부도, 울진 소광리 황장봉계표석, 울진 내성행상 불망비, 배잠사지 당간지주, 울진 매화리 윤광수가옥, 울진 대풍헌 소장문서, 울진 수진사 소장 불화, 울진 광도사 신중도
등록문화재		2	울진 행곡교회, 울진 용장교회

▢ 문화예술단체 현황

단 체 명	대 표 자	회원수	비 고
울진문화원	김 성 준	700
(사)한국예총 울진지회	장 진 업	115
(사)한국미술협회울진지부	김 경 하	30
(사)한국연예협회울진군지부	김 희 자	50
(사)울진군서예술인연합회	윤 근 오	149
(사)대한시조협회울진군지회	장 현 규	24
(사)한국국악협회울진지부	이 원 복	37
울진문학회	도 춘 호	13
울진향토사연구회	전 이 중	21
울진파도 풍물단	김 정 희	44
울진연호무용단	안 영 숙	7
(사)사진작가협회울진지부	김 승 기	21
(사)환경미술협회울진지부	김 태 봉	24
울진공예인연합회	이 승 근	32
울진군립합창단	윤 석 규	38

▢ 시설물 관리현황

❍ 울진문화센터

▪위    치 : 울진읍 연호로 47

▪규    모 : 지상 2층 (건축면적 2,901.82㎡ / 연면적 3,213.635㎡)

▪주요시설 : 대강당(736석), 울진군 CCTV통합관제센터, 울진군 축제발전위원회,              전시실, 음향 · 조명 제어실, 분장실 등

▪운영방식 : 직영

❍ 울진문화예술회관

▪위    치 : 후포면 후포삼율로 194-13

▪규    모 : 지상 2층 (건축면적 2,080.39㎡ / 연면적 2,950.13㎡)

▪주요시설 : 공연장(492석), 소공원(4,058㎡), 사무실, 음향·조명 제어실,            분장실 등

▪운영방식 : 직영

❍ 울진작은영화관

▪위    치 : 울진읍 중앙로 115-21

▪규    모 : 지상 1층 (연면적 512.73㎡)

▪주요시설 : 공연장(87석, 1개관), 휴게실, 남녀화장실, 매점 및 매표시설 등

▪운영방식 : 위탁(작은영화관사회적기업협동조합)

❍ 죽변면도서관

▪위    치 : 죽변면 죽변북로 64-4

▪건물규모 : 지상 3층 (연면적 923㎡)

▪운영방식 : 위탁(죽변면발전협의회)

❍ 울진남부도서관

▪위    치 : 후포면 후포삼율로 194-13

▪건물규모 : 지하 1층, 지상 3층 (연면적 2,362㎡)

▪운영방식 : 위탁(후포면발전협의회)

❍ 울진작은도서관

▪위    치 : 울진읍 읍내8길 26

▪건물규모 : 지상 1층 (연면적 49.5㎡)

▪운영방식 : 위탁(울진작은도서관운영위원회)

❍ 근남작은도서관

▪위    치 : 근남면 울진북로 151-3

▪건물규모 : 지상 2층 (연면적 49.6㎡)

▪운영방식 : 위탁(근남작은도서관운영위원회)

❍ 매화작은도서관

▪위    치 : 매화면 매화4길 3

▪건물규모 : 지상 1층 (연면적 33㎡)

▪운영방식 : 위탁(매화작은도서관운영위원회)

❍ 기성작은도서관

▪위    치 : 기성면 척산길 67

▪건물규모 : 지상 1층 (연면적 82.64㎡)

▪운영방식 : 위탁(기성작은도서관운영위원회)

❍ 평해작은도서관

▪위    치 : 평해읍 평해7길 11

▪건물규모 : 지상 1층 (연면적 128㎡)

▪운영방식 : 위탁(평해작은도서관운영위원회)

❍ 온정작은도서관

▪위    치 : 온정면 소태로 23

▪건물규모 : 지상 1층 (연면적 100㎡)

▪운영방식 : 위탁(온정작은도서관운영위원회)

❍ 울진봉평리신라비 전시관

▪위    치 : 죽변면 봉화길 15

▪부지면적 : 41,581㎡

▪주요시설 : 전시관 1동(건축면적-1,491㎡ 연면적-2,393㎡ 지하1/지상2층)
휴게실, 화장실, 주차장, 야외비석공원 등

▪운영방식 : 기간제근로자 1인(전시관 청소 및 유지관리)

❍ 망양정공원

▪위    치 : 근남면 산포리 일원

▪부지면적 : 86,519㎡

▪주요시설 : 해맞이광장, 망양정, 울진대종 등

❍ 남사고 유적지

▪위    치 : 근남면 구산수곡길 14

▪부지면적 : 30,035㎡

▪주요시설 : 강당, 서재, 사당, 파고라, 주차장 등

▪운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

❍ 주인예술촌

▪위    치 : 북면 덕구온천로 464 (구 주인초등학교)

▪연 면 적 : 지상 2층(연면적 1,019.6㎡)

▪운영방식 : 위탁(예술촌 입주작가)

▪입주작가 : 5명

▪관리기간 : 2018. 6. 1 ∼ 2019. 5. 30(1년)

❍ 울진 후포리 신석기유적관

▪위    치 : 후포면 후포리 583 (등기산 공원 내)

▪연 면 적 : 107.64㎡

▪구    조 : 돔구조

▪운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

❍ 울진 덕신리 고분공원

▪위    치 : 매화면 매화리 산57-1일원

▪면    적 : 4,000㎡

▪시설현황 : 돔 전시관 1동, 석관묘 10개소, 화장실 1동, 주차장

▪운영방식 : 기간제근로자 1인(공원 청소 및 유지관리)

❍ 십이령 보부상 주막촌

▪위    치 : 북면 십이령로 2273일원

▪시설현황 : 주막동, 숙박동, 화장실, 주차장등

▪운영방식 : 위탁[(주)말똥구리 김경조〕

▪위탁기간 : 2017. 7. 20 ∼ 2022. 7. 20(5년간)

▪임 대 료 : 61,500천원/5년

❍ 후포 등기산 스카이워크

▪위    치 : 후포면 후포리지내(갓바위 부근)

▪시설현황 : 스카이워크 L=135m, 상징조형물 1개소, 관리실 l동

▪관람개시 : 2018. 2. 26∼현재

▪운영방식 : 직영(기간제 2명)

❍ 토염 체험시설(엑스포공원내)

▪위    치 : 근남면 친환경엑스포로 25

▪시설현황 : 토염 체험시설 1동

▪운영방식 : 위탁(울진토염영어조합법인 구봉기)

▪관리기간 : 2019. 1. 1∼2021. 12. 31(3년)

▪임 대 료 : 무상

❍ 도자기 체험시설(엑스포공원내)

▪위    치 : 근남면 친환경엑스포로 25

▪시설현황 : 도자기 체험시설 1동

▪운영방식 : 위탁(도예아트 최승희)

▪관리기간 : 2019. 1. 1∼2021. 12. 31(3년)

▪임 대 료 : 무상

❍ 목공예 체험시설(엑스포공원내)

▪위    치 : 근남면 친환경엑스포로 25

▪시설현황 : 목고예 체험시설 1동

▪운영방식 : 위탁(사단법인울진숲길 용창식)

▪관리기간 : 2019. 1. 1∼2021. 12. 31(3년)

▪임 대 료 : 무상

❍ 불영계곡 캠핑장

▪위    치 : 울진읍 대흥리 75번지 일원

▪시설현황 : 캠핑장 1개소(야영장 싸이트 : 글램핑3, 데크13, 쇄석3) 등

▪운영방식 : 위탁(주식회사 하오삼건설 서명선)

▪관리기간 : 2018. 7. 10∼2021. 7. 9(3년)

▪임 대 료 : 75백만원

❍ 성류굴

▪위    치 : 근남면 성류굴로 225

▪면    적 : 137,454㎡

▪시설현황 : 총 연장 870m, 소5개, 광장12개, 종유석·석주·석순 50만개 등

▪주차장(2개소) : 16,529㎡, 500대 주차가능

▪공중화장실(3개소) : 수세식 2, 재래식 1

▪상가시설(26개소) : 식당 4, 건어물 8, 기념품 10, 숙박 1, 기타 3

▪운영방식 : 직영(성류굴운영팀 7명)

Ⅱ. 주요 업무계획

관광마케팅팀

1		단체관광객 유치 인센티브 확대 운영		<계속>

❍ 영덕~상주간 고속도로 개설 및 36번 국도 개통에 따른 단체관광객     유치를 위한 인센티브 확대 운영으로 체류형 관광객 증대 및      지역경제 활성화에 기여

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 12.

❍ 사업예산 : 120백만원(군비)

❍ 지원근거 : 울진군 관광진흥에 관한 지원조례

❍ 지원내용 : 숙박관광

∙ 1일 숙박 시 40만원, 2일 숙박 시 50만원 지원

※ 2018년도 지원기준 : 1일숙박 20만원, 2일숙박 30만원 지원

∙ 수학여행단 지원 : 지원 기준의 50% 지원

∙ 울릉도 관광객 승선료 할인(30%이상 / ㈜제이에이치페리)

▢ 추진계획

❍ 2019. 1월중   : 인센티브 지원공고

❍ 2019. 1. ~ 12. : 인센티브 지원

❍ 2019. 12.     : 사업성 평가 및 지속추진 여부 판단

▢ 기대효과

❍ 울진 방문 관광객의 지역 체류로 인한 지역 경제 활성화

2		관광리더 울진 방방곡곡 투어지원		<계속>

❍ 여행사, 파워블로거 등 홍보 파급력이 있는 관계자 등을 초청, 공격적 관광객 유치 플랫폼(Platform)으로 활용

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 일원

❍ 사 업 량 : 20개 단체(1박2일 기준, 총20회/1,000명 내외)

❍ 초청대상(공모) : 여행사, 블로거, 동호회, 교사, 언론 관계자 등

❍ 사업내용 : 주요 관광지 방문･체험 경비 중 일부
(버스 임차료, 기념품, 체험경비 등)

❍ 시행방법 : 공모에 의함

❍ 사 업 비 : 50백만원(군비, 회당 250만원 내외)

▢ 추진계획

❍ 2019.  1. ∼ : 자료조사․검토

❍ 2019.  2. ∼ : 사업대행기관 업무 협의․선정

❍ 2019.  3. ∼ : 보조금교부, 사업시행

❍ 2019. 12. ∼ : 사업성 평가 → 지속 추진 여부 판단

▢ 기대효과

❍ 대내외 관광객 유치를 통한 울진 관광산업 활성화

❍ 울진의 우수 관광자원 홍보 및 인적 네트워크 구축

3		지역특화 관광마케팅 추진		<계속>

▢ 십이령 보부상 주막촌 활성화 지원

❍ 위    치 : 북면 두천리 십이령 보부상 주막촌 일원

❍ 사업내용 : 셔틀버스(금강송 숲길 1, 5구간 운행, 5월~11월) 지원

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❍ 기대효과

∙ 금강송 숲길(1, 5구간) 내방객 증대 및 보부상 주막촌 조기 정착

∙ 두천1,2리 주민소득 증대로 지역민과 상생협력 분위기 제고

▢ 울진 여행 스탬프 투어 상품 운영

❍ 사업기간 : 2019. 4. ∼ 12.

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❍ 사업내용

∙ 울진 관광지를 엮은 코스별 스탬프 획득

∙ 코스별 스탬프 획득을 통한 경품 지급

∙ 스탬프 투어 방식 : 온라인 및 오프라인 병행

▢ 인근군(봉화,영양)연계 관광상품 운영 지원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 12.

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❍ 관광상품명 : 붉은대게먹고, 한약牛먹고, 백암온천 즐기기 2일

❍ 운영방법 : 인근군(봉화, 영양)과 롯데관광(주) 협약으로 관광               상품운영을 통한 단체관광객 모객 및 지역 경제                활성화에 기여

▢ 제7회 울진체험 사진 전국공모전

❍ 기    간 : 2019. 2. ∼ 2019. 12.

❍ 사 업 비 : 37.5백만원

❍ 내    용 : 울진의 사계절 자연경관, 전통문화, 생활상, 축제,

레포츠 등 관광분야 전반

▢ 2019 울진군 SNS 콘텐츠 공모전

❍ 기    간 : 2019. 3. ∼ 11.

❍ 사 업 비 : 15백만원(군비)

❍ 공모분야 : UCC, 웹툰

❍ 공모주제

∙ 문화, 관광, 축제, 전통시장, 자연경관 등 울진군 곳곳에 담긴 매력물 등

∙ 우리 곁의 친숙하면서도 볼거리, 즐길거리 가득한 나만의 명소 발굴 및 추천

▢ 문화관광해설사(가) 확대 운영

❍ 현재인원 : 6명

※ 문화관광해설사 : 2명, 문화관광해설가 : 4명

❍ 확대운영 : 10명

❍ 확대방법

∙ 경상북도 문화관광해설사 수요조사 시 반영

∙ 울진 문화관광해설가 양성과정 교육 수료자 우선 선발

▢ 2019년 관광분야 공모사업 신청

❍ 웰니스 관광 클러스터 사업 : 800백만원(국비400, 지방비400)

❍ 생태녹색관광자원화 사업   : 120백만원(국비 60, 지방비 60)

❍ 야간관광상품 개발         :  33백만원(도비10, 군비23)

문화예술팀

4		울진군 죽변면도서관 신축	<신규>

❍ 1994년 준공 이래 운영 중인 도서관의 노후로 주민의 시설물 이용에 대한 불편민원이 지속적으로 제기됨에 따라 신축하여 쾌적한 문화시설 제공으로 독서문화진흥에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 죽변면 죽변북로 64-4 (죽변면도서관)

❍ 사 업 비 : 6,000백만원 (국비4,800 지방비1,200)

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2021. (3년간)

❍ 면    적 : 연면적 924㎡, 대지 1,291㎡

❍ 구    조 : 철근콘크리트(지하1층, 지상3층)

❍ 사업내용

∙ 지하1층 : 기계실 등 부대시설

∙ 1층     : 어린이장난감 자료실, 북카페 등

∙ 2층     : 동아리실, 강의실, 디지털자료실, 사무실 등

∙ 3층     : 일반자료실, 열람실 등

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2019. 1. ~ 2.  : 도서관 건립위원회 구성 및 운영계획 수립

❍ 2019. 3. ~ 7.  : 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행

❍ 2019. 8. ~ 10. : 지방재정투융자심사

❍ 2019. 11. ~ 2020. 3. : 도서관 건립 타당성 사전평가 (문체부 심사)

❍ 2020. 4. ~ 2020. 8.   : 실시설계(건축 등) 용역 시행

❍ 2020. 9.      : 신축 착공

❍ 2021. 8.      : 준공

❍ 2021. 9.      : 도서관 운영 등

▢ 문제점 및 대책

❍ 총 사업비 60억원 중 타당성 조사 용역비(1억원 기 확보)를 제외한 국비(균특) 확보 필요

∙ 도서관 건립 타당성 사전 평가(문체부)

▢ 위 치 도

5		울진군 공공도서관 운영	<계속>

❍ 책으로 행복한 사회문화 기반 시설의 제공으로 군민의 독서 활성화

및 독서문화 진흥을 통한 삶의 질 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 대    상 : 울진군 공공도서관 2개소

∙ 죽변면도서관 (죽변면 죽변북로 64-4)

∙ 울진남부도서관 (후포면 후포삼율로 194-4)

❍ 사 업 비 : 798백만원 (국51, 도23, 군724)

∙ 운 영 비 : 644백만원

- 죽변면도서관   : 285.6백만원

- 울진남부도서관 : 358.4백만원

∙ 개관시간 연장사업 : 109백만원 (국51, 도9.5, 군48.5)

∙ 도서구입비 : 45백만원 (도13.5, 군31.5)

❍ 운영방식 : 민간위탁

∙ 죽변면도서관   : 죽변면발전협의회

∙ 울진남부도서관 : 후포면발전협의회

▢ 추진상황 및 계획

❍ ’19.  1. : 공공도서관 위탁운영자 공모 실시 및 선정

❍ '19. 1. ~ 12.

∙ 도서대출 및 문화교실 운영

∙ 개관시간 연장 사업

❍ '19.  9. : 독서의 달 행사 추진

▢ 기대효과

❍ 공공도서관의 적극적인 운영으로 군민 독서 분위기 제고

6		울진군 작은도서관 운영	<계속>

❍ 읍면단위 소규모 유휴공간에 도서관을 설립·운영함으로써 농촌지역 주민들이 쉽게 도서를 접할 공간 마련

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 대    상 : 울진군 내 6개 읍․면

∙ 울진읍(구.새마을지회 1층), 근남면(문화체육센터 2층)

∙ 매화면(복지회관 1층), 기성면(복지회관 2층)

∙ 평해읍(구 보건지소 1층), 온정면(복지회관 1층)

❍ 운 영 비 : 300백만원 (군비)

∙ 울진작은도서관 : 51.3백만원

∙ 평해작은도서관 : 49.2백만원

∙ 근남작은도서관 : 48.6백만원

∙ 기성작은도서관 : 49.8백만원

∙ 매화작은도서관 : 52.2백만원

∙ 온정작은도서관 : 49.5백만원

❍ 운영방식 : 민간위탁(읍면 작은도서관 운영위원회)

▢ 추진상황 및 계획

❍ '19. 1. ~ 12. : 도서대출 및 문화교실 운영

❍ '19. 9 : 독서의 달 행사 추진

▢ 기대효과

❍ 농⋅어촌 주민들의 독서 공간 제공으로 삶의 질 향상

7		□2019년 울진군 북스타트□ 사업 추진	<계속>

❍ 그림책을 매개로 아이와 부모의 관계형성을 돕고 영유아의 조기

독서습관을 형성하는 교육 및 독서활동을 통해 지역의 인재양성

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 3. ~ 12.

❍ 대    상 : 관내 만4세 이하 영유아 1,000여명

❍ 사 업 비 : 26백만원(군비)

❍ 장    소 : 공공도서관(죽변면·울진남부도서관),
작은도서관(울진·근남·매화·기성·평해·온정작은도서관)

❍ 사업내용 : 관내 영유아를 대상으로 책꾸러미 배부 및 책놀이    프로그램, 부모교육, 자원활동가 교육 등

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2017. 4. 15. : 북스타트 선포식 (북스타트 여는 날) 개최

❍ 2018. 3. ~ 11. : □2018년 울진군 북스타트□ 사업 추진

❍ 2018. 5. ~ 12. : 책꾸러미 배부, 책놀이 프로그램 운영 및 부모교육 실시

❍ 2019. 2. : □2019년 울진군 북스타트□ 사업 기본계획 수립

❍ 2019. 3. ~ 12. : □2019년 울진군 북스타트□ 사업 추진 등

▢ 기대효과

❍ 영유아의 조기 독서습관 기회 제공으로 미래 독서문화 활성화 제고

8		찾아가는 독서 복지 서비스 사업	<계속>

❍ 도서관 이용이 어려운 지역 주민 및 민간사업장 이용자에게 도서관 자료와 독서프로그램을 지속적으로 제공함으로써 독서 문화를 진흥하고 독서인구 확대에 기여

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 34백만원(군비)

❍ 장    소 : 울진군 내

❍ 사업내용 : 「책책빵빵」이동도서관 버스를 운행하여 도서관 이용이 어려운 노약자, 임신부 등 독서소외계층에 도서 배달 및 유동인구가 많은 관광지 및 MOU체결 사업장에 장기 대출

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2012. 12.～ : 도서배달 및 문화강좌 서비스 중 (관내 어린이집 15개소)

❍ 2015. ~ 2018. : 후정해수욕장 바다도서관 운영, 총 2,059명 이용

❍ 2017. ~ 2018. : 민간사업체 및 군부대 등 24개소와 책 읽는 가게 MOU체결

❍ 2018.  9.  5. : ’17년 한수원 사업자지원사업 이동도서관 버스구매 협약금 교부

❍ 2019.  1. : 이동도서관 구조개선 버스(특장차량) 구입

❍ 2019.  2. : 이동도서관 운행 인력 채용 및 운영 계획 수립

❍ 2019.  3. ∼ 12. : 이동도서관 운영

▢ 기대효과

❍ 찾아가는 독서 복지 서비스 제공으로 독서 인구 확대에 기여

9		이현세 만화도서관 리모델링 사업	<신규>

❍ 매화작은도서관을‘이현세 만화도서관’콘셉트로 테마를 지정, 유휴공간을 리모델링하여 도서관 중심으로 만화거리 조성 등 전국적 명소로 발전

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 사업대상 : 매화작은도서관

❍ 사 업 비 : 70백만원 (국비49, 군비21)

❍ 사업내용 : 유휴공간 포함 약99㎡의 특색있는 인테리어 공사 후 문화공간 조성

▢ 추진상황 및 계획

❍ '19. 1. : 이현세 만화도서관 리모델링 기본계획 수립

❍ '19. 2 : 실시설계 및 기초공사 시행

❍ '19. 3. ∼ 10. : 리모델링 공사 시행 및 도서관 장비 구입

❍ ‘19. 10. ∼ 12. : 개관 홍보 및 가운영 등

❍ ‘19. 12월중 : 이현세 만화도서관 개관 및 운영

▢ 기대효과

❍ 유명 만화가의 도서관 운영으로 새로운 관광․문화포인트 제공

10		울진 유림문화회관 건립		<신규>

❍ 전통문화의 정체성을 담고 있는 문화시설로써, 그 가치를 재발견

❍ 유학을 근간으로 한 초·중·고학생, 청소년 인성교육, 선비교육,

여성교육 등 인재양성과 정신문화 교육의 장 제공

❍ 전통혼례, 제례, 전통의식 계승발전

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 울진읍 읍내리 571

❍ 사 업 량 : 유림회관 신축 1식 / 지상2층

❍ 사 업 비 : 2,000백만원 정도

❍ 사업내용

∙ 1층 : 사무실, 대회의실

∙ 2층 : 소회의실, 휴게실, 예절․선비체험관, 학습실

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2018.  8 : 실시설계 용역비 추경 예산 확보

❍ 2018.  9 : 사업자 지원사업 신청

❍ 2018. 11 : 사업수행능력평가(PQ) 시행

❍ 2018. 12. 11 : 설계용역 착수보고회

❍ 2018. 12. ~ 2019. 4. : 실시설계용역 시행

❍ 2019. 10 : 착공

❍ 2020. 10 : 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 기존 시설물(하우스 등) 철거 필요

❍ 인접 토지 소유자와 도로 진입로 확보 협의

▢ 위치도

11		흥부문화센터 건립	<계속>

❍ 복합문화공간 제공을 통한 북면 주민 복지 및 문화수준 향상

❍ 복합문화공간을 통한 지역주민 일자리 창출

▢ 개    요

❍ 위    치 : 울진군 북면 부구리 159-9번지등 4필지

❍ 총사업비 : 86억원(기본지원 20, 사업자지원 66)

※ 공사비 66억원, 부지매입비 약 20억원

※ 부족예산 : 발전소주변지역지원사업 공통부분 예산편성

❍ 사업기간 : 2010. 4. 29. ～ 2019.  3.(예정)

❍ 대지면적 : 6,205.14㎡(1,877평)

❍ 건축면적 : 건축면적 740.18㎡ / 연면적 2,608㎡(788평)

❍ 구    조 : 철근콘크리트, 지상4층

❍ 사업내용

∙ 1층 : 사무실, 회의실, 기계실, 통신실    ∙ 2층 : 문화교실, 휴게실

∙ 3층 : 회의장, 체력단련장               ∙ 4층 : 도서관, 독서실

▢ 추진상황

❍ 2017.  6.  7. : 주민설명회(북면사무소)

❍ 2017.  6. 16. : 건축허가 신고(한수원한울본부)

❍ 2017.  9. : 사업자지원사업 신청(옹벽설치) → 한울본부 심의제외(2017.11)

❍ 2017. 9. 21. : 건축허가

❍ 2017. 10. 23. : BF인증신청 -(재)한국장애인개발원장

❍ 2017. 10. 27. : 사업자지원사업 지원금 실행계획서 제출(군→한수원)

❍ 2017. 11. : 사업자 지원사업 업무협약 및 실행계획서 제출

❍ 2017. 11.  2. : BF 인증심의(한국장애인개발원)

❍ 2017. 11. 16. : BF 인증심사(한국장애인개발원)

❍ 2017. 11. 21. : 흥부문화센터 건립 지원 협약 체결

❍ 2017. 12.  1. : 흥부문화센터 건립 지원 사업비 교부신청(한수원)

❍ 2017. 12.  1. : BF 예비인증 교부(한국장애인개발원)

❍ 2017. 12. 22. : BF 예비인증에 따른 설계내역 및 도면 수정

❍ 2018.  1. 23.  : 흥부문화센터 건립추진위원회 개최

※ 부족예산 : 발전소주변지역지원사업 공통부분 예산편성

❍ 2018.  2. 20. : 계약원가 심사 및 일상감사

❍ 2018.  2. 21. : 주민설명회(북면사무소: 120명)

❍ 2018.  4. 10. : 착공

❍ 2018.  5.  8. : 흥부문화센터 신축부지 경계 측량

❍ 2018.  5. 28. ～ 31. : 폐가 3동 철거 및 폐임목 처리

❍ 2018.  6.  4. ～ 10. : 부지정리, 실측량, 터파기 및 전주 이전

❍ 2018.  9. : 사업자지원사업 신청(부족예산 13억원)

❍ 2018. 12. : 1∼4층 골조 및 옥탑·파라펫 설치완료(공정률 : 27.4%)

❍ 2019.  2. : 흥부문화센터 건립 후 운영주체 및 사용자 지정 협의

▢ 조 감 도

12		울진군지 개정 편찬	<계속>

❍ 울진군의 발전과정과 행정의 발자취, 현황자료를 집대성하고 지역발전 토대 구축에 따른 역사의 정체성 확립

❍ 군민과 다음세대에게 향토 역사의 올바른 이해를 통한 자긍심 및 애향심 고취

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 전역

❍ 총사업비 : 400백만원(’19년 200, ‘20년 200)

❍ 사업기간 : 2018.  1. ~ 2020. 12. (3년)

❍ 사 업 량 : 군지 2,000질(1질 3권으로 구성), CD ROM 2,000장

❍ 사업내용 : 울진군지 조사 및 원고 집필, 교정 및 감수 등

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2018.  1. ~ 12. : 기초자료 조사

❍ 2018.  7. ~  8. : 군지 개정 편찬 용역 계획수립

❍ 2019.  1. ~ 2019. 12. : 기초자료 조사 및 집필, 중간보고회

❍ 2020.  1. ~ 2020. 12. : 원고 교정 및 감수, 발간

※ 군지 발간 : 1631년, 1713년, 1849년, 1901년, 1939년

※ 군지 증보 : 1971년, 1983년, 2001년

▢ 기대효과

❍ 오래된 군지 발간 및 증보로 지역사료의 재정비 및 향토문화 재정립에 기여

13		□울진 박물관□ 건립	<계속>

❍ 울진의 문화 정체성 확립 및 군 역사의 기록·보관·전수 공간 마련

❍ 문화융성을 위한 대표적인 문화기관으로 군민들의 질적 성장을 위한 기반 마련

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 11.  ~ 2022. 11 (5년)

❍ 위    치 : 울진 엑스포공원

❍ 총사업비 : 20,000백만원 정도

∙ 지특회계 포괄보조사업(생활기반계정) (문체부, 2015.4.21.)

❍ 법적근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제12조

❍ 주요시설

∙ 울진을 대표하는 자료를 수집·전시·연구·교육프로그램을 위한 박물관

∙ 울진관련 기록물의 종합적·체계적 전시 및 교육을 위한 역사박물관

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2017.  9. : 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역비 확보(2억원)

❍ 2017. 12. 13. ~ 2018. 6. 10. : 연구용역 추진(계약금액:188백만원)

❍ 2018.  1. 12. : 연구용역 착수보고회 (소회의실)

❍ 2018.  6.  8.  : 연구용역 중지

∙ 박물관 타당성조사 군민, 대국민 설문조사 응답률 저조

❍ 2018. 11. : 중간보고회

❍ 2019.  2. : 최종보고회

❍ 2019.  7. 31. : 박물관 건립 설립타당성 사전평가 신청 (道→문체부)

❍ 2019. ~ 2020. : 예산확보 및 지방재정투융자 심사 이행(행자부)

❍ 2021. ~ 2022. : 현상 설계 및 박물관 조성

▢ 기대효과

❍ 군민의 향토문화 및 역사에 대한 이해 제고와 문화 인프라 구축에 따른 기반 마련

14		주인예술촌 힐링공원조성	<계속>

❍ 덕구온천과 연계하여 문화체험, 놀이 및 힐링 공간 마련으로 침체된 농촌지역의 신활력 제공과 지역주민의 소득증대 기여로 문화 창조에 의한 지역 활성화

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 북면 주인리 606-1 등 29필지

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021. (5년)

❍ 총사업비 : 3,000백만원 (부지매입비: 1,000, 공사비: 2,000)

❍ 사업내용

∙ 힐링존(조각공원, 야외갤러리, 야생화/허브단지, 치유숲길)

∙ 힐링타운(카라반, 지원시설 등)

∙ 푸드타운(전통주막, 특산물판매장)

∙ 놀이마당(모래놀이터, 바닥놀이, 발물놀이터, 전통체험 놀이마당)

∙ 잔디광장, 주차장, 산책로(도로), 수변광장, 측백나무 및 편백나무 숲, 죽림 등

❍ 편입토지

구 분	계	국유지	공유지 (울진군)	사유지	비 고
필지수	29	5	5	19

❍ 매입현황 : 사유지 19필지 중 12필지 매입(65%)

▢ 추진상황 및 계획

❍ 2017. ~ 2018.  6. : 부지매입(12필지)

❍ 2019.  1. ~  6.   : 미 매입 필지 추가매입

❍ 2019.  2. ~  3.   : 기본계획 및 타당성 조사 용역

❍ 2019.  6.         : 실시설계 및 사업시행

▢ 기대효과

❍ 도⋅농간 예술인들의 문화교류 및 체류형 관광문화 기반 마련

▢ 시설배치 계획도

15		죽변등대 일원 해안순환레일 설치사업	<계속>

관광개발팀

❍ 청정 해변과 훼손되지 않은 자연, 관광을 위한 각종 기반시설을 보유한 울진의 소중한 보물 □죽변□ 가슴 뛰는 블루로드 여행지 조성

▢ 개    요

❍ 위    치 : 죽변면 죽변리(고궁) ∼ 후정리(후정해수욕장 입구)

❍ 사 업 량

∙ 스카이바이크설치 L=2.4㎞, 승하차장 4개소 (중간하차장 2개소 포함),        스카이바이크차량 40대, 정비차량 2대 등

❍ 사 업 비 : 19,500백만원(원특 10,000, 사업자지원사업 9,500)

∙ 기  확  보 : 19,500백만원

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2020(5년)

▢ 추진실적

❍ 2015.  5. 28. : 기본 및 실시설계용역 착수(도화엔지니어링등)

❍ 2016. 11. 24. : 군관리계획 심의

❍ 2017.  1. 24. : 군관리계획(궤도)결정 및 지형도면 고시

❍ 2017.  4. 25. : 공공시설 장애물없는 생활환경인증(BF)

❍ 2017.  4. 27. : 건설기술심의(경상북도)

❍ 2017.  4. 28. : 해역이용협의 관련 해양동식물조사용역

❍ 2017.  5. 12. : 건설사업관리용역(책임감리) 발주

❍ 2017.  6. 29. : 공사원가검사 의뢰(조달청)

❍ 2017.  7. 10. : 군 작전성 검토 결과 회신(조건부 동의)

❍ 2017.  7. 12. : 공유수면 점·사용허가(해역이용협의 완료)

❍ 2017.  7. 24. : 한수원 사업자지원사업 아이디어공모사업 신청(95억)

❍ 2017.  7. 28. : 군 작전성검토 이행각서 제출

❍ 2017.  8. 11. : 군관리계획(궤도)결정(변경) 지형도면 및 실시계획 인가

❍ 2017.  9. 15. : 건설공사 총괄분 및 금회분 사업발주

❍ 2017. 12. 16. : 사업구간내 해양환경영향조사 및 잘피이식용역 발주

❍ 2018.  1.  3. : 건설공사 착공

❍ 2018.  2. 27. : 레일바이크 자재구매(협상에 의한 계약 : 한국AnZ)

❍ 2018.  5.  8. : 군작전성검토 이행관련 군사시설정비사업 일상감사

❍ 2018.  5. 11. : 고궁쪽 승하차장 편입부지(건물포함)보상협의회 개최

∙ 토지보상 : 후정리 편입토지보상 95%

∙ 토지 및 건물보상 : 고궁옆 승하차장부지 보상가격 등으로 보상협의 지연

※ 일부 편입소유자 부지 대토 요구(재해개선사업지구 내 부지 검토 중)

❍ 2018.  6. 20. : ➀궤도사업허가(도시교통새마을과)

➁공유(행정)재산 교환계획보고

❍ 2018.  9. 20. : 군작전성검토 관련 군부대시설 정비공사 발주

❍ 2018. 10.  2. : 설계변경계획 보고(지주 콘크리트파일→강관으로 변경)

❍ 2018. 10. 12. : 차량 및 궤도설비 물품 변경구입 보고

❍ 2018. 10. 29. : 차량 및 궤도설비 물품 변경구입(관급자재)

〔교통안전공단 안전도검사 결과 반영 : 운행방식 겸용                      (수동+전동)2.4㎞→전동 2.4㎞)〕

❍ 2018. 11. 08. : 건설공사 2차공사 시행

❍ 2018. 11. 28. : 고궁 승하차장 편입부지 관련 이주대상자 회의

❍ 2018. 12. 10. : 공유(행정)재산 교환계획 변경보고

❍ 2018. 12. 18. : 건설공사 1차공사 준공(후정∼봉수구간)

❍ 2018. 12. 19. : 고궁 승하차장 이주대상가구 3차회의

❍ 2018. 12. 24. : 동절기 시공중지(건설공사 2차공사등)

▢ 향후계획

❍ 2019. 01. : ➀설계변경계획 보고

(중지사유 : 기둥재 콘크리트파일의 안전성 재검토 및 차량 안전

도검사 결과(차량무게 증가 300kg → 470k)g를 반영한 설계변경 검토)

➁고궁승하차장 편입부지 군유지 교환 관련 4차회의

➂토지분활측량 의뢰

❍ 2019. 02. :  ➀군유지 교환계약 및 소유권이전

➁이주대상자 건축설계등 지원

➂동절기 시공중지 해제

❍ 2019. 03. :  설계변경시행

❍ 2019. 6. : ① 스카이레일 운영방안 및 운영원가산정 용역

② 위탁운영자 모집 전국 제안공모(협상에 의한 계약)

❍ 2019.10. : 스카이레일 시운전 개시(3개월)

❍ 2020. 1. : 시공부분 안전도검사(교통안전공단) 및 준공

❍ 2020. 3. : 관람시설 개장준비

❍ 2020. 4. : 관람시설 개장(위탁운영 개시)

※ 제반여건(동절기, 해상기상)에 따라 준공시점 변동예상

❍ 2020. 6. : 인근에 있는 국립해양과학관과 연결방법 검토 및 추진

❲죽변고궁(스카이레일)시점 ↔ 후정(종점)  -국립해양과학관(1km)〕

▢ 기대효과

❍ 볼거리 체험거리 제공을 위한 관광기반시설 구축으로 지역경제 활성화

❍ 해양과학관과 연계한 관광 시너지 극대화

16		왕피천 케이블카(곤돌라) 설치사업		<계속>

❍ 왕피천 주변 지역의 산재된 관광자원을 연계활용하여 관광객의

이용편의 증진 및 녹색관광 활성화 도모

❍ 특화된 체험형 볼거리 제공으로 지역경제 활성화 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 근남면 수산리(엑스포공원)∼산포리(해맞이공원)

❍ 사업구간 : 엑스포공원 아쿠아리움 옆 ∼해맞이공원 그네터

❍ 사업내용 : 케이블카(곤돌라)설치 L=0.715㎞, 탑승장 2개소, 지주

4개(보조지주 2개포함), 케빈 15대(일반 10, 크리스탈 5)

❍ 사업기간 : 2015년 ∼ 2019년(5년간)

❍ 총사업비 : 15,200백만원(원특 8,050, 일반회계 7,150) - 전액확보

▢ 추진실적

❍ 2016.  9. 22. : 사업계획변경에 따른 용역과업 관계자 회의

❍ 2016.  9. 30. : 변경된 사업계획 기본설계 보고(군수)

❍ 2016. 10. 30. : 군관리계획결정(변경) 입안도서 작성

❍ 2016. 11. 30. : 군관리계획결정(변경) 관련기관 및 실과협의

❍ 2016. 12. 30. : 군관리계획 공람공고

❍ 2017.  2.  9. : 변경된 사업계획 근남면 주민설명회

❍ 2017.  2. 10. : 삭도 외자구매계획 보고(군수)

❍ 2017.  2. 15. : 삭도 외자구매 입찰공고(조달청)

❍ 2017.  3.  8. : 군관리계획 심의자료 제출

❍ 2017.  4.  4. : 외자구매 제안서 평가

❍ 2017.  5.  4. : 선하지 부지 감정평가

❍ 2017.  5.  9. : 우선협상대상자와 협상

❍ 2017.  6. 15. : 군관리계획결정 및 지형도면 고시

❍ 2017.  6. 29. : 선하지 부지매입 완료(해맞이공원내 1필지)

❍ 2017.  7. 24. : 설계경제성검토(VE)용역 발주

❍ 2017.  9.  1. : 삭도설계 안전도검사(교통안전공단)

❍ 2017.  9. 25. : 설계경제성검토(VE)

❍ 2017.  9. 25. : 지방건설기술심의 사전 업무협의(경북도)

❍ 2017. 11. 28. : 지방건설기술심의(조건부 가결)

❍ 2018.  1. 12. : 건설사업관리용역 착수

❍ 2018.  1. 15. : 건설기술심의 결과 조치계획 제출(경북도)

❍ 2018.  2.  5. : 설계원가에 대한 일상감사(기획실)

❍ 2018.  3. 27. : 군계획시설 실시계획 인가 신청(도시교통새마을과)

❍ 2018.  4.  6. : 건설공사 착공

❍ 2018.  6.  4. : 군계획시설 실시계획인가(도시교통새마을과)

❍ 2018.  6. 12. : 궤도사업허가(도시교통새마을과)

❍ 2018.  6. 25. : 해맞이공원 지주설치 옆 묘지관련 민원발생

∙ 민 원 인 : 산포리 임국자 및 김진문

∙ 내    용 : 케이블카가 지나가는 선하지에 해당되지 않으나, P2 지주

설치지점 파일시공시 인접한 묘지손상등으로 대책요구

〔산포리 758번지(전) 902㎡에 묘지 7기〕→ 사유지

매입 및 묘지이장 관련사항

❍ 2018. 7.  9 : 하부(엑스포공원)승하차장 부지 파일작업 및 지반조사

∙ 하부 승하차장 지반조사 결과를 기초보강 검토중(파일길이 당초

30m에서 57m 보강하기 위한 구조계산 검토등)

❍ 2018. 7. 11 : 시공 일시중지(지시)

❍ 2018. 7. 16 : 토지 및 지장물(묘지) 감정평가

❍ 2018. 8. 10 : 토지 및 지장물(묘지)소유자 방문협의

∙ 토지 및 지장물(전 902㎡, 묘지3기 : 임국자) ⇒ 매입 및 우선이장

∙ 지장물(묘지 4기 : 김진문, 김영문) ⇒ 부지 확보후 이장

❍ 2018. 8. 26 : 타워 및 엑스포승하차장 기초부분 지질조사 결과

(콘크리트파일 본당 길이 30m ⇒ 57m)

❍ 2018. 8. 27 : 공사 일시중지(기초파일 안전성부분 재검토)

❍ 2018. 9. 13 : 삭도 외자구매 신용장(L/C)개설기간 연장신청(조달청)

❍ 2018.10. 10 : ➀삭도외자재 현장반입 완료(케빈,전자케비넷,로프)

➁해맞이공원 지주설치지역 부지 및 지장물매입 완료

❍ 2018.10. 25 : ➀엑스포 승하차장 기초보강등 설계변경계획 보고

➁공사 일시중지 해제

❍ 2018.11. 13 : 관급자재 기초파일 변경구입

❍ 2018.12. 24 : 동절기 시공중지(현재 공정률 20%)

▢ 추진계획

❍ 2019. 01. : 운영방안 및 활성화방안 수립용역 착수

❍ 2019. 02. : ➀설계변경 시행 및 시공중지 해제

➁운영방안수립용역 중간보고

➂전기공사 관급자재 구입

❍ 2019. 04. : ➀운영방안수립용역 최종보고

➁시설운영자 모집공고

❍ 2019. 05. : ➀우선협상자 선정 및 협약체결

➁시설운영조례 제정

❍ 2019. 07. : 시운전 착수

❍ 2019. 08. : 시설안전도검사(교통안전공단)

❍ 2019. 10. : 군계획시설 준공

❍ 2019. 12. : 시운전 개시(3개월)

❍ 2020. 02. : 개장준비

❍ 2020. 03. : 개장

▢ 기대효과

❍ 볼거리 체험거리 제공을 위한 관광기반시설 구축으로 지역경제 활성화

❍ 왕피천 일원에 산재된 관광시설과 연계한 관광 시너지 극대화

(엑스포공원, 염전오토캠핑장, 망양정, 성류굴, 민물고기연구센타등)

17		왕피천 생태공원 조성사업	<계속>

❍ 왕피천 주변 지역의 산재된 관광자원을 연계 활용하여 관광객의 이용편의 증진 및 녹색관광 활성화 도모

❍ 특화된 관광 상품을 개발하여 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

▢ 개    요

❍ 위    치 : 울진군 근남면 왕피천 일원

❍ 사 업 량 : 생태탐방로, 보행교, 생태관찰공원, 화장실, 소망나무     전망대, 기타 편의시설

❍ 사 업 비 : 6,000백만원(균특 3,000, 지방비 3,000)

∙ 기 확 보 : 3,500백만원(균특 1,500, 지방비 2,000)

∙ ‘19년도   : 2,500백만원(국비 1,250, 지방비 1,250) - 예산확정

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2019(4년)

▢ 추진실적

❍ 2015.  4. 13. : 기본 및 실시설계용역 착수(경호엔지니어링 등)

❍ 2017.  1. 24. : 기본계획 확정

❍ 2017.  2.  5. : 사업계획변경 사전협의(문체부, 경북도)

❍ 2017.  2. 23. : 근남면 주민설명회

❍ 2017.  5. 12. : 공사원가 검사의뢰(경북도)

❍ 2017.  7. 24. : 총괄계약 및 1차 공사 착공

❍ 2017.  7. 26. : 사업계획변경협의 완료(문체부)

❍ 2017. 12. 22. : 동절기 시공중지

❍ 2018.  2. 26. : 동절기 시공중지 해제

❍ 2018.  6. 14. : 현재 소망나무전망대 등 공사 중

❍ 2018.  8. 15. : 1차분 준공

❍ 2018. 12. 31. : 2차분 발주도서 작성

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : 2차분 발주(기 총괄계약) 및 계약·착공

❍ 2019. 10. : 2차분 준공

18		불영계곡 캠핑장 조성사업	<계속>

❍ 새로운 관광패턴의 변화에 부응하고 급변하는 관광수요에 신속히 대응하기 위한 기반시설 마련

❍ 자연친화적인 관광숙박 시설을 조성하여 우리군 관광 활성화 도모

▢ 개    요

❍ 위    치 : 울진군 울진읍 대흥리 77번지 일원

❍ 사 업 량 : 캠핑장면적 A=7,235㎡(야영장 2,686, 기타 4,549㎡)
캠핑시설 19개소(글랜핑 3, 데크 13, 쇄석 3), 화장실 1개소,
샤워실 1개소, 통제소 1개소, 급수대 1개소, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 2,120백만원(균특 500, 지방비 1,620)

∙ 기 확보 : 1,620백만원(균특 250, 지방비 1,370)

∙ ‘19년도 :   500백만원(균특 250, 지방비  250)

❍ 사업기간 : 2016 ∼ 2019(4년)

▢ 추진실적

❍ 2017.  2. 15. : 공사원가 심사(경북도)

❍ 2017.  3. 30. : 총괄분 및 1차분공사 발주

❍ 2017.  5.  8. : 공사착공

❍ 2017.  7. 20. : 문화재보존영향성검토

❍ 2017. 11.  3. : 문화재현상변경허가

❍ 2017. 12. 19. : 1차분 준공(토목,조경)

❍ 2018.  2. 19. : 2차공사 발주 및 착공

❍ 2018.  5.  1. : 위탁운영자 모집공고(울진홈페이지 : 울진거주자로 제한)

❍ 2018.  5. 30. : 민간위탁운영 제안서 접수(3개사 참여)

❍ 2018.  7. 10. : 공모제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(6.19)
협약체결 후 법률사무소 공증, 야영장 허가완료

❍ 2018.  7. 25. : 개장〔(주)하오삼건설 서명선 임대료 : 3년/75백만원〕

❍ 2018.  9. 20. : 휴게소 건물 리모델링 실시설계 용역 발주 및 착수

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : ➀ 문화재현상변경허가 협의 및 신청(문화재청)

➁ 불영휴게건물 리모델링(안)보고

❍ 2019.  2. : 실시설계용역 준공 및 공사원가심사(경북도)

❍ 2019.  3. : 착공

❍ 2019.  7. : 준공

19		염전해변 관광자원화 조성사업	<계속>

❍ 새로운 관광패턴의 변화에 부응하고 급변하는 관광수요에 신속히 대응하기 위하여 왕피천 주변 관광지를 연계한 개발로 시너지 극대화

❍ 자연 친화로 조성된 염전 유원지(자연녹지)에 은어다리 주변 편의시설과 4계절 캠핑이 가능할 수 있도록 유원지 시설계획 세분화와 문화 및 오토캠핑시설을 설치하여 머물고 갈수 있는 여행지 조성

▢ 개    요

❍ 위    치 : 울진군 근남면 수산리 75번지 일원

❍ 사 업 량 : 염전 유원지(자연녹지) 이용계획 세분화(A=85,000㎡)
캠핑시설, 문화공간 시설, 조경시설 등

❍ 사 업 비 : 4,050백만원(균특 1,900, 도비 500, 군비 1,650)

∙ 기 확보  : 1,750백만원(지특  750, 도비 225, 군비  775)

∙ ‘19년도   : 2,300백만원(균특 1,150, 도비 275, 군비  875)

※ 토지매입비(11필지)) 165백만원(군비) 제1회추경시 확보

❍ 사업기간 : 2017 ∼ 2019(3년)

▢ 추진실적

❍ 2011. 11. 20. : 왕피천주변지역 관광벨트조성 타당성조사 및          기본계획수립

❍ 2017. 10. 20. : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2018.  1.  3. : 과업착수

❍ 2018.  4. 25. : 기본계획안 확정

❍ 2018.  6. 11. : 유원지 시설계획 변경신청(도시교통새마을과)

❍ 2018.  7. 24. : 군의회 간담회시 설명(사업계획 및 토지취득)

❍ 2018.  7. 25. : 실시설계용역 최종보고

❍ 2018.  7. 26. : 공유재산 관리계획 심의

❍ 2018. 10. 15. : 군관리계획(수산유원지 조성계획)변경결정 및 지형도면 고시

❍ 2018. 10. 22. : 유원지시설 실시계획 인가신청(도시새마을과)

❍ 2018. 11. 19. : 공사 계약원가 검사(경북도)

❍ 2018. 12. 05. : 총괄분 및 1차공사 발주

❍ 2018. 12. 21. : 추진상황 주민설명회(근남면)

❍ 2018. 12. 31. : 현재 입찰후 계약중

▢ 향후계획

❍ 2019.  1. : 1차공사및 착공

❍ 2019.  2. : 2차공사 발주 및 착공

❍ 2019.  6. : 1차공사 준공

❍ 2019. 11. : 위탁운영자 제안공모 공고

❍ 2019. 12. : ① 2차공사 준공
② 야영장 허가 및 위수탁협약체결·법률사무소 공증

❍ 2020.  3. : 오토캠핑장 개장

20		후포 등기산 스카이워크 설치사업	<계속>

❍ 새로운 관광패턴의 변화에 부응하고 급변하는 관광수요에 신속히 대응하기 위한 기반시설 마련

❍ 주변 후포항 여객선터미널과 등기산 공원을 연계한 차별화된 관광자원개발

▢ 개    요

❍ 위    치 : 울진군 후포면 후포리 지내(갓바위 부근)

❍ 사 업 량 : 스카이워크 L=135m(B=2.0m), 출렁다리 L=40m(B=2.0m),
스카이워크 종점부 광장 내 상징조형물 1개소

❍ 사 업 비 : 4,432백만원(국비 300, 지방비 4,132)

❍ 사업기간 : 2016 ∼ 2018(3년)

▢ 추진실적

❍ 2016.  3. 30. : 실시설계 및 행정절차이행 완료

❍ 2016.  4. 24. : ① 공사원가검사(경북도) 및 일상감사(울진군)
② 공유수면 점사용협의 완료(해양수산과)

❍ 2016.  6. 17. : 공사착공

❍ 2016.  7. 26. : 공사일시중지(기초부분 변경에 따른 구조계산 등)

❍ 2017.  1. 05. : 출렁다리 설치지역 선하지 건물매입 협의 완료

❍ 2017. 11. 30. : 상징조형물 설치사업 전국 제안공모

❍ 2018.  2.  7. : 스카이워크 공사준공

❍ 2018.  2. 26.∼ 3. 6. : 대게축제기간 중 스카이워크 임시개장

❍ 2018.  3.  8. : 시설운영조례 제정계획 보고

❍ 2018.  5. 30. : 상징조형물 본탑설치

❍ 2018.  6. 15. : 상징조형물설치 완료(선묘룡설치 완료)

❍ 2018.  6. 15. : 무료관람 개시

❍ 2018.  7. 24. : 군의회 간담회시 스카이워크 운영조례제정안 설명

❍ 2018.  8. 22. : 입법예고

❍ 2018.  9. 30. : 조례규칙심의회

❍ 2018. 12. 31. : 조례제정

▢ 향후계획

❍ 2019. 04. : 발권기 및 운영시스템설치

❍ 2019. 05. : 유료화 시점 및 위탁여부 관련 검토 보고

❍ 2019. 06. : 유료화운영 개시

21		관광지 각종 안내간판 및 기타 관광시설 정비	<계속>

❍ 기 조성된 관광지의 관리 및 노후 및 파손된 시설물을 수시로 정비하여 지역을 찾는 관광객들에게 쾌적하고 안전한 시설제공

❍ 도로변에 설치된 관광홍보용 빌보드간판 중 퇴색된 홍보 도안 교체와 관광지 안내 소규모 간판을 수시로 정비하여 우리군을 찾는 관광객에게 이용편의 제공

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 관내(울진읍 등 10개 읍․면)

❍ 사 업 량 : 6건 등

∙ 관광지 시설유지보수 및 안내시설 유지관리(수시) : 150백만원/연중

∙ 관광안내소 개보수 및 안내표지판 개보수(수시) : 40백만원/연중

∙ 현내항 해양광장 데크설치 : 100백만원

∙ 후포등기산 보행교(출렁다리)주변 사면정비등 : 30백만원

∙ 후포 등기산 스카이워크 발권기 및 프로그램설치 : 30백만원

∙ 소태리 산책로 2개소 : 379백만원(마무리 200, 신규 179)

∙ 후정3리(재해위험지구개선사업지구)택지조성 : 210백만원

❍ 사 업 비 : 939백만원(균특 20, 도비 6, 군비 913)

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ∼ 12월

▢ 추진계획

❍ 2019. 1. : 실시설계용역 착수

❍ 2019. 3. : 착공, 기타시설 수시보수

❍ 2019.12. : 준공

▢ 기대효과

❍ 관광시설을 수시로 유지 보수하여 지역을 찾는 관광객의 불편해소

❍ 축구 전지 훈련장인 백암운동장의 보도(산책로)설치사업 마무리로

이용객의 안전한 도보 공간 제공으로 운동장 활성화에 기여

문화재팀

22		수토문화나라 조성사업		<계속>

❍ 국내유일의 수토문화유적을 정비하여 수토사의 정신을 계승하고

체험할 수 있는 역사문화의 핵심교육 관광지 조성

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 기성면 구산리 202번지 일원(부지면적 18,647㎡)

❍ 사업기간 : 2012 ～ 2019(8년간)

❍ 사 업 량 : 수토문화전시관, 전망대, 추모광장, 주차장 조성 등

❍ 총사업비 : 9,572백만원(국비 6,143, 도비 790, 군비 2,639)

∙ 2015년 까지 : 2,654백만원(국비 1,300, 도비 167, 군비 1,187)

∙ 2016년      : 1,714백만원(국비 1,200, 도비 154, 군비 360)

∙ 2018년(이월) : 5,204백만원(국비 3,643, 도비 469, 군비 1,092)

▢ 추진실적

❍ 2015. 7. 17. : 편입토지･물건 재감정평가 및 보상협의(3차)

※ 매입률 : 81% [13,191㎡(29필지) 중 10,696㎡(21필지) 취득완료]

❍ 2017. 2. 28. : 준공(전망대, 제기고, 추모광장, 산책로, 조경 등)

❍ 2017. 7. 14. : 수토문화나라조성사업 부지내 기존건물 철거

❍ 2018. 4. 23. : 공사계약 원가심사(건축) 완료 [경상북도]

❍ 2018. 5. 31. : 전시공사 원가검토 완료 [외부 전문기관 의뢰]

❍ 2018. 7. 20. : 3대문화권 문화･생태 관광기반조성사업 2차 중간평가 연구

용역 지역설명회 참석 [문체부/한국문화관광연구원]

※ 설명회 목적 : 3대문화권 2차 중간평가 조정(안)에 대한 의견수렴 등

❍ 2018. 8. 9. : 수토문화전시관 건축공사 착공 [주식회사 세왕종합건설]

❍ 2018. 9. 20. : 3대문화권 문화･생태 관광기반조성사업 2차 중간평가 결과 통보

※ 추가반영 내용

∙ 사업기간 연장 : 2012～2019까지(2년 연장)

∙ 부지 면적 및 내용 추가 ➞ 1,068㎡ 추가, 야외 수토선 조형물 등 시설물 설치

❍ 2018. 12. 24. : 수토문화전시관 건축공사 동절기 시공중지 지시

❍ 2018. 12. ～ : 수토문화전시관 전시공사 및 야외수토선 조형물 제작･설치                      시행업체 선정 중

▢ 향후계획

❍ 2019. 5. : 수토문화전시관 건축공사 준공

❍ 2019. 9. : 수토문화전시관 전시공사 준공

23		월송포진성 편입토지 매입		<계속>

❍ 월송포진성 복원에 따른 편입 토지를 우선 매입하여 수토사

정신을 계승하고 매장문화재의 효율적 보존 관리

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 평해읍 월송리 302-1번지 등 34필지

❍ 사 업 량

∙ 토지편입 : 34필지 13,909㎡

- 국유지(1필지 1,049㎡), 공유지(7필지 305㎡), 사유지(26필지 12,555㎡)

∙ 편입건물 : 8동 1,676㎡

❍ 사 업 비 : 2,494백만원 정도(토지매입 1,332, 건물매입 1,162)

❍ 사업기간 : 2015. 1 ～ 2018. 12. 31.

※ 선적사 편입부지는 추후 매입(매입비 886백만원)

∙ 토지 1필 1,634㎡(매입비 391백만원)

∙ 건물 4동  407㎡(매입비 495백만원)

▢ 추진실적

❍ 2014. 12. : 공유재산 수시 관리계획 반영

❍ 2017. 4. 21. : 월송포진성부지내 문화재발굴(시굴)조사 용역 완료(1차)

※ 발굴결과 : 조선시대 건물지 관련 유구, 월송포진성의 성벽 일부 확인 등

※ 2018. 7월 현재 토지매입률 : 78% (미매입 3필지, 2,700㎡)

- 사유지 26필지(12,555㎡) 중 23필지(9,855㎡) 취득 완료

- 보상금 지급액 1,720백만원(황원근 등 7인)

- 미취득 : 3필지, 2,700㎡(선적사 1,634㎡, 임필봉 48,909㎡중 1,050㎡, 황금석 16㎡)

❍ 2018. 7. 31. : 철거공사(1차분) 준공 [소요예산 225백만원]

❍ 2018. 10. 23. : 월송포진성부지내 문화재발굴(시굴)조사 용역 완료(2차)

[업체명 : (재)삼한 문화재 연구원. 계약액 17,200천원]

※ 시굴조사 위치 및 면적 : 평해읍 월송리 303-6번지 등 4필지, 1,565㎡

※ 발굴결과 : 월송포진성과 관련된 유구는 확인되지 않음

❍ 2018. 10월 : 철거공사(잔여분) 완료 [소요예산 135백만원]

※ 잔여분 건물 현황 : 예식장 1동(473㎡, 철근콘크리트조, 2층),                                                화장실 1동(12㎡, 철근콘크리트조, 1층), 야적장 1동

▢ 향후계획

❍ 미취득 토지 소유자에 대한 소재 파악 및 보상협의 지속 추진

24		평해향교 유림회관 신축		<계속>

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 평해읍 평해리 928-6번지 등 2필지

❍ 사 업 량 : 건축연면적 174㎡(53평), 한옥양식(철근콘크리트구조)

❍ 사업내용 : 유림회관 신축 ⇒ 1,000백만원

기존건물 철거, 축대 및 배수로 설치 등 ⇒ 200백만원

❍ 총사업비 : 1,200백만원(2019년도 본예산 군비 600백만원 확보 완료)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 3. 21. : 토지･건물 매입완료(매입비 151백만원)

∙ 토지매입(평해리 900-1, 928-6) ⇒ 1,077㎡(326평)

∙ 건물매입 ⇒ 34㎡(주택 1동, 창고 1동)

❍ 2018.  9. : 2019년도 도비지원 신청(미반영)

❍ 2018.  9. : 2019년도 사업자지원사업 신청(미반영)

❍ 2018. 10. 11. : 실시설계 용역 착수

※ 용역업체 : 건축사사무소 용마루(계약금액 63백만원)

❍ 2018. 12. : 2019년도 본예산 사업비 일부 확보(군비 600백만원)

❍ 2019.  1. : 문화재구역 현상변경 허가 신청(경북도청)

❍ 2019.  1. ∼  : 사업비 부족분(600백만원) 추가 확보 추진

❍ 2019.  3. ∼ 2019. 8. : 착공 및 준공

▢ 기대효과

❍ 경상북도 문화재자료 제160호『평해향교 대성전』주변에 유림회관을    건립하여 잊혀져 가는 유교문화 전승·보존·홍보 계기 마련

25		불영사 사적비 건립		<계속>

❍ 불영사는 1,400여 년의 오랜 역사와 전통을 가지고 있는 전통사찰이며, 기존의 한문으로 된 작은 사적비가 있으나 일반인들이 이해하기

어려운 문제점이 있음.

❍ 불영사를 찾는 관람객들이 불영사에 대한 연혁 및 중요성을 이해하기

쉽도록 한글로 된 사적비를 건립하고 주변을 정비하여 불영사 및 관련문화재의

가치를 후세에 널리 알리고자 함.

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 금강송면 하원리 122번지 일원(불영사 경내)

❍ 사 업 량 : 불영사 사적비 건립 및 주변정비 1식

❍ 사 업 비 : 200백만원(도비 50, 군비 150) ⇒ 민간자본보조

❍ 사업기간 : 2018. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2017. 9. 1. : 2018년 도지정문화재 보수정비사업 예산신청

❍ 2018. 2. 8. : 설계지침 시달(경상북도)

※ 설계지침 : 설계단계부터 자문을 받아 사적비 건립

❍ 2018. 5. 31. : 사적비 위치선정에 따른 현장방문(경북도청)

※ 문화재전문위원 2명, 경북도청직원 2명

❍ 2018. 6. 25. : 설계지침 변경승인 신청

※ 문화재 전문위원 자문의견 : 기존의 사적비가 존재 함으로 재검토 바람

※ 지침변경 승인신청 내용 : 사적비 건립 ➞ 중창비 건립

❍ 2018. 12. 24. : 설계승인 완료(경상북도)

※ 승인내용 : 기존 사적비 위치 이동 및 중창비 건립

❍ 2019. 1월중 : 문화재 현상변경 허가신청(문화재청)

❍ 2019. 1.  ～ 2019. 3. : 착공 및 준공

▢ 기대효과

❍ 불영사를 찾는 관람객들에게 불영사에 대한 연혁 및 중요성 제공

26		평해황씨 대종회 추원재 개축	<계속>

❍ 관동팔경 중의 하나인 월송정 입구에 위치한 평해황씨 대종회 소유의 노후 건축물인 추원재를 개축함으로써 월송정을 찾아 오는 관광객 들에게 쾌적한 관람환경 제공

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 평해읍 월송리 423-8번지

❍ 소 유 자 : 평해황씨 대종회(회장 황인석)

❍ 사업내용 : 기존 추원재 개축(철근콘크리트조+목조기와지붕,

98㎡), 수세식 화장실 신축(25㎡, 목조기와지붕)

❍ 사 업 비 : 600백만원(특별조정교부금 300, 군비 300)

❍ 사업기간 : 2018. 1. ～ 12. 31.  (이월예산)

▢ 추진실적

❍ 2018. 1. : 2018년 당초예산(군비 300백만원)확보(월송정주변정비사업)

❍ 2018. 3. 12. : 2018년 특별조정교부금(300백만원) 가내시 통보

❍ 2018. 3. 13. : 실시설계용역 착수

※ 용역업체 : ㈜일진건축사사무소(설계용역비 57,324천원)

❍ 2018. 12. 4. : 설계용역 완료

※ 야외 수세식 화장실은 건축비 부족으로 2019년도 별도예산(1억6천만원)            확보후 추진

▢ 향후계획

❍ 2019.  1월중 : 공사계약 원가심사 완료(경상북도)

❍ 2019.  1. ～ 2019. 2. : 공사시행업체 선정

❍ 2019.  3. ～ 2019. 6. : 착공 및 준공

27		수토문화나라 주변정비 사업		<신규>

❍『3대 문화권 문화 생태 관광기반 조성사업』으로 추진 중인

『수토문화나라 조성사업』이 올해 준공예정으로 진행중에

있으나 주변 체험시설 부족으로 시설 확충 필요

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 기성면 구산리 산3번지 일원

❍ 사업내용 : 탐방로(L=1.1km, B=2.0m), 팔각정자(1동, 목조기와 25㎡), 조경공사(1식)

❍ 사 업 비 : 600백만원(균특 300, 도비 90, 군비 210)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  9. 17. : 2019년 관광자원개발사업 정부예산안 임시통보(경상북도)

❍ 2018.  9.  : 2019년도 당초예산 편성 요구

❍ 2019.  3.  : 설계용역 완료

❍ 2019.  3.  : 사업 편입토지 공유재산수시관리계획 반영

❍ 2019.  5.  : 사업 편입예정 부지 기공승락서 징구

❍ 2019.  6.  : 1회추경 토지매입비 반영

❍ 2019.  6.  : 토지보상 협의

❍ 2019.  8.  : 착  공

❍ 2019. 11.  : 준  공

▢ 기대효과

❍ 경상북도 기념물 제165호『대풍헌』주변에 위치한 독도조형물, 수토문화전시관과 연계하여 해안 숲속 탐방로와 바다 전망을 위한 정자를 설치하여 지역을 찾는 관광객에게 체험거리 제공

28		망양정 주변정비 사업		<신규>

❍ 망양정 공원 관리 일환 및 관람객들에게 쾌적한 환경을 제공

하기 위함

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 근남면 산포리 710-2번지 일원(망양정자 주변)

❍ 사업내용 : 정자주변 화단내 잔디 및 조경수목 식재 등(면적 300㎡)

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

※ 주민 건의사항

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 12. : 2019년도 당초예산 편성

❍ 2019.  3. : 실시설계 용역 완료

❍ 2019.  4.  : 착  공

❍ 2019.  7.  : 준  공

▢ 기대효과

❍ 문화유산의 관람환경 개선으로 활용증대 및 관람편의 도모

❍ 문화재 주변의 환경저해 시설 정비를 통한 이미지 제고

29		울진 수산리 굴참나무 주변정비 사업		<신규>

❍ 국가지정문화재 천연기념물 제96호『울진 수산리 굴참나무』

주변정비로 효율적 보존･관리

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 근남면 수산리 381-1번지

❍ 사업내용 : 옹벽설치 (L=35m, H=1.5m)

❍ 사 업 비 : 80백만원(군비)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

※ 주민 건의사항(민원제기)

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  4. : 2019년도 국가지정문화재 보수정비사업 예산신청

❍ 2018.  9. 14. : 2019년 문화재보수정비사업 예산 사전통지(문화재청)  ※ 예산반영 제외 됨 ➞ 자체예산 확보후 시행 검토

❍ 2018. 12. : 2019년도 당초예산 편성(전액 군비)

❍ 2019.  3. : 실시설계 용역 완료

❍ 2019.  3.  : 문화재 현상변경 허가 신청(문화재청)

❍ 2019.  4.  : 착  공

❍ 2019.  7.  : 준  공

▢ 기대효과

❍ 굴참나무 주변 경사지 붕괴위험 해소로 인근 주택 안전 확보

30		울진 불영사 대웅보전 주변정비 사업		<신규>

❍ 국가지정문화재 보물 제1201호 『울진 불영사 대웅보전 주변정비』로

효율적 보존･관리

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 금강송면 불영사길 48

❍ 사업내용 : 대웅보전･응진전 기단 정비, 공양간 부속채 석축 및 배수로 정비(석축 L=60m)

❍ 사 업 비 : 200백만원(국비 140, 도비 30, 군비 30)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  4. : 2019년도 국가지정문화재 보수정비사업 예산신청

❍ 2018.  9. 14. : 2019년 문화재보수정비사업예산 사전통지(문화재청)

❍ 2019.  3. : 실시설계 용역 완료

❍ 2019.  3. : 설계승인 신청(문화재청)

❍ 2019.  4.  : 착  공

❍ 2019.  7.  : 준  공

▢ 기대효과

❍ 경내의 불량한 환경정비로 관리자 및 이용자들의 불편 해소

❍ 이용객의 효율성과 편의 증진 도모

31		울진 불영사 영산회상도 주변정비 사업		<신규>

❍ 국가지정문화재 보물 제1272호『울진 불영사 영산회상도』주변

정비로 효율적 보존･관리

❍ 불영사 경내에 재래식 화장실로 악취로 관람객 불편초래

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 금강송면 불영사길 48

❍ 사업내용 : 기존 재래식 화장실을 수세식으로 정비

❍ 사 업 비 : 250백만원(국비 175, 도비 37.5, 군비 37.5)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  4.  : 2019년도 국가정문화재 보수정비사업 예산신청

❍ 2018.  9. 14. : 2019년 문화재보수정비사업예산 사전통지(문화재청)

❍ 2019.  3.  : 실시설계 용역 발주

❍ 2019.  4.  : 설계승인 신청(문화재청)

❍ 2019.  5.  : 설계승인 승인

❍ 2019.  5.  : 착  공

❍ 2019.  8.  : 준  공

▢ 기대효과

❍ 노후 재래식 화장실을 수세식으로 변경하여 관람객 불편 해소

❍ 재래식을 수세식으로 정비하여 사용자 편의 증진

32		울진 불영사 응진전 방충사업		<신규>

❍ 국가지정문화재 보물 제730호 『울진 불영사 응진전』의 방충

사업 추진으로 문화재의 효율적 보존･관리

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 금강송면 불영사길 48

❍ 사업내용 : 불영사 응진전 방충사업(흰개미 군체 제거)

❍ 사 업 비 : 25백만원(국비 12.5, 도비 6.25, 군비 6.25)

※ 지원비율 : 국비 50%, 도비 25%, 군비 25%

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

▢ 추진계획

❍ 2018.  9. : 2019년도 국가정문화재 보수정비사업 예산신청

❍ 2019.  3. : 실시설계 용역 발주

❍ 2019.  4. : 설계승인 신청(문화재청)

❍ 2019.  5. : 착  공

❍ 2019.  8. : 준  공

▢ 기대효과

❍ 문화유산의 관람환경 개선으로 활용 증대 및 관람 편의 도모

33		망양정 해맞이공원 편입부지 매입		<신규>

❍ 2006년도 망양정 순환도로 개설공사시 도로에 편입되고 남은 부정형

토지로 일반인 매입자가 없어 소유자가 울진군에 매입요청 민원제기

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 근남면 산포리 622번지

❍ 사업내용 : 부지매입, 전, 1필지, 266㎡

❍ 사 업 비 : 34,314천원(군비)

❍ 사업기간 : 2019. 1. ～ 12. 31.

※ 주민 건의사항(민원제기)

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 12. : 2019년도 당초예산 편성

❍ 2019.  1. : 토지 감정평가 의뢰

❍ 2019.  2. : 토지보상 협의

❍ 2019.  3. : 토지매입 완료

▢ 기대효과

❍ 망양정 해맞이공원에 인접한 토지로 군에서 매입하여 향후 다용도로 활용 가능

성류굴운영팀

34		울진 성류굴 주변정비 사업	<계속>

❍ 울진성류굴의 명성 계승과 보존·관리 및 적절한 활용

❍ 성수기 시 이산화탄소 분압이 높아 관람객의 안전상 환기가 절대필요하며, 유사시 피난동선 확보(성수기시 5,000ppm 이상)

❍ 타 동굴에 비해 관람구간이 짧아, 비공개 구역 추가개방으로 고유의 자연 유산적 가치 제고와 효율적인 동굴운영 기대

▢ 사업개요

❍ 울진 성류굴종합정비계획수립 연구용역

∙ 기    간 : 2018. 4. 17. ~ 2019. 5. 14.(390일간)

∙ 용 역 비 : 121,500천원(국85,050, 도10,935, 군25,515)

∙ 용역업체 : 사단법인 한국동굴연구소

∙ 내    용

- 교육·환경 활용방안 및 보존방안

- 11, 12광장 활용방안

- 관람동선, 피난동선 확보, 동굴조명 등

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  1. 31. : 사업지침 확정

❍ 2018.  2. 22. : 연구용역 설계승인(문화재청→울진군)

❍ 2018.  3.  9. : 계약원가 심사 승인(도)

❍ 2018.  4. 17. : 연구용역 착공

❍ 2018. 12. 18. : 연구용역 중간보고

❍ 2019.  5. 14. : 용역 완료

▢ 문제점 및 대책

❍ 연구용역결과에 따른 국비 확보(문화재청) 불가피

∙ 2020년 국비신청 계획

문화시설운영팀

35		울진문화센터 유지보수 관리		<계속>

❍ 지속적인 유지관리와 안정적인 시설운영으로 군민 문화공간

조성 및 보급 활동에 기여

❍ 노후 손상된 시설 보수 및 보완으로 수준 높은 문화예술 공연

❍ 기획 전시로 군민 문화예술 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 :	울진군 울진읍 연호로 47

❍ 사 업 량

∙ 화장실 개보수 168㎡(1층96㎡/2층72㎡)

∙ 강당출입구 및 분장실 보수 1식(방풍 및 빛 차단 등)

∙ 무대특수조명장비(무빙라이트 등) 확보 및 1‧2층 로비 냉난방기 설치 1식

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 5.

❍ 사 업 비 : 531백만원(군비)

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 4. : 무대기계(음향반사판 등) 정비

❍ 2018. 5. : 무대조명 전력간선 이설 및 장비 구매설치

❍ 2018. 7. : 로비 및 전시실 조명 레일 및 무대기계점검통로 LED조명 설치

⇒ 화장실 개보수, 강당출입구 및 분장실 보수공사 실시설계용역 완료(2018년6월)

❍ 2019.  1. : 건축허가(변경) 및 구매설치장비의 사양, 호완성 조사검토

❍ 2019.  2. : 공사(구매) 발주 및 착공

❍ 2019.  5. : 준공(구매) 및 시운전 등 완료

▢ 기대효과

❍ 노후․손상시설 보수, 보완으로 안전성 확보

❍ 관람 및 방문객에게 쾌적한 시설환경 개선으로 수준 높은 공연     기회제공

36		울진문화예술회관 운영		<계속>

❍ 지속적인 유지관리와 안정적인 시설운영으로 군민 문화공간

조성 및 보급 활동에 기여

❍ 기획 전시 유치로 군민 문화수준 향상 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 후포삼율로 194-14

❍ 사 업 량 : 공연(음악, 뮤지컬, 연극, 다원예술), 영화상영

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

❍ 사 업 비 : 250백만원(군비 195, 복권기금 55)

▢ 추진계획

❍ 2019.  3. : 공연선정 신청(한국문화예술회관연협회)

❍ 2019.  4.∼ 12월 : 공연행사(13회) 및 영화상영(12편24회)

∙ 공    연 : 한문연 3회(대·중·소형), 자체기획공연 10회

∙ 영화상영 : 12편 24회(문화예술회관) →문화가 있는날 상영

∙ 대    관 : 강당(2개소), 전시(전시실 및 회의실 3개소)

▢ 문제점 및 대책

❍ 현재 전기 및 기계직 2명 운영

∙ 조작미숙, 작동 불능시 상황대처 불가

❍ 조명 및 음향자격소지자 2명 추가 배치 필요

(공연법 시행령 제21조)

37		읍면 민원실 사이니지(디지털홍보간판) 설치	<계속>

❍ 디지털영상을 활용한 다양한 콘텐츠의 영화상영 및 군정홍보 효과와 신속한 정보전달

❍ 중장기적 홍보예산 절감 및 도시미관을 살리고 환경오염방지

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 울진읍 울진중앙로 115-21(청사별관 1층)

❍ 사 업 량 : 사이니지(디지털영상홍보간판) 10대

❍ 사업기간 : 2019. 1. 1. ∼ 2019. 5.

❍ 설치장소 : 10개 읍․면사무소

※ 2018 시범운영 : 민원실, 문화센터, 문화예술회관 등 8개소(2018. 5.설치)

❍ 사 업 비 : 60,000천원

❍ 운    영 : 작은영화관 사회적 협동조합

▢ 추진계획

❍ 2019. 1. : 설치위치 사전협의

❍ 2019. 2. : 제작설치 발주 및 착수

❍ 2019. 5. : 설치 완료 및 시운전

▢ 기대효과

❍ 디지털영상을 통한 다양한 콘텐츠의 울진군정 및 영화상영 홍보

❍ 신속한 정보전달 및 장기적 예산절감