도시새마을과

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 주요 업무계획

○ 장기미집행 군계획시설 실시계획인가 및 군관리계획 결정(변경) 용역	5

○ 역세권 개발계획 수립용역 추진	6

○ 군관리계획(용도지역) 정비용역	7

○ 월변지구 도시개발	8

○ 연호근린공원 조성	10

○ 울진도시계획도로(중로3-5호선) 개설	11

○ 울진도시계획도로(중로3-8호선) 개설	12

○ 울진도시계획도로(중로2-1호선) 개설	13

○ 울진도시계획도로(소로3-43호선) 개설	14

○ 북면도시계획도로 개설(8개대안사업)	15

○ 북면도시계획도로(소로2-24호선, 소로3-5호선) 개설	17

○ 후포도시계획도로(중로3-1호선) 개설	18

○ 후포도시계획도로(소로2-12호선) 개설	19

○ 등기산공원 진입로 정비사업	20

○ 도시계획시설 소규모 정비사업	21

○ 죽변∼후정간 해안 경관도로 개설사업	23

○ 농산어촌개발사업 및 주민숙원사업	24

○ 농촌중심지 활성화사업	25

○ 평해읍 기초생활 거점 육성사업 추진	26

○ 소규모주민숙원사업(자체사업)	27

○ 새마을주민숙원사업(도비보조)	28

○ 마을회관 신축 및 개선사업(4개사업)	29

○ 가로등·보안등 광원 변경 지속 추진	30

○ LED가로등 교체 및 가로등 정비체계 운영	31

○ 경관디자인사업 추진	32

○ 현수막게시대 교체 및 설치	33

○ 옥계현충길 벽화설치	34

○ 해안도로변 경관용 표지병 설치사업	35

○ 죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진	36

○ 온정면 농어촌 소규모 어린이 놀이터 조성	38

○ 낙후지역발전 특별회계 지원사업 추진	39

○ 성류온천 개발 계획 취소 및 온천원 보호구역 해지	40

○ 행복씨앗마을(매화마을 활성화사업) 추진	42

○ 온천향장제품 기술이전에 따른 홍보 지원	43

○ 울진읍 농촌중심지 활성화 공모 추진	45

Ⅰ. 일반현황

▢ 직원 정․현원

[단위:명]

실 과 명	정 원	현 원
도시새마을과	21	21

▢ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	담 당 업 무
계	21
과 장	1	∙ 도시새마을과 업무총괄
도시계획	5	∙ 군관리계획 ∙ 개발행위허가 ∙ 자연공원 및 도시공원 관리
도시재생	5	∙ 도시토목사업 ∙ 자전거인프라구축 ∙ 도시토목사업 토지수용 및 용지매수 보상
새 마 을	4	∙ 마을회관 신축 및 보수, 소도읍육성사업 ∙ 농촌생활환경정비사업, 읍면소재지종합정비사업 ∙ 새마을 조직 관리 및 사업 추진
경관디자인	4	∙ 경관디자인 업무 ∙ 옥외광고물 관리 ∙ 가로등 설치 및 보수
도시재생 T/F	2	∙ 경지역개발사업 관리 ∙ 경동서남해안권 발전계획 업무 ∙ 온천이용 관리

▢ 각종 통계현황

❍ 용도지역 구분

[단위:㎢]

총 면 적		도시지역		비도시지역		비고
면적	비율(%)	면적	비율(%)	면적	비율(%)
989.209	100	47.92	4.8	941.289	95.2

❍ 도시지역

[단위:㎢]

총면적	울진읍	평해읍	북면	근남면	온정면	죽변면	후포면	비고
47.920	8.485	11.404	7.672	7.57	1.74	4.555	6.494

❍ 자연환경 보전지역

[단위:㎢]

총면적	상수원보호구역				수산자원 보호구역	자연환경보호구역			비고
	소계	울진	평해	온정		소계	불영	덕구
34.163	0.74	0.232	0.213	0.295	1.523	31.87	25.595	6.275

❍ 관리지역

[단위:㎢]

총면적	보전관리지역	생산관리지역	계획관리지역	미세분관리지역	비고
162.938	80.156	9.422	73.360

❍ 전문건설업 및 옥외광고업

[단위:개소]

계 구분	전문건설업	옥외광고업	비 고
313	287	26

❍ 군립공원 및 온천

구 분	명 칭	위 치	면적(㎢)	지정일자
군립공원	계	2개소	31.87
	불영계곡 군립공원	근남면 수곡ㆍ행곡리 울진읍 대흥리, 금강송면 삼근ㆍ하원리	25.595	1983. 10. 5
	덕구온천 군립공원	북면 덕구리 일원	6.275	1983. 10. 5
온천	계	4개소	1.707
	덕구온천	북면 덕구리 일원	0.54	1983. 12. 26.
	백암온천	온정면 온정리ㆍ소태리 일원	0.176	1981. 10. 12.
	죽변해심원온천	죽변면 죽변리 일원	0.0045	2013. 12. 13.
	성류온천	근남면 수곡리 일원(개발계획 수립)	0.991	1996. 5. 23.

❍ 가로등 현황

[단위:개소]

읍면별	계	종 류 별		비 고
		가 로 등	보 안 등
합 계	11,540	3,966	7,574
울진읍	1,980	749	1,231
평해읍	1,105	429	676
북 면	1,173	278	895
금강송면	698	173	525
근남면	1,168	511	657
매화면	869	294	575
기성면	1,176	489	687
온정면	741	121	620
죽변면	1,266	403	863
후포면	1,364	519	845

▢ 관련 유관 기관․단체 현황

단 체 명	회 장	회원수	조직구성	지원내용
울진군새마을회	신용철	443명	지도자협의회 부 녀 회 문 고	․ 봉사활동 및 행사 지원 ․ 교육 여비 지원
바르게살기운동울진군협의회	김정희	730명	군 협 의 회 읍․면위원회	․ 봉사활동 및 행사 지원 ․ 교육 여비 지원

Ⅱ. 주요 업무계획

도시계획팀

1		장기미집행 군계획시설 실시계획인가 및 군관리계획 결정(변경) 용역		<신규>

❍「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제48조제1항에 따른 2020.7.1.일 결정된 군계획시설이 실효됨에 따라 울진군 장기미집행 군계획시설 실시계획인가 및 군관리계획 결정(변경)을 통해 체계적인 군계획시설 사업을 추진

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 군 전체

❍ 미집행 군계획시설 : 690개소, 3,566,587㎡

∙ 20년 미만 : 137개소, 622,729㎡

∙ 20년 이상 : 553개소, 2,943,858㎡

❍ 용 역 비 : 1,500백만원(실시설계비)

(총 70건, 도로60건, 광장1건, 공원6건, 유원지 2건, 배수지 1건)

❍ 사업기간 : 2018. 4. 3. ~ 2019. 9. 30. (과업중지 : 2019. 8. 26.)

❍ 주요내용 : 20년 이상된 장기미집행 시설의 일몰제 대비 정비

▢ 추진상황

❍ 2019.  9. ~ 12. : 측량 및 지반조사

❍ 2019. 12. ~ 2020. 4. : 실시설계(안) 작성

❍ 2020. 4. ~  6. : 군관리계획(군계획시설) 결정(변경) 행정절차 이행

❍ 2020. 6.      : 군관리계획(군계획시설) 결정(변경) 및 실효고시

❍ 2020. 6.      : 군관리계획(군계획시설) 실시계획인가 고시

❍ 2020. 7. ~  8. : 성과품 작성 및 제출

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

도시계획팀

2		역세권 개발계획 수립용역 추진 <계속>

❍ 동해안 철도시대를 맞이하여 울진의 관문인 울진역사 주변을

종합적이고 지속가능한 개발계획을 수립하여 울진의 이미지

제고와 경제 활성화에 이바지 함

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진역사 일원

❍ 용 역 사 : 주식회사 한도엔지니어링 종합건축사사무소

❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 9. 30. (과업중지 : 2019. 8. 26.)

❍ 주요내용 : 역세권 교통체계 개선과 군관리계획(용도지역) 결정

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 4. 9. : 용역 착수

❍ 2018.  6.  : 과업추진방향 자문(최동식 교수 외 2명)

❍ 2018.  8.  : 사례조사(일본 규수 북부지역)

❍ 2018. 10.  : 가로망체계 재검토 및 주요 쟁점사항 보고

❍ 2019.  1.  : 읍남리 공동주택건설사업 관련 보완요청

❍ 2019. 7. 4. : 가로망체계 재검토

❍ 2019. 10.  : 주택건설사업 방침 결정 및 지구단위계획(안) 작성

❍ 2019. 12.  : 지구단위계획(안) 도시건축 공동위원회 자문

❍ 2020.  1.  : 최종보고 및 주민의견 청취

❍ 2020.  3.   : 도시건축 공동위원회 심의

❍ 2020. 04.   : 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시

▢ 기대효과

❍ 역사주변 교통체계 개선을 통한 주민불편 최소화 및 교통사고 억제

❍ 군관리계획(용도지역) 결정(변경)을 통한 발전적인 개발이 가능하도록 토대를 만들어 경제활성화에 기여

도시계획팀

3		군관리계획(용도지역) 정비용역 <계속>

❍ 농업진흥지역 해제 및 자연공원구역 변경에 따라 해제･변경지역에 대해 토지의 체계적이고 효율적인 관리로 지속가능한 발전을 도모하고, 주민의 삶의 질 향상 및 공공복지 증진을 기여하고자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 군관리계획(용도지역) 결정(변경)을 함

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 비도시지역 전역

❍ 면    적 : 673,096㎡ (농업진흥지역 해제, 군립공원 변경 지역)

∙ 보전관리지역 2,704㎡, 농림지역 622,623㎡, 자연환경보전지역 47,769㎡

❍ 사업기간 : 2018. 4. 3. ∼ 2019. 9. 30. (과업중지 : 2019. 8. 26.)

❍ 주요내용 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 군관리계획(용도지역) 결정(변경)

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  4. 24. : 착수보고

❍ 2018. 11. ~ 12. : 군관리계획(용도지역) 결정(변경)(안) 작성

❍ 2019.  2. 20 ~ 21. : 토지적성평가 적성등급에 따른 입안여부 심의

❍ 2019.  6. ~ 8. : 전략환경영양평가 평가서 준비 및 협의회 심의

❍ 2019.  9.     : 울진군 관련부서(기관) 협의 및 주민공람

❍ 2019. 10.     : 군의회 의견 청취 및 군계획위원회 자문

❍ 2020.  1.     : 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 신청(경상북도)

❍ 2020.  2. : 경상북도 도시계획위원회 심의

❍ 2020.  3. : 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 및 지형도면 고시

▢ 기대효과

❍ 군관리계획(용도지역) 결정(변경)을 통하여 토지의 체계적･효율적 관리 및 지역의 지속가능한 발전방향을 모색하고, 주민의 삶의 질 향상 및 공공복리 증진에 기여

도시재생팀

4		월변지구 도시개발		<계속>

❍ 월변지구 내 미 개발된 국유지(철도청)의 종합적인 도시개발사업 추진으로 새로운 시가지를 형성하고 양질의 택지공급

▢ 사업개요

❍ 위    치 :	울진읍 읍내3리 일원(국유지, 舊 철도부지)

❍ 사 업 량 : 도시개발사업 A=62,124㎡

❍ 사 업 비 : 약 21,300백만원(추정)

∙ 조사 및 설계비 등 : 2,800백만원(구역지정 및 실시설계, 부담금 등)

∙ 공사비 및 부대비 : 3,200백만원(기반시설 조성)

∙ 보상비 : 15,300백만원

❍ 사업기간 : 2015.  7.∼2022. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2017.  9. : 도시개발특별회계 설치조례 제정(울진군 조례)

❍ 2017. 10. : 구역지정 및 개발계획(안) 승인 신청

❍ 2018.  6. : 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 승인(도 도시계획위원회)

❍ 2018.  9. : 고시문 열람공고(울진군) 및 실시계획 작성

❍ 2019.  1. : 소규모환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)

❍ 2019.  1. : 실시계획인가 협의 및 사업시행자 지정 승인

❍ 2019.  5. : 도시개발사업 개발계획 변경 고시

❍ 2019.  7. : 유치원 부지 원형지 공급계획(안) 승인 신청

❍ 2019.  8. : 유치원 부지 원형지 공급승인

❍ 2020.  1. : 실시계획인가 고시(울진군)

❍ 2020.  1. : 편입토지 감정 평가 및 철도부지 매입(기재부 협의중)

❍ 2022. 12. : 부지 조성 완료 및 분양

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 부지보상비 153억으로 추정되며, 당해 예산편성이 부담되는 실정

❍ 대    책

∙ 당해 사업비 확보에 어려움이 있으므로 토지보상비는 연차별 확보 후 분할납부

도시재생팀

5		연호근린공원 조성		<계속>

❍ 연호근린공원 내 주민편의시설을 확충하여 지역주민의 삶의 질

향상 및 휴게공간 조성

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 연지리(연호근린공원) 일원

❍ 사업내용 : 연호지 정비, 보도교 및 정자설치, 경관조명 등

❍ 총사업비 : 4,268백만원(도비 1,986, 군비 2,282)

❍ 사업기간 : 2017. ∼ 2020. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2017.  6. : 연호근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.  8. : 연호근린공원 조성사업 기본계획안 보고

❍ 2017.  9. : 기본계획안 의견수렴(유관기관 등)

❍ 2018.  2. : 설문조사(정자, 보도교, 데크설치 등) 실시

❍ 2018.  4. : 사업설명회(울진읍이장, 청년회)

❍ 2019.  1. : 공사계약 원가심사

❍ 2019.  3. : 기본 및 실시설계용역 준공

❍ 2019.  8. : 연호지 일원 생태환경보전관리계획 수립용역 착수

❍ 2019. 12. : 연호지 일원 생태환경보전관리계획 수립용역 준공

❍ 2019. 12. : 시설공사 착수

❍ 2020.  6. : 시설공사 준공

❍ 2020. 12. : 지역균형발전 전략사업 완료 보고

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 연차공사로 공사기간이 길어 연호공원을 이용하는 군민의 불편이 예상됨

❍ 대    책

∙ 군민들이 많이 이용하는 공원으로 단기간의 공사기간만 소요토록 철저히

관리할 필요가 있어 동절기에 공사추진 예정(콘크리트공정 제외)

도시재생팀

6		울진도시계획도로(중로3-5호선)개설		<계속>

❍ 울진중심시가지 우회도로를 통한 시가지 교통량 분산 및 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 연지리 일원(이안아파트∼자동차학원)

❍ 사 업 량 : L=264m(B=8.0∼12.0m)

❍ 사 업 비 : 1,800백만원(공사비 800, 보상 1,000)

❍ 사업기간 : 2018. 1.∼2020. 2.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2016.  2. : 실시계획 인가고시

❍ 2018.  4. : 도시계획도로 개설사업 주민설명회 개최

❍ 2018.  6. : 편입토지 보상 협의 중(보상율 88%)

❍ 2019.  9. : 공사 착공

❍ 2020.  1. : 공사 준공(진도 80%)

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 일부구간(종점부) 토지 및 지장물 보상 협의 불가

❍ 대    책

∙ 보상협의 불가 구역을 제외하고, 주변의 기존 도로망과 연결하여 통행가능토록 변경 후 완료, 추후 보상협의 시 추가사업 우선 시행

도시재생팀

7		울진도시계획도로(중로3-8호선)개설		<계속>

❍ 울진중심시가지 우회도로를 통한 시가지 교통량 분산 및 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 읍내리 일원(창신빌라∼공세항)

❍ 사 업 량 : L=1,171m(B=12.0m)

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(공사비 2,000, 보상 1,000)

❍ 사업기간 : 2018. 1.∼2020. 2.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018.  9. : 실시계획용역 시행

❍ 2019.  6. : 실시계획 인가고시

❍ 2019.  7. : 편입토지 분할측량 의뢰

❍ 2019.  8. : 주민설명회(읍내2리, 읍남3리)

❍ 2020.  1. : 감정평가 실시

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 사업구간이 장거리사업으로 총괄사업으로 추진시 보상문제 등 상당 시일이 소요될 우려가 있음

❍ 대    책

∙ 2개 마을을 연결하는 도로로 보상협의 진척도에 따라 사업구간을 나누어 사업 추진

도시재생팀

8		울진도시계획도로(중로2-1호선)개설		<신규>

❍ 울진중심시가지 우회도로를 통한 시가지 교통량 분산 및 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 읍내리 일원(경찰서∼구7번국도)

❍ 사 업 량 : L=80m(B=15.0m)

❍ 사 업 비 : 250백만원(공사비)

❍ 사업기간 : 2019. 11.∼2020. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2019. 10. : 실시계획용역 시행

❍ 2020.  1. : 실시계획 인가고시

❍ 2020.  2. : 공사착공

❍ 2020.  6. : 공사준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 해당없음

도시재생팀

9		울진도시계획도로(소로3-43호선)개설		<신규>

❍ 울진중심시가지 우회도로를 통한 시가지 교통량 분산 및 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 읍내리 일원(읍내5리 동회관)

❍ 사 업 량 : L=130m(B=6.0m)

❍ 사 업 비 : 500백만원(공사비 250, 보상 250)

❍ 사업기간 : 2017. 1.∼2020. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2017. 12. : 실시계획용역 시행

❍ 2018.  4. : 편입토지 및 지장물 보상 협의 추진

❍ 2018.  9. : 주민설명회 개최

❍ 2020.  1. : 공사착공

❍ 2020. 12. : 공사준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 구간 내 도로폭 협소 구간(B=4.5m, 읍내5리 동회관 옆)

❍ 대    책

∙ 용지추가 확보 필요(읍내5리 동회관 부지 등)

도시재생팀

10		북면도시계획도로개설(8개대안사업)		<계속>

❍ 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및

도시기능을 체계적으로 조성

❍ 쾌적한 도시조성을 통한 생태문화 관광도시 울진 이미지 제고

▢ 사업개요

❍ 위    치 :	울진군 북면 부구리 일원

❍ 사업내용 : 도시계획도로개설(15지구) L=2,802m(B=6∼15m)

❍ 사 업 비 : 12,000백만원(공사비 6,000, 보상 6,000)

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2020. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2017. 11. ~ 2018. 6. : 편입토지 및 지장물 보상협의

❍ 2018.  8. : 계약원가심사 의뢰 등 공사 발주

❍ 2018.  9. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 일부노선 편입토지(지장물) 보상협의 지연

❍ 대    책

∙ 감정평가 실시 후 재 보상협의 요청

∙ 협의 불가시 해당구간 사업제외

□ 사업조서

연번	공사명	구간	사업량	사업비 (백만원)	비고
합계	17건		L=2,802m (B=6~15m)	12,000
1	북면도시계획도로 (소로2-1호선)개설	혜광타운 ⇒목화미용실	【L=950m】 L=283m(B=15m)	4,500	공사중 (착공 : ‘17.1.)
2	북면도시계획도로 (소로2-2호선)개설		L=510m(B=15m)
3	북면도시계획도로 (소로2-23호선)개설		L=157m(B=8m)
4	북면도시계획도로 (소로2-25호선)개설	휴대폰365아울렛⇒대성수산	L=78m(B=8m)	1,200	2월 시행예정
5	북면도시계획도로 (소로3-30호선)개설	북면119지역대⇒ 대도카센타 앞	【L=262m】 L=128m(B=6m)	1,300	공사중 (착공 : ‘18.10)
6	북면도시계획도로 (소로3-31호선)개설		L=45m(B=6m)
7	북면도시계획도로 (소로3-35호선)개설		L=89m(B=6m)
8	북면도시계획도로 (중로2-3호선)개설	부구초등학교 입구⇒중로2-2호선 접속	【L=394m】 L=44m(B=15m)	1,500	공사중 (착공 : ‘19.4.)
9	북면도시계획도로 (소로1-2호선)개설		L=105m(B=10m)
10	북면도시계획도로 (소로2-12호선)개설		L=130m(B=8m)
11	북면도시계획도로 (소로2-38호선)개설		L=115m(B=8m)
12	북면도시계획도로 (소로2-11호선)개설	부구중앙교회 앞⇒드라마빌라	【L=394m】 L=43m(B=8m)	1,000	공사중 (착공 : ‘19.6.)
13	북면도시계획도로 (소로2-7호선)개설		L=154m(B=8m)
14	북면도시계획도로 (소로3-23호선)개설		L=197m(B=6m)
15	북면도시계획도로 (소로3-6호선)개설	부구중학교 뒤	【L=504m】 L=270m(B=6m)	1,000	토지 보상중
16	북면도시계획도로 (소로2-4호선)개설		L=234m(B=8m)
17	북면도시계획도로 (소로2-3호선)개설	2-2호선~부구주택	L=220m(B=8m)	1,500	토지 보상중

도시재생팀

11		북면도시계획도로(소로2-24호선, 소로3-5호선) 개설		<계속>

❍ 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및

도시기능을 체계적으로 조성

❍ 쾌적한 도시조성을 통한 생태문화 관광도시 울진 이미지 제고

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 북면 부구리 일원(부구시장~흥부만세공원)

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=342m, B=6~8m

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(공사비 2,000)

❍ 사업기간 : 2018. 10. ~ 2020. 6.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2018. 10. : 계약원가심사 및 일상감사 의뢰

❍ 2019.  1. : 공사 착공

❍ 2019. 11. : 사면부 민원사항 협의 완료(옹벽설치)

❍ 2020.  6. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 문 제 점

∙ 해당없음

도시재생팀

12		후포도시계획도로(중로3-1호선)개설		<신규>

❍ 후포중심시가지 우회도로를 통한 시가지 교통량 분산 및 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 후포리 일원(손상문외과 ~ 후포중고교)

❍ 사 업 량 : L=130m(B=12m)

❍ 사 업 비 : 500백만원

❍ 공사기간 : 2020. 1.∼2020. 12.

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2020.  1. : 실시설계용역

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

도시재생팀

13		후포도시계획도로(소로2-12호선) 개설		<계속>

❍ 장기미집행 도시계획시설 개설을 통한 시가지 교통혼잡 해소 및 지역의 균형개발과 도로기반 확충

❍ 노후교량인 “(구)삼율교”를 개체․확장하여 교통소통을 원활히 하고 안전사고 위험을 해소코자 함

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 삼율리 일원(구 삼율교)

❍ 사 업 량 : 교량개체 L=46m(B=11.0m)

❍ 사 업 비 : 2,800백만원원(공사비 2,800백만원)

❍ 사업기간 : 2019. 1.∼2020. 12.

▢ 추진계획

❍ 2019.  1. : 실시설계용역 착수

❍ 2019.  5. : 실시설계용역 주민설명회 개최

❍ 2019.  9. : 설계안전성검토용역 시행

❍ 2019.  9 : 하천공작물 설치허가

❍ 2019. 12. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

도시재생팀

14		등기산공원 진입로 정비사업		<신규>

❍ 후포 스카이워크 및 등기산공원 방문객들의 원활한 통행을 위해 도로를 정비코자 함

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 후포리 등기산 일원

❍ 사 업 량 : 진입로 정비 1

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(공사비 400, 보상비 600)

❍ 사업기간 : 2019. 11.∼2020. 12.

▢ 추진계획

❍ 2019. 11. : 실시설계용역 착수

❍ 2019. 11. : 감정평가 의뢰

❍ 2020.  1. : 토지보상

❍ 2020.  3. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

도시재생팀

15		도시계획시설 소규모 정비사업		<계속>

❍ 소규모 시설 유지보수 및 정비를 통해 주민 불편 해소

❍ 도시계획도로개설로 공공복리를 증진시키고 군민의 삶의 질 향상

▢ 사업조서

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	사 업 량 (위치)	사업 기간	총사업비	비고
계	12개소			1,266,560
1	자연공원 및 온천관리	북면, 금강송면, 온정면	‘20	46,560	계속
2	도시계획시설물 정비 및 보수	울진군 7개 읍면	‘20	100,000	계속
3	자전거도로 보수 및 유지관리	B=1.5 ~ 3.0m L=77.2㎞, 울진군	‘20	200,000	계속
4	군립공원 및 온천활성화	불영계곡, 덕구온천 등	‘20	20,000	계속
5	울진도시계획도로(소로2-13호선) 인도설치공사	토담식당 (B=1.5m, L=220m)	‘20	150,000	신규
6	울진교 가각부 확장공사	울진교 일원	‘20	50,000	신규
7	평해도시계획도로(중로3-4호선) 포장 덧씌우기공사	B=8m,L=200m 평해초등학교 일원	‘20	50,000	신규
8	평해도시계획도로(소로3-4호선) 포장 덧씌우기공사	B=4m, L=400m 평해읍 삼달1리	‘20	50,000	신규
9	온정도시계획도로 (소로3-1호선) 개설공사	B=6m, L=50m 온정면 소태리 1177	‘20	100,000	신규
10	죽변도시계획도로 (소로3-77호선)포장 덧씌우기공사	B=4~6m, L=1km 죽변리 68-4번지일원	‘20	100,000	신규
11	죽변도시계획도로 (소로2-19호선)개설	B=8.0m, L=110m 윤준아파트~후정해수욕장입구	‘20	350,000	신규
12	후포도시계획도로 (중로2-2호선)인도설치공사	B=2m, L=20m 후포리 1036-126	‘20	50,000	신규

▢ 추진실적 및 계획

❍ 2019. 11. : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  2. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

도시재생팀

16		죽변 ∼ 후정간 해안 경관도로 개설사업		<주민건의>

❍ 지역개발 및 지원에 관한 법률에 따른 성장촉진지역의 경쟁력 강화

❍ 국립해양과학교육관, 경북해양바이오산업연구원, 해양순환 관광 레일, 드라마세트장, 신울진1,2호기 한수원 사택 등 공공시설 및 관광지 진입로 확보

▢  사업개요

❍ 위    치 : 죽변면 죽변리, 후정리 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1.7km, B=12.0m

❍ 사업기간 : 2020 ∼ 2023(4년간)

❍ 총사업비 : 7,000백만원(국비 100%)

∙ 2020년 사업비 : 200백만원(실시설계비)

▢  추진경과

❍ 2003. 4. : 죽변도시계획도로(중로3-7호선) 지정(경상북도고시2003-458호)

❍ 2016.12. : 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 고시(경고 제2016-382호)

❍ 2019. 4. : 사전타당성평가 신청

❍ 2019.11. : 지역개발

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 실시설계용역 시행

❍ 2020. 5. ∼ 2021.12. : 토지 보상 및 행정절차 이행

❍ 2021. 1. : 공사 착공

▢ 기대효과

❍ 해안 우회도로 개설로 주민 및 방문객 교통 수용 한계 해소와   관광지 진입로 확보

새마을팀

17		농산어촌개발사업 및 주민숙원사업		계속

❍ 낙후지역의 체계적 개발로 농어촌 지역 간 균형발전 추진

❍ 지역주민 소득증대 및 생활복지 향상

▢ 사업현황

구 분	위 치		사 업 량 (지구)	사 업 비 (백만원)	비 고
	읍면	리동
합 계			28	9,559
농촌중심지활성화사업(지특) 기초생활거점육성사업(지특)	5개읍면	소재지 일 원	5	7,579
소규모주민숙원사업(자체사업)	10개읍면		10	710
새마을주민숙원사업(도비보조)	10개읍면		10	1,090
마을회관 사업	3개읍면		3	180

▢ 추진실적

구 분	추 진 내 용				비 고
	소계	설계중	추진중	준공
합 계	28	25	3
농촌중심지활성화사업(지특) 기초생활거점육성사업(지특	5	2	3
소규모 주민숙원사업	10	10
새마을주민숙원사업	10	10
마을회관 사업	3	3

새마을팀

17-1		농촌중심지 활성화사업		계속

❍ 농산어촌지역의 정주여건을 개선하고 생활편의 기초서비스 제공

❍ 읍면소재지 중심소재지를 강화하고 기초서비스 기능 향상 도모

사업명		매화면	기성면	북면	금강송면
위 치		매화면 소재지 일원 (매화1리)	기성면 소재지 일원 (기성리, 척산리)	북면 소재지 일원 (부구1리, 부구2리)	금강송면 소재지 일원 (삼근1리)
사업량		● 3개분야 6개사업 ∙ 5개 사업(기초생활,경관) - 매화천 수변공원 조성 - 노인회관 리모델링 -매화시장 시설개선 -매화중심가로 경관개선 -매화시장 갤러리존 ∙ 지역역량강화사업	● 3개분야 8개사업 ∙ 7개 사업 (기초생활,경관) -작은사랑채(공동생활홈) -행복나눔센터조성 -인기척화합마중길 -소재지 중심가로 경관개선 -안전드라이브길 -인기척 산책로 -안심마을 조성 ∙ 지역역량 강화사업	● 3개분야 4개사업 ∙ 3개 사업 (기초생활,경관) -공영주차장조성 -흥부시장 신축 -부구공원조성사업 ∙ 지역역량강화사업	● 3개분야 8개사업 ∙ 7개 사업 (기초생활,경관) -복지회관 리모텔링 -마을경로당 리모텔링 -금강송 맞이방 조성 -무선마을방송시스템 구축 -광천산책로 정비 -가로경관 개선 -금강송길정비 ∙ 지역역량강화사업
사업비		· 총사업비 : 5,621백만원 (국3,935 지방비1,686) · 19년사업 : 1,576백만원 (국1,103 지방비473)	· 총사업비 : 5,696백만원 (국3,978 지방비1,718) · 20년사업 : 2,258백만원 (국1,571 지방비687)	· 총사업비 : 3,917백만원 (국2,742 지방비1,175) · 20년사업 : 2,714백만원 (국1,692 지방비725)	· 총사업비 : 3,925백만원 (국2,748 지방비1,177) · 20년사업 : 1,714백만원 (국1,200 지방비514)
사업 기간		2016~2021(6년간)	2017~2020(4년간)	2018~2020(3년간)	2018~2021(4년간)
추진 사항	세부내용	∙총 6개 사업 중 5개 준공 -매화천 수변공원 조성 -노인 마을회관 리모탤링 -매화시장시설개선 -매화시장 갤러리존 ∙지역역량강화사업 준공 ∙매화 중심가로개선사업 (20년 3. 31 준공)	∙ 기본 및 시행계획수립 (‘19년 2월 완료예정) ∙ 총 8개 사업 중 5개 공사중 -인기척 산책로 -안전드라이브길조성 -인기척화합마중길 -소재지 중심가로 경관개선 ∙ 지역역량강화사업 시행중 ※ 2020년 계획 -커뮤니티센터조성 -작은사랑채(공동생활홈) -안심골목길 조성	∙ 기본설계 및 실시설계 시행 -용역기간 : ‘18. 8. ~ ’120.2 -용역금액 : 500백만원 ∙지역역량 강화사업 착수 ※ 2020년 계획 -공영주차장조성 -흥부시장 신축 -부구공원조성사업	∙ 기본설계 및 실시설계 시행 -용역기간 : ‘18. 8. ~ ’19. 12 -용역금액 : 200백만원 ∙ 총 8개 사업 중 4개 착공 -광청산책로정비 -가로경관개선 -금강송길정비 ∙ 지역역량강화사업 ※ 2020년 계획 -금강송 맞이방 조성 등 4개소 착공
	진도	80%	50%	20%	30%
비 고

새마을팀

17-2		평해읍 기초생활 거점 육성사업 추진

❍ 농촌 중심지인 읍 면 소재지에 교육·복지·문화 등 중심지기능을 확충

❍배후마을로 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계를 구축

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 평해읍 평해1~3리 일원

❍ 사 업 량 : 총 3,719ha (거점지: 330ha, 배후마을: 3,389ha)

❍ 사 업 비 : 4,000백만원 (국비: 2,800백만원, 지방비: 1,200백만원)

∙ 2020년 국비 833백만원

❍ 사업기간 : 2020년~ 2024년 (5개년)

❍ 주요사업

사 업 명	현 황				비 고
	사업별	세부사업명	사업량	사업비 (백만원)
행복만남평해읍 (기초생활기반확충)	H/W	평해행복만남 커뮤니티센터	신축398㎡ 1층 필로티주차장 2층 키즈카페 3층 세대공감 만남쉼터 등	2,046
머물고싶은평해읍 (지역경관개선)	H/W	평해역 행복만남광장	산책로정비600㎡ 화단조성, 조형물, 등의사,파고라 등	716
		평해 가로경관개선	LED거로등, 디자인휀스, 인도정비,조경수식재 등	351
지역역량강화 및 부대비용	S/W	교육	지역역량강화사업	357
		홍보마케팅
		운영비		30
		부대비용		500

▢ 추진실적 및 향후계획

❍ 2018. 11월 15일 : 예비계획 용역 발주

❍ 2019. 01월 15일 : 20년도 신규사업 사업성 컨설팅 (경북도청)

❍ 2019. 02월 11일 : 공모사업 신청 등록

❍ 2019. 02월 12일 ~ 3월 8일: 신규사업성 시·도 검토(도평가)

❍ 2019. 03월~04월 중 : 신규사업성 농림축산식품부 검토(중앙평가)

❍ 9월 : 농식품부 사업성 평가 결과 공모 확정

❍ 2020년 1월 : 실시설계용역 발주

새마을팀

17-3		소규모주민숙원사업(자체사업)		계속

사 업 명	위 치		사업량	사 업 비				비 고
	읍면	리동		계	국비	도비	군비
합 계	10	지구		710	-	-	710
학곡2리(범모래) 농로 포장공사	평해	학곡	L=170m	50	-	-	50	설계중
주인3리 황금소나무 도로개설공사	북	주인	L=50m	80	-	-	80	설계중
매화2리 마을안길 정비공사	매화	매화	L=150m	100	-	-	100	설계중
구산2리 마을안길 배수로설치공사	기성	구산	L=100m	50	-	-	50	설계중
덕산2리 배수불량 개선지구 마무리공사	온정	덕산	L=150m	90	-	-	90	설계중
화성1리 배수로 정비공사	죽변	화성	L=100m	80	-	-	80	설계중
신림리(본동) 안길확장공사	울진	신린	L=30m	50	-	-	50	설계중
쌍전1리(깨밭골) 농로포장공사	금강송	쌍전	L=250m	40	-	-	40	설계중
구산3리(굴구지) 농로확장공사	근남	구산	L=350m	70	-	-	70	설계중
읍내5리 마을안길 포장공사	울진	읍내	L=100m	100	-	-	100	설계중

새마을팀

17-4		새마을주민숙원사업(도비보조)		계속

사 업 명	위 치		사업량	사 업 비				비 고
	읍면	리동		계	국비	도비	군비
합 계	10	지구		1,090	-	545	545
울진읍 명도1리(등명) 소하천(화방천 지류)정비공사	울진	명도	1식	120	-	60	60	설계중
금강송면 삼근1리 동묘산 등산로 설치공사	금강송	삼근	1식	100	-	50	50	설계중
금강송면 왕피리(리도207호선) 배수로 설치공사	금강송	왕피	1식	50	-	25	25	설계중
금강송면 소광2리(평전) 배수로 설치공사	금강송	소광	1식	40	-	20	20	설계중
죽변면 화성1리 마을진입로 교량설치공사	죽변	화성	1식	250	-	125	125	설계중
북면 소곡리 마을진입로 공사	북면	소곡	1식	30	-	15	15	설계중
근남면 노음3리(눈길) 도수로 정비공사	근남	노음	1식	200	-	100	100	설계중
매화면 오산2리(초산) 축대붕괴 보강공사	매화	오산	1식	100	-	50	50	설계중
기성면 사동1리 마을안길 정비공사	기성	사동	1식	50	-	25	25	설계중
후포면 금음1리(쇠골) 농로 및 세천정비공사	후포	금음	1식	150	-	75	75	설계중

새마을팀

17-5		마을회관 신축 및 개선사업(4개사업)		계속

사 업 명	위 치		사업량	사 업 비				비 고
	읍면	리동		계	국비	도비	군비
합 계	3	지구		180	-	-	180
정림1리 마을회관 개선공사	울진	정림 1리	1식	70	-	-	70	설계중
고목1리 동회관 보수공사	북면	고목 1리	1식	60	-	-	60	설계중
왕피2리 마을회관 정비공사	금강송	왕피 2리	1식	50	-	-	50	설계중

경관디자인팀

18		가로등․보안등 광원 변경 지속 추진		<신규>

❍ 가로등․보안등의 광원을 친환경, 고효율 LED등으로 2021년까지 교체하여 에너지를 절감하고 스마트한 조명 환경 조성

▢ 사업개요

❍ 대상지역 : 10개읍면

❍ 사 업 량 : 4,260등(LED 설치 7,245등)

❍ 사 업 비 : 3,600백만원

∙ 2020년 소요 사업비 : 1,200백만원

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022(6개년)

❍ 사업내용 : 광원 교체(LED교체)

❍ 연도별 교체계획

구 분		합 계	※ 추진실적 (‘17~’19)	3단계(’20)	4단계(’21)	5단계(’22)
교체목표		100% (누적 진행율)	63 (63)	12 (75)	12 (87)	13 (100)
조명등	합 계	11,505	7,245	1,420	1,420	1,420
	가로등	3,947	2,341	535	535	536
	보안등	7,558	4,904	885	885	884
투자예산(백만원)		6,800	3,200	1,200	1,200	1,200

※LED 설치 현황 : 11,505등 중 7,245등(63%) - 2019. 8.현재

▢ 기대효과

❍ 유지보수 비용 절약 : 520백만원(연간, 전체 교체시)

∙ 전기요금의 30%이상 절감, 가로등 유지보수비 70% 절감

❍ 친환경 정책에 부응 : 기존 등 대비 친환경, 장수명(5배)

19		LED 가로등 교체 및 가로등 정비체계 운영		<계속>

경관디자인팀

❍ 노후 되어 잦은 고장으로 군정의 신뢰도 저하 및 가로등 품질 불신에 따른 군정 만족도 저하로 행정 불신 초래

❍ 기존 가로등을 LED가로등으로 교체하여 야간 도로 주행안정성 확보와 주민 불편해소에 기여하고자 함.

▢ 사업개요

❍ 사 업 량 : 11,505등 (보안등 7,558, 가로등 3,947)

❍ 사 업 비 : 2,750백만원(군비)

(단위:백만원)

사업명	합 계	전기요금	유지관리비	환한골목프로젝트(공약)	LED 교체	가로등 설치
사업비	2,750	600	500	250	1,200	200
사업내용		10개 읍면	재료비 및 유지보수비	보안등 확대설치	교차로(420등), 읍면(1,000등)	백암운동장 진입로 등
수 량		-	-	140개소	1,420개소	40개소
※ 2019년 추진실적			·환한골목프로젝트 추진(가로등설치) – 10개읍면 230개소

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. ~ 12. : 2개권역 유지관리 단가계약 체결 지속관리

▢ 기대효과

❍ LED 변경을 통한 전기 사용료 절감

❍ 고효율, 평균수명 증가로 인한 유지보수비 절감

❍ 운전자의 시야확보 개선으로 교통사고 방지

❍ 정기적인 시설물 점검 및 교체로 감전․누전방지등 안정성 확보

경관디자인팀

20		경관디자인사업 추진		<계속>

❍ 경북도에서는 기존의 형광등이용 간판을 LED를 이용한 에너지절약형 간판으로 개선하고자 민간 참여형 간판정비사업 지속추진

❍ 지역특성을 살린 아름다운 간판 개선으로 쾌적한 주거환경 조성

▢ 사업개요

❍ 응모지역 : 울진읍(북부시가지)  ※ 전선지중화사업 완료지

❍ 사 업 량 : 가로형 간판 약 150개 간판

❍ 응모분야

∙ 옥외광고 : 간판개선을 통한 아름다운 가로경관 조성

❍ 사 업 비 : 500백만원(도비 150, 군비 350)

※ 2019년 응모사업 추진현황

사업분야	사업비 (백만원)	사업위치	사업량	추진현황
계	801
옥외광고	500	매화면, 근남면, 금강송면	간판 설치 120개소	‘19. 8. : 착공 ‘20. 4. : 준공예정
유해환경	134	매화면, 근남면,금강송면	방범용 CCTV 10개소 설치	‘19. 5.: 사업완료
공공디자인	267	매화면	조형물 설치 조명등 설치	‘19. 12. : 사업완료

▢ 추진계획

❍ 2020. 5 : 협상에 의한 계약체결

❍ 2020. 6 : 간판개선사업 추진

▢ 기대효과

❍ 시가지 경관개선을 통한 주민 삶의 질 향상 및 상가 활성화

❍ 주민불편 해소 및 도로변 입면정비를 통한 도시미관 증진

경관디자인팀

21		현수막게시대 교체 및 설치		<계속>

❍ 현수막 게시대 부족으로 인한 불법광고물 발생 차단

❍ 올바른 광고문화 정착과 깨끗한 거리환경 조성을 위한

노후한 현수막게시대 교체 및 저단형 현수막 게시대 설치 추진

▢ 사업개요

❍ 응모지역 : 울진읍(북부시가지)  ※ 전선지중화사업 완료지

❍ 사 업 량 : 가로형 간판 약 150개 간판

❍ 응모분야

∙ 옥외광고 : 간판개선을 통한 아름다운 가로경관 조성

❍ 사 업 비 : 500백만원(도비 150, 군비 350)

※ 2019년 응모사업 추진현황

사업분야	사업비 (백만원)	사업위치	사업량	추진현황
계	801
옥외광고	500	매화면, 근남면, 금강송면	간판 설치 120개소	‘19. 8. : 착공 ‘20. 4. : 준공예정
유해환경	134	매화면, 근남면,금강송면	방범용 CCTV 10개소 설치	‘19. 5.: 사업완료
공공디자인	267	매화면	조형물 설치 조명등 설치	‘19. 12. : 사업완료

▢ 추진계획

❍ 2020. 5. : 협상에 의한 계약체결

❍ 2019. 6. : 간판개선사업 추진

▢ 기대효과

❍ 시가지 경관개선을 통한 주민 삶의 질 향상 및 상가 활성화

❍ 주민불편 해소 및 도로변 입면정비를 통한 도시미관 증진

경관디자인팀

22		옥계현충길 벽화설치		<계속>

❍ 충혼탑 진입 “호국의 길”을 테마로 한 담장벽화 사업을 진행

❍ 순국선열에 대한 경외심 고취 및 생활권 주변 경관개선

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 울진읍 옥계현충길

❍ 사 업 량

∙ 3구간 : 27번지 ~ 31번지 (A=175㎡)

∙ 4구간 : 33번지 ~ 48번지 (A=173㎡)

※ 1구간 ~ 2구간 벽화설치 완료

❍ 사 업 비 : 40백만원-군비

▢ 추진계획

❍ 2020. 3. : 벽화설치 시행(구간별 진행)

❍ 2020. 6. : 벽화설치 완료

▢ 기대효과

❍ 충혼탑 진입로의 노후 벽화 개선을 통한 도시미관 증진

❍ 생활권 주변 경관개선을 통한 주민 자긍심 향상

경관디자인팀

23		해안도로변 경관용 표지병 설치사업		<신규>

❍ 해안도로변의 여건을 감안하여 사고다발지역 및 자전거 도로에 표지병을 설치하여 해안변을 찾는 관광객들에게 아름다운 경관 제공은 물론 각종사고를 미연에 방지하여 이용객의 안전도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 근남면 ~ 매화면 해안도로 구간

❍ 사 업 량 : L=18㎞(표지병 4,500EA)

❍ 사 업 비 : 360백만원(1차 200,  2차 160)

❍ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 2021. 12

▢ 추진계획

❍ 설치장소

∙ 횡단보도 전방 차량 정지선

∙ 도로합류·분리되는 안전지대, 차도와 자전거도로의 경계선

❍ 설치방법

∙ 횡단보도 전방 차량 정지선 : 1m 간격 설치

∙ 도로합류 및 차도와 자전거도로의 경계선 : 4m간격 설치

❍ 추진일정

∙ 2020. 3. : 기설치 지역 벤치마킹

∙ 2020. 4. : 설치대상지 조사

∙ 2020. 5. ~ 7. : 1차구간 사업착수 및 완료

∙ 2021. 5. ~ 7. : 2차구간 사업착수 및 완료

▢ 기대효과

❍ 차도와 자전거도로의 경계선 및 사고다발지역 중앙분리 표시로    교통사고 예방

❍ 야간에 해안도로를 찾는 이용객들에게 볼거리 제공

도시재생T/F팀

24		죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진		<계속>

❍ 국정운영 계획에 맞추어 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로

도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련

❍ 지역주민의 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화

▢ 사업개요

❍ 사 업 명 : 청죽미미항

❍ 위    치 : 죽변면 죽변리 290-66번지 일원

❍ 사 업 량 : 109,571㎡

❍ 사 업 비 : 14,533백만원(국비8,000 도비1,333 군비4,000 기금1,200)

❍ 사업기간 : 2020년 ∼ 2023년(4년간)

❍ 사업내용

∙ 주거복지개선 : 가옥리노베이션, 안전길 조성, 포켓 문화쉽터 조성 등

∙ 상생생활SOC구축 : 죽변 어울림플랫폼 구축 및 운영

∙ 상권특성화 : 중앙로 상징거리 조성, 전통시장 가로 정비 등

∙ 문화마당 조성 : 죽변항길 마당길 조성, 미미항 어울림 축제 등

▢ 추진실적

❍ 2018. 2. 1. : 도시재생 활성화계획 수립 용역 착수

❍ 2019. 3. 8. : 울진군 도시재생전략계획 승인

❍ 2019. 2.11. : 울진군 군의회 의견청취 및 경북도 승인 신청

❍ 2019. 4.22. : 활성화 계획(안) 주민설명회 및 한수원 MOU체결

❍ 2019. 8. 2. : 2019년 하반기 도시재생 뉴딜 공모신청

❍ 2019. 8.14. : 경북도 광역 현장실사

❍ 2019. 8.26. : 경북도 광역 최종발표평가

❍ 2019. 8.27. : 경북도 광역 평가 선정

❍ 2019. 9.    : 국토부 적격성 심사

❍ 2019.10. 8. : 도시재생특위심의 개최, 사업선정(국토부 발표)

❍ 2019.11.20. : 국토부 실현가능성 및 타당성 평가 발표

▢ 추진계획

❍ 2020. 1.  : 건축경관마스터플랜 수립 용역 시행

❍ 2020. 1.  : 도시재생(현장)지원센터 직원 채용‧운영

❍ 2020. 1.  : 죽변면 도시재생 활성화 실행계획 및 사업 추진

❍ 2020. 2. ∼ : 주민역량강화 교육 및 도시재생 사업 추진

※ 울진군 도시재생(현장)지원센터 채용 사업 시행 개요

∙ 위    치 : 울진군청 본관 3층

∙ 직원구성 : 센터장, 사무팀장, 운영사무원 각 1명

∙ 근무형태 : 센터장 비상근, 사무팀장 및 운영사무원 상근

∙ 근무기간 : 2020. 2. 1. ∼ 2020. 12. 31.

∙ 기타인력 : 공공건축가 1명 위촉 예정

▢ 기대효과

□ 쇠퇴한 도시지역의 도시환경정비 및 주민공동체 활성화를 통해

도시의 쇠퇴를 방지하고 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 도시재생 뉴딜사업 시행으로 재개발사업보다 단위사업 규모가 축소   됨에 따라 지역 중소건설업계의 사업 참여 기회가 확대되어 지역경제   활성화와 지역 일자리 창출에 기여

도시재생T/F팀

25		온정면 농어촌 소규모 어린이 놀이터 조성		<신규>

❍ 지역사회에서 소외되고 있는 산간지역의 어린이들이 방과 후 놀이 문화를 접할 수 있도록 돌봄기능을 구비한 종합 놀이터 조성

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 온정면사무소 내

❍ 사 업 비 : 400백만원(도 100, 군 240, 기타 60)

❍ 사업면적 : 600㎡(실내 돌봄시설 100㎡)

❍ 사업기간 : 2019년 ∼ 2020년

❍ 사업내용 : 돌봄시설 및 놀이터 조성

▢ 추진실적

❍ 2019. 7. 9. : 농어촌 소규모 놀이터 조성사업 공모

❍ 2019. 7.19. : 농어촌 소규모 놀이터 조성사업 선정

❍ 2019. 8.28. : 주민협의체 구성

❍ 2019. 9. 5. ∼ 11. 11. : 1∼3차 아동 및 주민협의체 워크숍 실시

❍ 2019.10.31. : 사업시행 보조금 교부(세이브더칠드런코리아 동부지부)

❍ 2019.12.18. : 놀이터 실시설계 검토

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 공사 착공

❍ 2020. 7. : 공사 준공 및 개장식

▢ 기대효과

❍ 실내외 놀이터를 병행 설치하여 방과 후 돌봄 기능도입으로   어린이들에게 안전하고 쾌적한 놀이 환경 조성

도시재생T/F팀

26		낙후지역발전 특별회계 지원사업 추진		<신규>

❍『경상북도 지역균형개발 및 지원에 관한 조례』에 따른 낙후지역 사업 발굴

❍ 성장촉진형의 지역개발 및 주민 생활편의 기반시설 낙후도 개선

▢ 사업개요

사업명	고래등 놀이터 조성	후포 어린이 놀이터 조성	보부상옛길 역사문화 쉼터 조성
위 치	남부초등학교 옆 공터	후포 문화예술관 앞	십이령 주막촌 앞
면 적	2,568㎡	400㎡(부지면적 3,398㎡)	2,818㎡
사업기간	2020~2021	2020~2022	2020~2021
사업비	2,200백만원	500백만원	1,100백만원
주요사업	․ 물놀이터 900㎡ ․ 화장실 70㎡ ․ 공원 등 1,358㎡ ․ 구)읍파출소 벽천공원 240㎡	․ 야외놀이터 400㎡	․ 공연장 겸 캠핑장 1,500㎡ ․ 특산물판매장 100㎡ ․ 공원 등 1,168㎡

▢ 추진실적

❍ 2019. 4.30. : 경상북도 낙후지역발전 기본계획(변경) 용역

❍ 2019. 6.13. : 사업계획 신청

❍ 2019.10.29. : 현장조사(경북도)

❍ 2019.12.13. : 사업계획서 보완

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 사업선정(경북도 기본계획(변경)용역 최종보고회)

❍ 2020. 1. ∼ 2022.12. : 설계용역 및 사업추진

▢ 기대효과

❍ 군내 미 활용되고 있는 유휴공간을 주민 수요 응답형 공간으로   활용하여 주민의 삶의 질 향상

도시재생T/F팀

27		성류온천 개발 계획 취소 및 온천원 보호구역 해지		<신규>

❍ 사업기간 만료 및 장기간 개발되지 않은 울진성류온천에 대하여 「온천법」에 따라 온천개발계획 승인취소 및 온천원 보호지구 지정해제를 하고자 함.

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 근남면 수곡리 산 144번지 일원

❍ 면    적 : 254,236㎡(지구지정면적 : 991,383㎡)

❍ 사업기간 : 2005. 4. ∼ 2018. 12.(2차례 연장)

❍ 온천현황

∙ 온천공수 : 3개공(온도 27.9 ∼ 28.8℃)

∙ 가채수량 : 4,000㎥/일, 이용계획량 1,640㎥/일)

∙ 개발신청자 : 울진성류온천개발(주)

∙ 토지소유권 : 임용성(경매낙찰자)

▢ 추진 경과 및 현황

❍ 1993.11.25. : 온천발견신고수리(울진군)

❍ 1996. 5.23. : 온천지구지정(경북도 → 울진군)

❍ 2001. 2.28. : 온천개발계획승인 신청(사업자 → 경북도)

❍ 2005. 4.21. : 온천개발계획 승인

❍ 2009. 6. 1. : 기간 연장통보(~2013년 까지)

❍ 2013. 6.18. : 기간 연장통보(∼ 2018.12.31.까지)

❍ 2013. 6.26. : 경매로 인한 토지 소유권 변경

❍ 2018.12. 5. : 성류온천개발진흥지구 관련 민원진달(군→도)

❍ 2018.12.14. : 온천개발계획 기간 변경요청(울진성류온천개발(주) 외1)

❍ 2019. 1.30. : 변경신청 권한 없음 통보(울진성류온천개발(주)외 1)

❍ 2019. 2.25. : 온천개발계획수립 승인취소 등을 위한 행정절차     이행 요청(도→우리군)

❍ 2019.10.21. : 개발계획 취소 및 보호지구 지정 해제 용역 착수

❍ 2019.12. : 경북도 도시계획과 및 행안부 협의 및 용도지역      결정 (변경) 용역 시행

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 온천우선이용권자 청문 및 주민설명회 실시

❍ 2020. 2. : 온천개발계획 승인취소 요청(울진군→경북도)

❍ 2020. 3. : 경상북도 관련부서 협의

❍ 2020. 4. : 온천개발계획 승인취소 및 온천원보호지구 지정해제

❍ 2020. 4. ∼ : 군관리계획(용도지역) 변경

▢ 기대효과

❍ 온천개발계획 승인 취소 후 온천원 보호지구 지정해제 및 지형도면고시를 통하여 토지이용규제의 투명성을 확보하여 주민의 토지이용상의 불편 감소

▢ 문제점

❍ 보호지구 지정해제에 따른 용도지역 변경 시 주민들의 의견 수렴 및 협의 필요

도시재생T/F팀

28		행복씨앗마을(매화마을 활성화 사업) 추진		<계속>

❍ 매화마을을 거점지역으로 만들어 주변 마을과 군을 연결하는 행복씨앗마을 구현의 중간거점 조성

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 매화면 매화1리 일원

❍ 사 업 량 : 주민역량강화 및 리모델링 등

❍ 사 업 비 : 193백만원(도 90, 군 100, 자부담 3)

❍ 사업기간 : 2018. 9. ∼ 2019. 12.

▢ 추진실적

❍ 2018. 6.13. : 경북형 행복씨앗마을사업 공모신청

❍ 2018. 7.31. : 경북형 행복씨앗마을사업 선정

❍ 2019. 2. ∼ 9. : 매화마을 활성화사업 추진

∙ 2019. 3. ∼ 9. : 지역역량강화

∙ 2019.12. : 매화홍보마케팅 및 스토리텔링

❍ 2019. 8.13. : 열차카페 부지 매입(매화리 1166-7, 전, 505㎡)

❍ 2019. 8.21. : 열차카페 부지 사용허가

❍ 2019. 9.18. : 열차카페 부지 추가 매입(매화리 1167-2, 전 190㎡)

❍ 2019.12. : 열차카페 기반 정비 및 매화나무 둘레길 조성

▢  추진계획

❍ 2020. 1. : 만화테마 열차카페 개소 및 영업개시

▢  기대효과

❍ 주민역량강화를 통하여 공동체 활성화 교육 등을 실시함으로써   자생력있는 인력 창출 도모

❍ 이현세 만화거리 주변시설 개선을 중심으로 특색있는 프로그램을   통하여 방문객 유인력을 강화함으로써 방문객이 증가할 것으로 기대

도시재생T/F팀

29		온천향장제품 기술이전에 따른 홍보 지원		<계속>

❍ 울진군의 천연자원인 덕구온천수와 해양소재 융․복합 개발하고 기술 이전한 향장제품에 대하여 생산ㆍ판매하여 울진군 온천을 홍보하는데 기여하고자 함.

▢ 사업개요

❍ 사 업 비 : 연 30백만원

❍ 사 업 량 : 화장품 2종 세트 약 1,000세트

❍ 협약기관 : 울진군/환동해산업연구원 ⇔ ㈜아무르콜라겐

❍ 기술이전기간 : 2019. 4. 1. ∼ 2022. 3. 31.

∙ 기술이전 업체

- 업 체 명 : 아무르콜라겐(대표이사 : 연규식)

- 주    소 : 포항시 남구 구룡포읍 호미로 251

- 주요실적 : 불가사리 추출 콜라겐 관련 화장품 개발 및 판매

❍ 주요내용

∙ 울진군 온천수를 활용한 지역 향장제품에 대한 기술이전으로       상용화를 위하여 매년 구입 협약에 의한 향장제품 구입 및 홍보

∙ 사업초기 지역제품인지도 부족에 따른 업체의 부담 해소를 위한 물품   구입비 지원

▢ 추진실적

❍ 2015. ∼ 2016. : 향장제품 연구용역 개발

❍ 2016. 4. : 수애진 제품 상표등록

❍ 2017.12. : 기초 및 기능성 신제품 연구개발 완료

❍ 2019. 3.20. : 기술이전협약

❍ 2019. 7.19. ∼ 12. 9. : 향장제품 구입

※ 제품 개발 현황

∙ 사업기간 : 2015 ∼ 2017(3년간)

∙ 총사업비 : 400백만원(도비 200, 군비 200)

∙ 연구기관 : (재)경북해양바이오산업연구원

∙ 주요내용 : 울진군 온천수를 활용한 지역 향장제품개발

(단위 : 백만원)

연 도	사 업 비	연 구 내 용	제 품
2015	100 (도 50, 군 50)	온천수 + 붉은대게껍질	미스트, 샴푸, 린스, 헤어에센스, 비누
2016	200 (도 100, 군 100)	온천수 + 불가사리	바디클렌저, 바디로션, 마스크팩
2017	100 (도 50, 군50)	온천수 + 고포미역	스킨, 로션, 비비크림

▢ 추진계획

❍ 2020. 2. ∼ : 2020년 제품 구입 재계약 협약

❍ 2020. 3. ∼ : 향장품 구입 및 홍보

▢ 기대효과

❍ 울진의 특산자원인 해양생물과 온천수로 개발된 제품을 홍보하여   울진군 브랜드가치 상승효과 기대

❍ 지역자원인 온천수와 해양소재에 대한 울진군 부가가치 상승효과

도시재생T/F팀

30		울진읍 농촌중심지 활성화 공모 추진		<주민건의>

❍ 농촌 공간의 효율적․입체적 개발을 통해 농촌 지역 어디서든 기초 생활 서비스를 보장함으로써 농촌 삶의 질 개선

❍ 농촌중심지 기능 확충과 함께 배후마을로의 서비스 제공기능 확대

▢ 공모개요

❍ 위    치 : 울진군 울진읍 일원

❍ 지원한도 : 15,000백만원 이내(최대 18,000백만원)

❍ 지원기준 : 국비 70%, 지방비 30%

❍ 사업기간 : 5년 이내

❍ 사업내용

∙ 읍소재지와 배후마을을 포함하는 농촌중심지 활성화 계획을          수립하고 통합 개발

∙ 지역주민 역량강화를 위한 현장포럼, 주민협의체계 구축 및 운영    및 발전계획 수립 등 사전준비 단계 추진

▢ 추진경과 및 추진계획

❍ 2019. 9. 3. : 농촌중심지 활성화 예비계획서 수립 및 현장포럼 용역 계약

❍ 2019. 9. 5. : 사업설명회(울진읍 이장)

❍ 2019.10.29. : 1차 주민설명회

❍ 2019.12.24. : 2차 주민설명회

❍ 2020. 1. ∼ 2. : 100인 토론을 통한 사업 발굴

❍ 2020. 3. : 신규 사업 신청 준비 및 신청

▢ 기대효과

❍ 농촌마을 공동체 활성화 및 주민의 삶의 질 향상