맑은물사업소

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 주요 현안사항

○상하수도분야 민원만족도 향상	5

○제18호태풍『미탁』피해 상․하수도시설 복구 추진	6

○제18호태풍『미탁』피해 개선복구사업(배수펌프장) 추진	7

○지방상수도 노후정수장 시설개선사업[여과지개량]	8

○스마트 수도미터 원격검침 구축사업	9

○지방상수도 현대화사업	10

○울진지방상수도[북면] 급수구역 확장사업	14

○기성지방상수도[다천,삼산리 등] 확장사업	15

○온정면 등 급수구역 확장사업	16

○지방상수도[근남면] 급수구역 확장사업	17

○소규모수도시설 민간위탁 운영관리	18

○소규모수도시설 노후시설 개선사업	19

○후포 공공하수처리시설 증설사업	20

○후포 하수관로 정비사업[2단계]	21

○울진군 노후하수관로 정비[긴급]	22

○망양 농어촌마을하수도 설치사업	23

○진복 농어촌마을하수도 설치사업	24

○봉산 농어촌마을하수도 설치사업	25

○울진공공하수처리시설 분뇨 전처리시설 설치사업	26

○노후 공공하수처리시설 개선사업	27

○방류수 수질분석장비(TOC분석용)설치사업	28

Ⅰ. 일반현황

▢ 직원 정․현원

구 분	총 계	공 무 원				실무원 (검침원)	기간제
		소계	소장	팀장	일반직
정원	50	31	1	5	25	16	3
현원	45	26	1	5	20	16	3
증감	-5	-5	0	0	-5	0	0

▢ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	소 관 업 무	비고
계	26
소 장	1	상하수도 사업 종합관리
경영관리팀장	4	사업소 종합기획 조정, 청사관리 공기업 회계 및 일반회계 운영 집행 상하수도 사용료 부과·징수
지방상수도 운영팀장	6	울진지방상수도 정수센터(4개소) 운영 취수원 주변지역 지원사업 추진 상수원보호구역 관리 지방상수도 취정수장 및 배수지 관리
지방상수도 시설팀장	6	지방상수도 기본계획수립 및 시행 블록시스템 구축 및 유수율제고사업 추진 상수도시설 운영 및 관망관리 급수신청 및 사용허가, 저수조 관리 등
마을상수도팀장	4	마을상수도 및 소규모급수시설 기본계획수립․시행 마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 소규모수도시설 통합관리시스템 운영관리 마을상수도 및 소규모수도시설 비상급수 지원
하수도팀장	5	울진군 하수도 기본계획수립․시행 공공․소규모(마을)하수처리장 시설사업 추진 하수도․하수관거 사업추진 및 유지관리 배수펌프장 유지관리 공공하수처리장(6개소),소규모(마을12개소)운영관리

▢ 각종 통계현황

❍ 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계				공기업특별회계
2020년 (당초)	2019년			2020년 (당초)	2019년
	소계	당년도	이월		소계	당년도	이월
30,822	111,327	109,537	1,790	27,000	34,863	26,100	8,763

❍ 상수도 현황

구 분	계	지방상수도	소규모 수도시설	전용상수도	기 타 (우물,샘)
개소수	154	4	143	7	-
인구(명)	49,314	38,737	7,678	2,413	486
비율(%)	100	78.5	15.6	4.9	1.0

※ 지방상수도 보급률 : 78.5%,   유수율 : 69%

❍ 하수도 현황

구 분	계	공공하수도	마을하수도	하수도미설치
개소수	18	6	12
인구(명)	49,314	33,457	3,616	12,241
비율(%)	100	67.8	7.4	24.8

※ 하수시설 보급률 : 75.2%

▢ 각종 시설물 관리현황

❍ 상수도시설 현황

시 설 명		소 재 지	시설용량 (㎥/일)	취 수 원	비고
계		147개소	43,351
지 방 상수도	소 계	4개소	35,400
	울진정수장	울진읍 새마실1길 55-31	6,000	울진남대천	1977
	평해정수장	평해읍 월송정로 39-17	11,000	평해남대천	2010
	온정정수장	온정면 백암온천로 1289-50	3,400	온정소태천	2016
	근남정수장	근남면 노음리 709-1	15,000	왕피천, 광천	2019
소규모 수도시설	소 계	143개소	7,951
	마을상수도	26개소	3,433	지하수, 계곡수 호소수, 복류수
	소규모급수시설	117개소	4,518	지하수, 계곡수 복류수

❍ 하수처리시설 현황

◦ 공공하수처리시설

시 설 명	소 재 지	시설용량 (톤/일)	처리방법	비 고
계	6개소	25,000
울진하수처리시설	울진읍 말루길 214	9,000	Bio-SAC BNR	2003
온정하수처리시설	온정면 소태하암길 59	6,500	회전원판접촉법	1994
죽변하수처리시설	죽변면 봉화길 104	3,000	SAM Process	2012
후포하수처리시설	후포면 삼덕로 99	4,000	SAM Process	2012
북면하수처리시설	북 면 남산길 214	1,200	BSTS-Ⅱ	2014
평해하수처리시설	평해읍 월송정로 225-7	1,300	KSBNR	2016

※ 슬러지처리시설(고화처리) : 5톤/일(울진하수처리시설 내)

◦ 마을하수처리시설

시 설 명		소 재 지	시설용량 (톤/일)	처리방법	비 고
계		12개소	1,310
울진읍	무월동	울진읍 호월리	50	고효율오수처리
	호월3리	울진읍 호월리	30	분리 접촉포기법
평해읍	삼달1리	평해읍 삼달리	45	유동상담체를 이용한 고도처리방법
북면	주인1리	북 면 주인리	45	BCS - II공법
금강송면	삼근리	금강송면 삼근리	60	SMMIAR
근남면	구산1리	근남면 구산리	50	BSTS - II공법
매화면	매화1리	매화면 매화리	120	FNR PROCESS
	매화2리	매화면 매화리	50	SMMIAR
	오산리	매화면 오산리	350	H-SBR공법
기성면	구산리	기성면 구산리	200	BSTS - II공법
	척산리	기성면 척산리	250	KS MBR공법
온정면	내선미	온정면 선구리	60	SMMIAR

❍ 배수펌프장 현황

시 설 명	소 재 지	시설용량	처리방법	비 고
계	2개소
울진배수펌프장	울진읍 읍내리	400HP×3대 250HP×1대	강제배수
후포배수펌프장	후포면 삼율리	50HP×3대	강제배수

※ 평해배수펌프장 : 평해읍 평해리, 시설용량 175HP×1대 125HP×1대

처리방법(강제배수), 한국농어촌공사 관리

Ⅱ. 주요 업무계획

경영관리팀

1		상하수도분야 민원만족도 향상

❍ 생활속 친절 실천과 마인드 함양으로 소통하고 공감하는 행정 구현

❍ 상하수도 행정의 질 높은 대민서비스 제공으로 민원만족도 향상

▢ 개    요

❍ 군민과 소통하고 공감하는 행정서비스로 민원만족도 향상

∙ 생활속 친절실천과 교육을 통한 마인드 함양

∙ 상수도 고객만족도 조사결과 업무 반영으로 민원만족도 향상

∙ 수도요금 감면대상 확대 및 누수감면 요건완화로 군민부담 완화

▢ 추진내용

❍ 생활속 친절 실천 및 군민 소통행정 추진

∙ 생활속 친절 실천 : 업무개시 전 친절교육과 인사

∙ 친절 및 민원만족도 향상 직원 교육

∙ 상하수도 고지서 및 홍보물 제작 시 범군민 친절운동 홍보

- 상하수도 고지서 : 240,000매/년

- 상하수도관련 홍보물 : 20,000매/년

∙ 상수도 고객만족도 조사(지방공기업평가원, 1회/년)결과 업무 반영

❍ 취약계층 지원 등 행정서비스 제공 확대

∙ 취약계층(국민기초생활수급자 등) 수도요금 감면 등 홍보 강화

- 감면대상 확대 : 유치원, 다자녀가구(2020. 1.부터)

- 감면대상 홍보 및 신청 안내 적극 추진

※ 2018년 수도요금 감면현황 : 87,752건/년(312백만원)

∙ 누수감면 요건 완화 및 누수 알림으로 군민부담 완화

- 누수감면 신청기간 30일 → 90일 확대

- 수도사용량 급증가시 누수 안내 스티커 제작․부착

▢ 기대효과

❍ 친절하고 소통하는 업무처리로 행정신뢰도 제고

❍ 취약계층 지원 등 대민서비스 확대로 민원발생 사전 차단 및

민원만족도 향상

경영관리팀

2		제18호태풍『미탁』피해 상․하수도시설 복구 추진

❍ 제18호 태풍『미탁』피해 상․하수도시설 조기복구 추진으로 주민불편사항 해소

▢ 복구 추진 현황

❍ 피해현황

[단위 : 백만원]

분야별	계		지원복구		자체복구		비고
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
계	44	2,248	15	1,673	29	575
지방상수도	8	1,211	8	1,211	-	-
마을상수도	24	647	5	327	19	320
하수도	12	390	2	135	10	255

❍ 복구현황

[단위 : 백만원]

분야별	계	복구완료	이월	비고
계	44	39	5
지방상수도	8	4	4
마을상수도	24	24	-
하수도	12	11	1

※ 이월사업 : 2020. 3. 까지 완료

경영관리팀

3		제18호태풍『미탁』피해 개선복구사업(배수펌프장) 추진

❍ 제18호 태풍『미탁』피해 개선복구사업(배수펌프장) 추진으로 향후 재난대비

▢ 추진개요

❍ 추진대상 : 배수펌프장 4개소(신설 2개소, 개량 2개소)

∙ 신설 : 울진읍 월변배수펌프장, 평해읍 평해배수펌프장

∙ 개량 : 울진읍 읍내배수펌프장, 후포면 후포배수펌프장

❍ 사 업 비 : 847억원

▢ 추진현황

❍ 2019. 12. 26. : 기본 및 실시설계 용역 착공

▢ 추진계획

❍ 2020.  5. 31. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2020.  7. 31. : 원가심사 및 행정절차 이행

❍ 2020.  9.     : 공사 착공

지방상수도운영팀

4		지방상수도 노후정수장 시설개선 사업〔여과지개량)		<신규>

❍ 온정정수장 콘크리트 여과지를 리모델링(스테인레스 라이닝)

시설개선으로 누수방지 및 맑고 깨끗한 수돗물 생산

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 온정면 온정리 438(보배수온정정수센터내)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 8.

❍ 사 업 량

∙ 여과지 스테인레스 라이닝

∙ 여과지 여과재(자갈, 모래) 교체

❍ 사 업 비 : 433백만원(도비 130, 군비 303)

▢ 추진계획

❍ 2020.  2. : 실시설계 완료

❍ 2020.  5. : 시설공사 착공

❍ 2020.  8. : 시설공사 준공

▢ 기대효과

❍ 노후된 콘크리트 여과지를 스테인레스 라이닝으로 누수 방지

및 수질개선

❍ 여과사 교체로 맑고 깨끗한 수돗물 생산

지방상수도운영팀

5		스마트 수도미터 원격검침 구축사업		<계속>

❍ 사물인터넷(IOT)을 통한 검침 환경개선 및 원격검침 빅데이터를

활용한 상수도 물관리시스템 기반 마련

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 전역(지방상수도 급수구역)

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2024.(5년간)

❍ 사 업 량

∙ 급수 전수 : 17,580전〔급수확장 완료시(보급율 96%) : 23,910전〕

∙ 2020년 설치 전수 : 2,000전

❍ 사 업 비                                      (단위 : 백만원, 전)

구분	계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
급수전수	20,000	2,000	4,500	4,500	4,500	4,500
사 업 비	3,000	300	675	675	675	675

❍ 추진현황

∙ 2019년

- 사업량 : 원격검침 시범사업 실시(200전)

▢ 추진계획

❍ 2020.  2.       : 원격검침 단말기 설치대상 조사

❍ 2020.  3.       : 원격검침 단말기 구입

❍ 2020.  4. ~ 12. : 원격검침 단말기 현장 설치

▢ 기대효과

❍ 수용가 사생활 보호, 부재시 검침, 옥내 누수 분석 등 활용

❍ 실시간 원격검침으로 상수도 요금 등 민원 효율적 대응

지방상수도시설팀

6		지방상수도 현대화사업		[계속]

❍ 상수도 공급 및 관리 체계를 합리적으로 개선하고 노후 상수관로를

정비하여 유수율 및 음용율 제고

❍ 노후 상수관망 현대화로 안정적인 수돗물 공급 및 누수량 절감에

따른 경영수지 개선으로 수도사업 선순환 구조 구축

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 관망정비(울진, 평해, 죽변, 후포), 블록구축(급수구역 전역)

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.(5년간)

❍ 사업내용 : 사업대상 급수구역 목표 유수율 85%

∙ 블록구축 : 대블록 4개소, 중블록 8개소, 소블록 23개소

∙ 노후관망정비 : L=54.4km, 누수탐사 및 복구 1식, 점검구 46개소

∙ 유지관리시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 35,765백만원(국비 23,879, 도비 3,751, 군비 8,135)

❍ 시 행 자 : 한국환경공단

❍ 전체공정율 : 50%

▢ 세부사업 추진

❍ 실시설계 및 관망관리 용역

∙ 과업기간 : 2017. 11. 30. ~ 2021. 12. 31.

∙ 사업내용 : 현장세부조사, 관망도 보완, 누수탐사, 유지관리시스템 구축 등

∙ 사 업 비 : 2,286백만원

∙ 용 역 사 : ㈜이산, ㈜건화, ㈜태성종합기술

∙ 공 정 율 : 56%

❍ 지방상수도 현대화사업 블록구축

∙ 위    치 : 울진군 급수구역 전역

∙ 사업기간 : 2018. 6. 29. ~ 2020. 3. 30.

∙ 사업내용 : 블록구축(대블록 4개소, 중블록 8개소, 소블록 23개소)

∙ 사 업 비 : 5,913백만원(도급 4,133, 관급 1,258, 폐기물 199, 기타 323)

∙ 시 공 사 : 영동건설㈜

∙ 공 정 율 : 90%

❍ 평해(신) 블록 및 직산거일 노후관로 교체

∙ 위    치 : 평해읍 직산․거일리 일원

∙ 사업기간 : 2018. 6. 29. ~ 2019. 8. 28.

∙ 사업내용 : 블록구축 및 노후 상수관 정비(L=10.7㎞)

∙ 사 업 비 : 3,464백만원(도급 2,347, 관급 742, 폐기물 288, 기타 87)

∙ 시 공 사 : 국광종합건설주식회사

∙ 공 정 율 : 100%

❍ 유지관리시스템 구축

∙ 위    치 : 울진군 급수구역 전체

∙ 사업기간 : 2018. 10. 30. ~ 2022. 7. 11.

∙ 사업내용 : 유지관리스템 구축 1식(선도블럭 원격검침 : 1,261개소)

∙ 사 업 비 : 2,106백만원

∙ 시 공 사 : 테크윈시스템 컨소시엄

∙ 공 정 율 : 15%

❍ 울진지방상수도 관망정비공사(계획)

∙ 위    치 : 울진․평해읍, 죽변․후포면 일원

∙ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 9.(36개월)

∙ 사업내용 : 블록구축 및 관망정비(L=40.9㎞)

∙ 사 업 비 : 15,701백만원(도급 11,849, 관급 2,147, 폐기물 1,274, 기타 431)

∙ 2019. 12. : 공사 착공

∙ 2022. 12. : 공사 준공

▢ 추진실적

❍ 2016.  8. : 2017년 대상지 확정(환경부)

❍ 2016. 10. 13. : 위․수탁 체결(한국환경공단)

❍ 2016. 12. 23. ~ 2017. 8. 4. : 기본설계용역

∙ 2017. 5. 12. : 기본설계 경제성검토

∙ 2017. 7. 25. : 기본설계 자문회의

❍ 2017. 11. 30. ~ 2018.  7. : 실시설계용역(1차-블록구축)

∙ 2017. 12.     : 측량조사용역 착수

∙ 2017.  5. 12. : 기본설계 경제성검토

∙ 2017. 11. 16. ~ 2018. 4. 30. : 사전기술검토

❍ 2018.  6. ~ 2019.  8. : 평해(신) 블록구축 및 직산․거일

노후관로 교체공사 시행

❍ 2018.  6. ~ 2019. 11. : 지방상수도 블록구축공사 시행

❍ 2018.  7. ~ 2019.  9. : 실시설계용역(2차-관망정비)

∙ 2019.  5. : 실시설계 경제성검토

∙ 2019.  6. : 실시설계 기술자문

❍ 2018. 11. ~ 2020. 12. : 유지관리시스템 구축공사 시행

❍ 2019.  9. : 평해(신)블록구축 및 직산 ~ 거일 노후관 교체공사 준공

❍ 2019. 10. : 실시설계 2차(관망정비 공사) 준공

❍ 2019. 12. : 시설공사 2차(관망종합정비 공사) 착공

▢ 추진계획

❍ 2020.  3. : 시설공사 1차(블록시스템구축 공사) 준공

❍ 2022.  1. ~ 12. : 지방상수도 현대화사업 성과 보증 및 준공

▢ 재원계획

구 분	합 계	2017년까지	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
총사업비	35,765	6,384	5,784	11,567	10,730	1,300
국 비	21,353	4,049	4,049	6,940	5,365	950
도 비	4,382	521	579	1,388	1,609	285
군 비	10,030	1,814	1,156	3,239	3,756	65
국고보조율(%)	70	70	70	70	50	50

지방상수도시설팀

7		울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업		<마무리>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인

생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 죽변면

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2020.

❍ 사 업 량 : 송․배수관로 L=66.2km, 배수지 1개소, 가압장 7개소

❍ 사 업 비 : 15,619백만원(국비 10,932, 도비 1,407, 군비 3,280)

❍ 추진현황

∙ 2019년까지

구 분	사업구간	사업량	사 업 비(백만원)				비고
			계	국비	도비	군비
계			12,976	9,082	1,168	2,726
2018년 까지	정림~하당리	송․배수관로 5.7㎞, 배수지 1개소	10,887	7,620	981	2,286
	행곡2~3리	배수관로 3.1㎞
	죽변리	급․배수관로 25.6㎞
	하당~상당리	송․배수관로 10㎞, 가압장 1개소
2019년	사계~소곡리	배수관로 6.8㎞, 가압장 2개소	2,089	1,462	187	440

∙ 2020년 계획

- 사업량 : (두천,검성) 배수관로(D80~150) L=10.4㎞, 가압장 4개소

- 사업비 : 2,643백만원(국비 1,850, 도비 238, 군비 555)

▢ 추진계획

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 위생적이고 안정적인 생활용수 공급

지방상수도시설팀

8		기성지방상수도(다천,삼산리 등) 확장사업		<마무리>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인

생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 기성면 다천․이평․방율․삼산리 일원

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2020.

❍ 사 업 량 : 배․급수관로 L=52.8㎞(D150~80), 가압장 5개소

❍ 사 업 비 : 17,543백만원(국비 12,279, 도비 1,579, 군비 3,685)

∙ 2018년 까지 : 15,544백만원(국비 10,880, 도비 1,399, 군비 3,265)

∙ 2020년 계획 :  1,999백만원(국비 1,399, 도비 180, 군비 420)

- 이평․심수 L=5.3㎞, 가압장 3개소

▢ 추진계획

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 위생적이고 안정적인 생활용수 공급

지방상수도시설팀

9		온정면 등 급수구역 확장사업		<계속>

❍ 지방상수도 미 급수지역에 급수구역 확장으로 깨끗하고 안정적인

생활용수를 공급하여 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 온정면 일원

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년간)

❍ 사 업 비 : 9,500백만원(국비 6,650, 도비 855, 군비 1,995)

❍ 사 업 량

읍 면	사업구간	사업량	사업비(백만원)	비고
계	5개소	L=27.6㎞	9,500
울진읍	고성리~신림리	L=8.4㎞	2,414	2020까지
온정면	덕인․조금․소태1리	L=10.3㎞	3,208	〃
	선구리~외선미리	L=8.9㎞	3,878	2025까지

∙ 2019년 까지 : 1,571백만원(국비 1,100, 도비 141, 군비 330)

- 울진읍 고성리 ~ 신림리 L=6.4㎞, 가압장 1개소, 배수지 1개소

∙ 2020년 계획 : 2,571백만원(국비 1,800, 도비 231, 군비 540)

- 울진읍 신림리 ~ 비례 L=1.6㎞, 가압장 1개소

- 덕인․조금․소태1리 L=6.6㎞, 가압장 2개소

▢ 추진계획

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 위생적이고 안정적인 생활용수 공급

지방상수도시설팀

10		지방상수도(근남면) 급수구역 확장사업		<신규>

❍ 근남지방상수도 준공에 따라 지방상수도 급수구역에 포함하여  주민들에게 맑은 물을 안정적으로 공급

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 근남면 일원(19개 마을)

❍ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 비 : 600백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 기존 마을상수도 연결(19개 마을 1,440세대)

※ 급수공사 계획(2019. ~ 2020.)

읍·면	공 사 계 획		비 고
	2019년	2020년(기존관연결)
계	1개 리(99세대)	18개마을 (1,341세대 2,610명)
근남면	진복1리99세대	노음1~3, 행곡1~4, 수곡1~2, 수산, 구산1~4 진복2, 산포1~4	구산3리 제외

▢ 추진계획

❍ 2020.  3. : 실시설계 완료

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 위생적이고 안정적인 생활용수 공급

마을상수도팀

11		소규모수도시설 민간위탁 운영관리

❍ 소규모수도시설, 소독시설, 배수지 청소 등을 전문업체에 위탁하여

효율적으로 유지관리 함으로써 안정적인 수돗물 공급

❍ 소규모수도시설 관리자의 고령화와 전문성 부족으로 수돗물

운영관리의 문제점 해소

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진군 9개 읍면(후포면 제외)

❍ 사업기간 : 2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.

❍ 사 업 량 : 143개소(마을상수도 26, 소규모급수시설 117)

❍ 사 업 비 : 200백만원(군비)

▢ 추진계획

❍ 2020.  2. : 실시설계용역

❍ 2020.  2. : 사업자 선정

❍ 2020.  3. : 용역 착수

▢ 기대효과

❍ 민간 전문업체의 효율적인 유지관리로 생활환경개선 및 삶의 질 향상

❍ 체계적인 유지관리로 수인성 전염병 사전예방과 안정적인 수돗물 공급

마을상수도팀

12		소규모수도시설 노후시설 개선사업

❍ 울진지방상수도 급수구역 확장에 따라 노후시설을 개량하여 지방

상수도 조기 공급

❍ 소규모수도시설을 개선하여 군민들에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 금강송면, 근남면, 매화면 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 11개소(노후관로, 취수시설 등)

❍ 사 업 비 : 1,247백만원(군비)

▢ 추진계획

구분	사 업 명	읍면	사 업 량	사업비 (백만원)	비고
계	11개소			1,247
1	구산3리(원심골) 소규모수도시설 설치사업	근남	급․배수관로 L= 1.8km 취수보 1식	230	신규설치
2	삼근~하원리간 통합상수도 관로연결사업	금강송	급수관로 L=3.2km	850	신규설치
3	옥방마을(죽터골, 불미골) 관로교체공사(설계비)	금강송	급․배수관로교체 L=0.9km	7
4	소규모수도시설 배수지 철거공사	북,근남 매화	물탱크 철거 6개소	30	지방상수도편입지역
5	삼근통합상수도 정수기 여재교체공사	금강송	여재교체1식	50	소모품
6	소규모수도시설 수질불량지역 정수기 구입설치		정수기설치 5개소	60
7	덕신1리 관로교체공사(설계비)	매화	급수관로교체 L=0.9km	20

▢ 기대효과

❍ 노후 수도시설 개선 및 소규모수도시설을 개량하여 맑고 깨끗한

먹는 물을 안정적으로 공급

하수도팀

13		후포 공공하수처리시설 증설사업		<신규>

❍ 후포면 금음리 일원 하수관로정비(2단계) 사업 계획에 따른 하수

처리구역 확대 및 관광객의 증가에 따른 하수발생량 증가

❍ 생활하수의 안정적 처리로 인근수역 수질개선 및 쾌적한 생활환경

조성에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 삼덕로 99(후포 공공하수처리시설)

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2023.(4년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 증설 1,000㎥/일(4,000 → 5,000㎥)

❍ 사 업 비 : 11,800백만원(국비 8,260, 도비 425, 군비 3,115)

∙ 2020년     :    467백만원(국비 327, 도비 18, 군비 122)

∙ 2021년이후 : 11,333백만원(국비 7,933, 도비 407, 군비 2,993)

▢ 추진실적

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

❍ 2019.  8. : 하수도정비기본계획(변경)에 사업계획 반영

▢ 추진계획

❍ 2020.  3. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2020. 12. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2021.  1. : 설치인가 및 공사발주

❍ 2023.  6. : 공사 준공 및 사용개시

▢ 기대효과

❍ 후포면 일원의 생활하수 안정적 처리로 인근수역 수질개선

하수도팀

14		후포 하수관로 정비사업(2단계)		<신규>

❍ 후포면 금음리 지역을 후포 공공하수처리시설 증설과 연계한

하수관로를 정비하여

❍ 방류수역(삼율천, 동해)의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로

지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 후포면 금음리 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2023.(3년간)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=6.73km, 배수설비 190개소

❍ 사 업 비 : 7,020백만원(국비 4,914, 군비 2,106)

∙ 2020년      :  714백만원(국비 500, 군비 214)

∙ 2021년 이후 : 6,306백만원(국비 4,414, 군비 1,892)

▢ 추진실적

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

❍ 2019.  8. : 하수도정비기본계획(변경)에 사업계획 반영

▢ 추진계획

❍ 2020.  3. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2021.  1. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2021.  3. : 설치인가 및 공사발주

❍ 2023. 12. : 공사 준공 및 사용개시

▢ 기대효과

❍ 배수설비 연결 및 개인하수처리시설 폐쇄로 주민생활 환경개선

하수도팀

15		울진군 노후하수관로 정비(긴급)		<신규>

❍ 2016년 울진군 노후하수관로 정밀조사 용역결과에 따라 긴급

보수․교체가 필요한 관로를 정비하여 지반침하로 발생 가능한

안전사고 및 수질오염 예방

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍, 북면, 온정면, 죽변면, 후포면 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2021.(2년간)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=1.1km

❍ 사 업 비 : 1,244백만원(국비 622, 군비 622)

∙ 2020년 전액 예산반영 및 국비교부 신청예정

▢ 추진실적

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

▢ 추진계획

❍ 2020.  2. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2020.  7. : 공사 착공

❍ 2021. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 노후관로 긴급 정비사업 추진으로 하수 누출로 인한 지반침하 등

각종 안전사고 예방 등

하수도팀

16		망양 농어촌마을하수도 설치사업		<신규>

❍ 기성면 망양 1,2리 지역에 농어촌 마을하수도를 설치하여 방류

해역의 수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생

향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 기성면 망양 1,2리 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2022.(3년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=100㎥/일, 하수관로 L=3.142㎞, 배수설비 142개소

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,500, 도비 180, 군비 1,320)

∙ 2020년      :  314백만원(국비 220, 도비 12, 군비 82)

∙ 2021년 이후 : 4,686백만원(국비 3,280, 도비 168, 군비 1,238)

▢ 추진실적

❍ 2018.  2. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2018.  5. : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

▢ 추진계획

❍ 2020.  2. : 경상북도 하수도 자문

❍ 2020.  4. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2020.  8. : 공사착공

❍ 2022. 11. : 공사 준공 및 사용개시

❍ 2022. 12. : 시설물 인수‧인계

▢ 기대효과

❍ 망양리 주민의 생활환경 개선 및 방류해역 수질보전

하수도팀

17		진복 농어촌마을하수도 설치사업		<신규>

❍ 근남면 진복1,2리 지역에 농어촌 마을하수도를 설치하여 방류해역의

수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 근남면 진복1,2리 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2022.(3년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=100㎥/일, 하수관로 L=7.4㎞, 배수설비 235개소

❍ 사 업 비 : 9,400백만원(국비 6,580, 도비 338, 군비 2,482)

∙ 2020년      :  314백만원(국비 220, 도비 12, 군비 82)

∙ 2021년 이후 : 9,086백만원(국비 6,360, 도비 326, 군비 2,400)

▢ 추진실적

❍ 2016. 12. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2017.  6. : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

▢ 추진계획

❍ 2020.  2. : 경상북도 하수도 자문

❍ 2020.  4. : 재원조달 및 사용에 관한 협의(환경부)

❍ 2020.  8. : 공사착공

❍ 2022. 11. : 공사 준공 및 사용개시

❍ 2022. 12. : 시설물 인수‧인계

▢ 기대효과

❍ 진복리 주민의 생활환경 개선 및 방류해역 수질보전

하수도팀

18		봉산 농어촌마을하수도 설치사업		<신규>

❍ 기성면 봉산1,2리 지역에 농어촌 마을하수도를 설치하여 방류해역의

수질보전과 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에

기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 기성면 봉산1,2리 일원

❍ 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년간)

❍ 사 업 량 : 처리장 Q=60㎥/일, 하수관로 L=4.7㎞, 배수설비 193개소

❍ 사 업 비 : 5,200백만원(국비 3,640, 도비 187, 군비 1,373)

∙ 2021년      : 2,000백만원(국비 1,400, 도비 72, 군비 528)

∙ 2022년 이후 : 3,200백만원(국비 2,240, 도비 115, 군비 845)

▢ 추진실적

❍ 2018.  2. : 대행사업 위‧수탁 협약 체결(한국환경공단)

❍ 2018.  5. : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2018. 12. : 2020년도 하수도국고보조 신규사업 신청

▢ 추진계획

❍ 2019.  12. : 2021년도 하수도국고보조 신규사업 재신청

▢ 기대효과

❍ 봉산1,2리 주민의 생활환경 개선 및 방류해역 수질보전

하수도팀

19		울진공공하수처리시설 분뇨 전처리시설 설치사업		<신규>

❍ 관내에서 발생되는 분뇨를 공공하수처리시설에 직투입 할 수 있도록

전처리시설을 설치하여 분뇨수거 지연에 따른 민원 해소 및 분뇨의

적정처리에 기여

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 울진읍 말루길 214(울진공공하수처리시설)

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2020.(2년간)

❍ 사 업 량 : 분뇨전처리시설 Q=30㎥/일

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(군비)

▢ 추진실적

❍ 2019.  5. : 분뇨 직투입 타당성조사 용역(환경위생과)

❍ 2019.  8. : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2019. 12. : 기본 및 실시설계 준공

▢ 추진계획

❍ 2020.  1. : 공사 착공

❍ 2020. 12. : 공사 준공

▢ 기대효과

❍ 분뇨 및 정화조 오니의 적기 수거로 주민불편 해소

하수도팀

20		노후 공공하수처리시설 개선		<신규>

❍ 운영중인 공공하수처리시설 중 노후시설(온정) 개보수로 저하된 처리효율 향상에 기여

❍ 죽변‧후포 공공하수처리시설 운영 핵심자재인 분리막의 보증기간 종료 및 성능저하에 따른 교체 필요

▢ 사업개요

❍ 대상시설 : 온정, 죽변, 후포 공공하수처리시설

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 6.

❍ 사 업 량 : 온정 RBC(회전원판) 보수 8조,

후포 분리막 2계열 교체,

후포 탈수기․링크컨베어 개선 1식

❍ 사 업 비 : 1,400백만원(도비 75, 군비 1,325)

[RBC 150, 분리막 1,000, 탈수기․링크컨베어 250]

▢ 추진실적

❍ 2016. 11. : 온정처리장 기술진단 실시

∙ 기술진단 결과 전면개선(4,000백만원), 부분보수(150백만원)

❍ 2019. 12. : 죽변처리장 분리막 1계열 교체완료

▢ 추진계획

❍ 2020.  6. : 후포 분리막 1계열 교체,

후포 탈수기․링크컨베어 개선 완료

❍ 2020. 12. : RBC 8조 개선완료

❍ 2021.  6. : 후포 분리막 1계열 교체 완료

▢ 기대효과

❍ 노후시설 개선으로 공공하수처리시설 적정운영 및 방류수 수질 개선

하수도팀

21		방류수 수질분석 장비(TOC분석용) 설치		<신규>

❍『물환경보전법』수질오염물질 중 유기물질 측정지표가 COD(화학적

산소요구량)에서 TOC(총유기탄소)로 전환됨에 따라 2021년까지 실험실에 TOC분석장비 설치완료 및 2023년까지 TMS실 6개소에 설치완료 의무화

▢ 사업개요

❍ 대상시설 : 공공하수처리시설 실험실 및 TMS시설

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 6.

❍ 사 업 량 : TOC분석용장비 7대 설치

∙ 울진공공하수처리시설 실험실 1대, 공공하수처리시설 TMS실 6대

❍ 사 업 비 : 560백만원(2020년 소요예산 80백만원)

▢ 추진실적

❍ 2019.  8. : 수질오염물질 측정지표 전환에 따른 설명회

▢ 추진계획

❍ 2020.  9. : 실험실용 분석장비 1대 설치완료

❍ 2023.  6. : 공공하수처리시설 TMS실 6대 설치완료

▢ 기대효과

❍ 수질오염물질 측정지표 전환에 따른『물환경보전법』 기준 준수

및 방류수 실시간 모니터링